｢百濟文化圈 特定地域｣

開發計劃變更 推進狀況

百濟文化圈開發

推 進 企 劃 團

Ⅰ. 綜合開發計劃 變更槪要

○ 규모/범위 : 1,620㎢ / 공주시․부여군․계룡시 (변경없음)

○ 사 업 기 간 : 1994 ～ 2005(12년간)  → 1994 ～ 2010(17년간)

○ 사  업  비 : 당 초 21,434억원(국비 6,443 지방 6,051 민자 8,940)

변 경 22,002억원(국비 9,374 지방 4,618 민자 8,010)

○ 사 업 내 용 : 5개 부문․38개 사업 → 5개 부문․44개 사업

- 문화유적정비 : 9 사업․5,673억원 → 14 사업․5,861억원

- 관광휴양시설 : 8 사업․5,849억원 →  8 사업․4,912억원

- 도시환경정비 : 7 사업․1,635억원 →  7 사업․1,469억원

- 도 로 교 통 망 : 6 사업․3,369억원 →  6 사업․3,824억원

- 계 룡 신 도 시 : 8 사업․4,908억원 →  9 사업․5,936억원

Ⅱ. 지금까지 推進經緯

○ ｢백제문화권특정지역｣ 지정(대통령) -----------	1993. 6. 11
○ ｢백제문화권종합개발계획｣ 확정(대통령) --------	1994. 10. 12
○ 종합개발계획 1차변경 확정(대통령) -----------	1999. 1. 14
○ ｢백제문화권개촉지구｣ 지정․승인(건교부) ------	2000. 2. 10
○ ｢백제문화권개발지원위원회｣ 개최(총리실) ------	2003. 8. 26
○ 개발계획 변경을 위한 ｢추진기획단｣ 구성 - ------	2003. 9. 8
○ 개발계획 변경(안) 중간보고회 개최 -----------	2003. 10. 20
○ 변경계획(案) 관련 시군․실과 협의 -----------	2003. 12. 31

Ⅲ. 開發計劃 變更(案)의 主要內容

< 事業費 變更內譯 總括 >

( 단 위 : %, 억원 )

구 분	당 초				변 경
	계	국 비	지방비	민 자	계	국 비	지방비	민 자
계	21,434	(30) 6,443	(28) 6,051	(42) 8,940	22,002	(43) 9,374	(21) 4,618	(36) 8,010
문화유적정비	5,673	2,335	1,626	1,712	5,861	3,820	1,385	656
관광휴양시설	5,849	359	2,584	2,906	4,912	857	1,334	2,721
도시환경정비	1,635	467	1,168		1,469	550	869	50
교통시설확충	3,369	3,114	255		3,824	3,464	360
계룡지역개발	4,908	168	418	4,322	5,936	683	670	4,583

ꊱ ｢事業內容｣ 一部調整

① ｢문화유적정비｣ 확대 : 7사업․806억원 → 12사업․1,030억원

- 문화재청의 ｢제3차문화권정비계획｣을 수용, 장선리유적․능산리사지․송국리선사취락․관북리유적․군수리사지 등 5개 사업 추가

② ｢백제역사재현단지｣ 계획조정 : 4,528억원 → 4,468억원

- 他지역에 건립중인 종합운동장과 민자유치가 어려운 호텔 및 컨벤션센터, 종합상가 등을 계획에서 제외하고

- 부여군의 백제의 집(3,629㎡)과 문화재청의 건조물전시관(264천㎡)을 수용하고 하수처리장을 단지 내에 건립

③ ｢공주문화관광지｣ 규모축소 : 40만평․3,107억원 → 24만평․2,959억원

- 녹지로 계획된 하단부 임야를 제척하여 용지매입비(지방비) 절감

④ ｢관광농업단지｣와 ｢오토캠프촌｣ 기능통합

- ｢관광농업단지｣에 오토캠핑시설을 도입하고, ｢오토캠프촌｣은 삭제

⑤ ｢청소년수련관｣을 ｢청소년문화센터｣로 변경 : 1,500평 → 227평

- 지방비 재원조달의 어려움으로 계획기간 내 사업추진 불투명

⑥ ｢노인휴양촌｣ 규모축소 : 24만평․282억원 → 10만평․208억원

- 민자유치 활성화를 위하여 사업규모 축소 및 한방휴양기능 추가

⑦ ｢숙박시설｣ 사업비 조정 : 1,541억원 → 958억원

- 공주문화관광지․백제역사재현단지와 사업비 중복으로 조정

⑧ ｢공주우회도로｣ 노선연장 : 2.1㎞․330억원 → 7.2㎞․622억원

- 행정자치부의 시의국도 양여금 사업계획 수용(2001. 12 변경확정)

⑨ ｢전통문화학교진입로｣ 연장 : 3.51㎞․90억원 → 5.5㎞․217억원

- 공주～서천간고속도로 부여IC까지 노선연장, 원활한 교통소통 도모

⑩ ｢계룡 동서간선도로｣ 추가반영 : 8.0㎞․400억원

- 원활한 교통소통 및 지역균형발전을 통한 지역경제활성화 촉진

ꊲ ｢國費支援｣ 擴大

① 역사재현단지․공주문화관광지 기반공사비 국비지원 : 50% → 70%

② 관광농업단지․기업연수촌․노인휴양촌 기반시설비  :  0% → 50%

③ ｢입암산업단지｣ 기반시설비의 30% 국비지원

④ ｢계룡 문예회관｣ 건립사업비의 50%를 국가에서 부담건의 등

ꊳ ｢事業期間｣ 延長

○ 백제역사문화의 발굴․정비․복원․재현사업으로 고증에 장시간

소요되었을 뿐만 아니라, I M F로 인하여 민자유치가 지연되는 등

기간 내 완료가 어려운 실정으로 목표연도를 2010년까지 5년 연장

Ⅳ. 앞으로 推進計劃

○ 개발계획 변경(案) 공람공고(충남道) ---------- - 도보 및 게시판에 공고하고 14일간 일반에 열람	2004. 1월
○ ｢백제권종합개발계획 변경(案)｣ 확정(충남道) --- - 시군의견 및 주민의견 등을 참고하여 최종(案) 작성	2004. 4월초
○ ｢종합개발계획｣ 변경승인 신청(道→건교부) -----	2004. 6월중
○ 관계부처 및 관련부서 협의(건교부) -----------	2004. 6 ～ 7
○ ｢국토정책위원회｣ 심의(총리실) --------------	2004. 8월중
○ ｢종합개발계획｣ 변경승인(건교부) ------------	2004. 8월중
○ ｢종합개발계획｣ 변경승인 내용 고시(충남道) ----	2004. 9월말
○ 변경계획에 따라 본격 사업추진(시행청) -------	2004. 10부터

붙임 1. 단위사업별 변경내용 총괄 1부

2. 백제문화권 종합개발사업 2차 변경계획서 1부 “끝”

		單位事業別 變更內容(總括)
참고자료	-

(단 위 : 백만원)

사 업 명	사 업 량		당 초				변 경
	당 초	변 경	계	국 비	지방비	민 자	계	국 비	지방비	민 자
합 계	38사업	44사업	2,143,483	644,387	605,121	894,000	2,200,275	937,440	461,780	801,055
1. 유적정비․재현	9사업	14사업	567,314	233,526	162,609	171,179	586,136	381,976	138,531	65,629
- 문화유적정비	7사업	12사업	80,605	56,404	24,201		102,991	69,400	33,591
․공 산 성	12천평	12천평	9,700	6,781	2,919		11,771	8,239	3,532
․석장리유적	1.8천평	1.8천평	8,280	5,797	2,483		12,632	7,845	4,787
․송산리고분군	477평	477평	7,095	4,966	2,129		10,121	6,304	3,817
․장선리유적		6천평					1,628	1,140	488
․부소산성	35천평	18천평	16,576	11,588	4,988		15,247	10,673	4,574
․궁남지정비	29천평	58천평	10,717	7,506	3,211		11,061	7,745	3,316
․정림사지	전시관	전시관	18,773	13,141	5,632		11,758	7,311	4,447
․부여나성	7천평	22천평	9,464	6,625	2,839		9,773	6,843	2,930
․능산리사지		1식					3,500	2,450	1,050
․송국리선사취락		62천평					8,500	5,950	2,550
․관북리백제유적		12천평					5,500	3,850	1,650
․군수리사지		2천평					1,500	1,050	450
- 공주박물관이전	2만평	2만평	33,900	30,500	3,400		36,333	30,500	5,833
- 역사재현단지	100만평	100만평	452,809	146,622	135,008	171,179	446,812	282,076	99,107	65,629
2. 관광휴양시설	8사업	8사업	584,880	35,873	258,373	290,634	491,247	85,750	133,433	272,064
- 공주문화관광지	402천평	241천평	310,780	31,473	155,473	123,834	295,944	65,658	68,782	161,504
- 관광농업단지	243천평	243천평	15,200		15,200		15,200	5,551	6,609	3,040
- 오토캠프촌	58천평	58천평	8,800		7,500	1,300
- 청소년수련관	1.5천평	227평	3,900	2,600	1,300		500	200	300
- 기업연수촌	420천평	420천평	48,800		46,200	2,600	48,800	11,500	34,700	2,600
- 노인휴양촌	240천평	10천평	28,200	1,800	17,600	8,800	20,803	2,841	8,842	9,120
- 금강주운개발	8.3km	8.3km	15,100		15,100		14,200		14,200
- 숙박시설	1,215실	985실	154,100			154,100	95,800			95,800

사 업 명	사 업 량		당 초 계 획				변 경 계 획
	당초	변경	계	국비	지방비	민자	계	국비	지방비	민자
3. 도시환경정비	7사업	7사업	163,507	46,660	116,847		146,921	55,000	86,881	5,040
- 상수도시설			6,020	3,260	2,760		9,107	4,655	4,452
․공주상수도	1식	1식	5,520	2,760	2,760		8,904	4,452	4,452
․부여상수도	1식	1식	500	500			203	203
- 하수도시설			72,159	43,400	28,759		78,562	46,759	31,767
․공주하수처리장	1식	1식	42,621	22,588	20,033		49,024	25,983	23,041
․부여하수처리장	1식	1식	29,538	20,812	8,726		29,538	20,812	8,726
- 고도경관조성			78,828		78,828		52,752	3,550	44,162	5,040
․풍물거리조성	13건	18건	32,274		32,274		21,017	500	17,717	2,800
․가로환경정비	12건	11건	46,554		46,554		31,735	3,050	26,445	2,240
- 부여터미널이전	1식	1식	6,500		6,500		6,500		6,500
4. 교통시설확충	6사업	6사업	336,915	311,407	25,508		382,369	346,618	35,951
- 백제큰길	29.7km	29.7km	233,000	233,000			236,000	236,000
- 재현단지진입로	2.7km	2.7km	34,200	34,200			34,200	34,200
- 우회도로개설			54,415	37,907	16,508		83,669	57,418	26,251
․부여우회도로	4.4km	4.4km	21,400	21,400			21,400	21,400
․공주우회도로	2.1km	7.2km	33,015	16,507	16,508		62,269	36,018	26,251
- 전통학교진입로	3.5km	5.5km	9,000		9,000		21,700	12,000	9,700
- 웅포대교접속로	2.6km	2.6km	6,300	6,300			6,800	6,800
5. 계룡지역개발	8사업	9사업	490,867	16,896	41,784	432,187	593,602	68,296	66,984	458,322
- 금암택지개발	29만평	29만평	165,000			165,000	165,000			165,000
- 대실택지개발	49만평	49만평	200,365			200,365	260,000			260,000
- 계룡상수도	25천톤	25천톤	16,000	2,500	13,500		16,000	25,000	13,500
- 계룡하수도	27천톤	27천톤	18,302	10,896	6,484	922	18,302	10,896	6,484	922
- 에너지공급	6.6천평	6.6천평	6,000			6,000	6,000			6,000
- 입암공업단지	10만평	99천평	34,900			34,900	38,000	4,900	33,100
- 종합문예회관	2.5천평	2.5천평	13,000		13,000		13,000	6,500	6,500
- 남북간선도로	2.7km	2.7km	37,300	3,500	8,800	25,000	37,300	3,500	7,400	26,400
- 동서간선도로		8.0km					40,000	40,000