｢內浦文化圈 特定地域｣

綜合開發事業 推進計劃 報告

建 設 交 通 局

(建 設 政 策 課)

Ⅰ. ｢內浦文化圈特定地域｣ 槪要

○ 규모/범위 : 2,508㎢ / 서산‧보령시, 홍성‧예산‧태안‧당진군

○ 사업기간 : 2004 ～ 2013 (10년간)

○ 개발구상 : 49사업 12,222억원(국비 6,354 지방비 4,634 민자 1,234)

- 정신문화 :  4사업    188억원(국비    95 지방비   93)

- 문화유적 : 31사업  4,040억원(국비 2,075 지방비 1,586 민자 379)

- 관광시설 :  7사업  2,074억원(국비   718 지방비  501 민자 855)

- 교통시설 :  7사업  5,920억원(국비 3,466 지방비 2,454)

Ⅱ. 그 동안 推進經緯

○ 특정지역 지정․개발을 위한 연구용역 추진 ------ - 기초조사 및 타당성(國土硏), 개발계획 수립(忠發硏)	00. 8～02.12
○ 특정지역 지정 및 개발계획 승인신청 (충남道) -----	2003. 6. 18
○ 지역지정 및 개발계획 관계부처 협의(건교부) -----	2003. 6～9
○ 특정지역지정(案) 中都委 심의(건교부) --------- - 대표이미지 발굴, 전문가 자문, 친환경적 계획수립 등 주문	2003. 12. 12
○ 향후 추진방향 협의(충남道↔건교부) -----------	2004. 1. 15

① 재원배분 : 지방도는 지방부담, 문화재 진입도로는 70% 국비지원

② 개발계획 : 中都委 심의 및 재원배분 내용을 반영하여 변경작성

③ 추진방향 : 기획예산처 재 협의 후, 국토정책위원회에 지구지정 및

개발계획(案)을 일괄상정․심의 등을 合意

Ⅲ. 앞으로 推進對策

ꊱ 開發計劃(案) 變更作成(2004. 1 ～ 4월)

○ ｢中都委｣ 심의의견을 반영하기 위하여는, 49개 全사업에 대한 개발

계획도면을 모두 再작성해야 하는 등 작업의 난이도를 감안할 때

용역추진이 불가피하므로

- 당초, 개발계획을 수립하였던 ｢충남발전연구원｣에 의뢰하여 변경

계획(안)을 작성하되, 소요예산은 정책기획관실의 도정정책개발

학술용역비에서 우선 집행하고 제1회 추가경정예산에 보전

	< 硏究用役 推進計劃 >
○ 용 역 명 : 내포문화권특정지역 개발계획(안) 변경용역 ○ 수행기간 : 착수일로부터 90일간 ○ 용역금액 : 일금 30,000천원(인건비, 인쇄비, 부대경비 등) ○ 용역수행 : 충남발전연구원

ꊲ ｢企劃豫算處｣ 再 協議(2004. 3월)

○ ｢내포문화권종합개발계획｣ 변경(안)을 가지고, 당초협의 시 이견을

제시한 ｢기획예산처｣와 再 협의하되

- ｢中都委｣에서도 사업의 필요성을 인정하였으며, 서해안고속도로

개통이후 계속되는 개발압력으로 난 개발이 이루어지고 있는 등

조기추진의 필요성 논리를 제시하면서

○  지역출신 국회의원 및 出鄕인사, 해당 시‧군과도 적극 공조할 계획

ꊳ ｢國土政策委員會｣ 審議(2004. 4월)

○ ｢국토정책위원회｣ 위원들께 지구지정의 필요성과 당위성을 사전에

설명하는 등 총력을 집주하여 대응하고, 위원회에 지사님께서 직접

참석하시어 우리道 입장을 설명하고 협조를 요청

	< 國土政策委員會 >
○ 국무총리(위원장) 및 당연직 12명․위촉직 25명 등 38명으로 구성 - 당연직 : 재경‧건교부 등 관계부처 장관과 해당지역 시‧도지사 - 위촉직 : 임재환 충남대교수 및 이규방 원장 등 각계 전문가 ※ 간 사 : 건설교통부 국토정책국장

ꊴ 地區指定 및 開發計劃 承認(2004. 4 ～ 5월)

○ ｢국토정책위원회｣ 심의결과를 반영하여 개발계획을 확정한 다음

특정지역 지정 및 개발계획 승인(건설교통부)․고시(충남道)

ꊵ 基本設計 等 推進基盤 造成(2004. 下半期부터)

○ 지구지정 및 개발계획이 확정되면 기획예산처․건설교통부와 협의

2004국가예산을 조기배정 받아 핵심사업 기본‧실시설계를 추진하고

기타사업도 기초조사․예산확보 등 조기시행을 위해 노력할 계획

	< 2004豫算 執行計劃 >
○ 가야산순환도로(운산～덕산, 15㎞) : 기본설계 및 실시설계(10억원) ○ 내포보부상촌(예산 덕산, 155천㎡) : 타당성조사․기본설계(5억원)

		建交部와 協議된 開發計劃(案)
參考資料	-

사 업 명	위 치		사업량 (천㎡)	사 업 비(억원)				비 고
	군	면		계	국 비	지방비	민 자
합 계	49사업			12,222	6,354	4,634	1,234
○ 정신문화창달사업	4사업			188	95	93
- 박첨지놀이 전수회관	서산	음암	6	33	17	16
- 한성준민속무용 전수관	홍성	갈산	4	35	18	17
- 결성농요 전수관 조성	홍성	결성	7	16	8	8
- 기지시줄다리기 시연장	당진	송악	40	104	52	52
○ 문화유적정비사업	31사업			4,040	2,075	1,586	379
- 가야산 사적지 주변 정비	서산	운산	40	171	86	85
- 마애삼존불상 주변 정비	서산	운산	7	13	9	4
- 보원사지 정비	서산	운산	78	145	101	44
- 남연군묘 정비	예산	덕산	17	115	57	58
- 해미읍성 정비	서산	해미	185	518	286	152	80
- 천주교 순례지 정비	서산	해미	30	88	44	44
- 내포 보부상촌 조성	예산	덕산	155	1,316	514	522	280
- 임존성 복원정비	예산	대흥	23	173	118	55
- 대흥동헌 및 효제비 정비	예산	대흥	9	58	29	29
- 태안읍성 복원	태안	태안	4	32	17	15
- 대련사 정비	예산	광시	1	7	3	4
- 홍주성 복원정비	홍성	홍성	21	497	348	149
- 개심사 주변정비	서산	해미	4	24	12	12
- 솔뫼성지 성역화사업	당진	우강	23	74	29	30	15
- 오천성 정비	보령	오천	18	62	31	31
- 만해 한용운생가지 정비	홍성	결성	3	45	22	23
- 백야 김좌진생가지 정비	홍성	갈산	10	84	50	34
- 봉산사면석불 정비사업	예산	봉산	6	23	17	6
- 안국사 발굴정비사업	당진	정미	8	16	10	6
- 갈매못성지 정비사업	보령	오천	8	40	18	18	4

사 업 명	위 치			사업량 (㎡)	사 업 비(억원)				비 고
	군		면		계	국 비	지방비	민 자
- 안흥성 복원사업	태안		근흥	32	107	54	53
- 소근진성 정비사업	태안		소원	19	28	14	14
- 면천읍성 정비사업	당진		면천	13	31	16	15
- 합덕제 정비사업	당진		합덕	11	61	31	30
- 보령읍성 복원․정비	보령		주포	11	51	26	25
- 당진포 진성 정비사업	당진		고대	6	42	21	21
- 노은서원 복원 정비	홍성		홍북	4	13	7	6
- 백화산성 정비사업	태안		태안	30	48	25	23
- 명종태실 주변정비	서산		운산	6	10	5	5
- 추사고택 및 화암사정비	예산		신암	43	71	36	35
- 화석전시관 및 고인돌공원	보령		주포	9	77	39	38
○ 관광휴양시설 확충	7사업				2,074	718	501	855
- 간월도관광지 조성	서산		부석	108	357	87	120	150
- 왜목마을관광지 조성	당진		석문	147	483	91	84	308
- 신두사구 생태공원 조성	태안		원북	733	400	273	127
- 봉수산 자연휴양림 조성	예산		대흥	1,240	101	53	48
- 황도관광지조성	태안		안면	42	178	60	48	70
- 창리관광지조성	서산		부석	25	217	72	46	99
- 궁리관광지조성	홍성		서부	83	338	82	28	228
○ 도로교통망 확충	7사업			85 km	5,920	3,466	2,454
- 가야산 순환도로	덕산～운산			15 km	600	600
- 내포권 연계도로	신평～갈산			43 km	4,300	1,900	2,400
- 간월호 관광도로	고북～부석			21 km	840	840
- 대련사 진입도로	예산	광시		1 km	30	21	9
- 개심사 진입도로	서산	해미		1 km	30	21	9
- 명종태실 진입도로	서산	운산		2 km	60	42	18
- 갈매못성지 진입도로	보령	오천		2 km	60	42	18