		2014. 8.

상·하수도 보급률 향상대책

- 상·하수도 비전 -

	환경녹지국
	(수질관리과)

목   차

Ⅰ. 검토배경 -----------------------------	2
Ⅱ. 상·하수도 보급실태와 문제점 ----------	3
Ⅲ. 상·하수도 보급 비전 및 추진전략
□ 비전 ----------------------------------	7
□ 추진전략 ------------------------------	9
Ⅳ. 추진계획(3개분야 8개사업)
□ 분야별 추진계획 ------------------------	11
□ 사업별, 연도별 추진계획 ------------------	19
Ⅴ. 필요 조치사항 ------------------------	20

【 붙임자료 】-------------------------------  22

상·하수도 보급률 향상대책

Ⅰ. 검토배경

◈ 물은 인간생활에 없어서는 안 될 필수 불가결 요소,

인간생활과 밀접한 상·하수로 구분해 보면

□ 상수 : 음용수나 사용수 따위로 쓰기 위하여 수도관을

통하여 공급하는 맑은 물

□ 하수 : 빗물이나 집, 공장, 병원 등에서 쓰고 버리는

더러운 물

◈ 그 동안 이 같은 상·하수를 안전하고 안정적으로 공급·

처리하기 위해 관련시설을 계획적으로 확충해왔으나

- 지난  ‘89년도 대전시의 광역시 승격분리와 농업도 특성인

분산된 취락구조가 상·하수도시설 확충·보급에 불리

하게 작용하면서 전국에서 가장 낮은 보급률

▶ 상수도 : (전국) 98.1%,  (우리도) 90.1%

▶ 하수도 : (전국) 91.6%,  (우리도) 70.3%

◈ 그럼에도 정부는 상·하수도 보급률이 어느 정도 목표에

달성 됐다고 보고 노후시설 교체 등으로 정책방향 전환전망

◈ 상·하수도 시설 확충 사업은 사업비도 많이 소요되고, 민선

6기 도지사 공약사항으로 선정된 만큼

- 도정발전을 선도하는 비전과 전략사업으로 설정, 소기

의 목표를 달성할 수 있도록 다각적인 노력 전개

Ⅱ. 상·하수도 보급실태와 문제점

《 상수도 》

□ 상수도 보급실태

❍ 상수도보급률이 90.1%로 전국 평균과 도 단위 평균보다

낮음(세종특별자치시를 제외하고 최하위 수준)

- 2012년 말 기준 전국 평균 98.1%, 도 단위 평균 96.7%

	인구가 밀집한 도시위주로 시설확충을 전개하다보니 농·어촌지역에 비해 도시지역 상수도보급률이 높은 경향

[그림 1] 전국 시·도별 상하수도 보급률

❍ 도내에서는 계룡시가 98.8%로 가장 높고, 태안군이 68.4%로

가장 낮음

- 보급률 90%이상이 계룡, 아산, 부여, 천안, 서산, 서천,

보령 등이고, 시 지역(91.2%)이 군 지역(86.0%)보다 높음

[그림 2] 충청남도 시·군별 상수도 보급률

❍ 최근 5년간 보급률 변화 추이를 보면, 전국대비 급격한

상승세 유지

(단위 : %)

구 분		2007년	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년	비고
충청남도	보급률	81.2	82.6	85.2	86.7	87.8	90.1
	증 ㆍ 감	-	1.4	2.6	1.5	1.1	2.3	8.9%
전국평균	보급률	96.4	96.8	97.4	97.7	97.9	98.1
	증 ㆍ 감	-	0.4	0.6	0.3	0.2	0.2	1.7%

□ 문제점

❍ 상·하수도 사업이 대부분 국비에 의존하고 있어 지자체

의지만으로는 한계

□ 충남은 도농복합 분산거주식 취락형태와 도시화율이

낮아 상대적으로 보급률이 저조하고

-  ‘89년도 대전시 분리 이후 보급률 급락(47%→ 32%) 하였음

에도 농촌보다 도시위주의 상수도 공급정책 추진

□ 일부에서는 개인상수도 시설분담금 및 사용료 부담으로

상수도 사용을 기피하고 있는데 보급률 향상에 저해요인

으로 작용

※ 기초생활수급자외 지원 곤란, 개인 부담금 60～130만원

(옥내별도)

《 하수도 》

□ 하수도 보급실태

❍ 2012년말 기준 하수도 보급률이 70.3%로, 전국 평균

91.6%보다 현저히 낮은 실정

☞ 전국 17개 시·도 中 16위 (서울 100%, 세종시 65.0%)

(단위 : %, ’12년말 기준)

구 분	평 균			충남	道 지 역
	전국	市	道		경기	강원	충북	전북	전남	경북	경남	제주
하수도 보급률	91.6	94.2	85.6	70.3	92.7	84.1	84.7	83.0	72.9	75.9	85.7	89.2

❍ 도내에서는 계룡시가 94.3%로 가장 높고, 부여군이 44.9%로

가장 낮음.

(단위 : %, 2012.12)

시지역	평균	천안	공주	보령	아산	서산	논산	계룡	당진
보급률	75.1	93.0	67.3	63.0	67.5	64.9	52.4	94.3	60.2
군지역	평균	금산	부여	서천	청양	홍성	예산	태안	-
보급률	53.6	68.9	44.9	48.8	49.5	60.1	54.7	46.4	-

❍ 최근 5년간 보급률 변화 추이를 보면, 전국대비 급격한

상승세 유지

(단위 : %)

구 분		2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	증가율 (년평균)
하수도	충 남	61.8	63.5	64.7	68.5	70.3	8.5%⇧ (1.7%)
	전국평균	88.6	89.4	90.1	90.9	91.6	3.0%⇧ (0.6%)

※ 우리道 최근 5년간 상승률은 전국평균 보다 3배~6배 높게 향상

❍ 우리 도의 공공하수처리시설은 총344개소(500㎥/일 이상

54개소, 500㎥/일 미만 290개소), 시설용량 648,864㎥/일,

처리량 542,885㎥/일으로 나타남

- 시설 수는 보령시(50개소)가 가장 많고, 계룡시(1개소)가

가장 적음

- 시설용량 및 처리량은 천안시가 가장 많음

□ 문제점

❍ 보급률은 전체인구 대비 수혜인구로 산정하므로, 인구

밀도가 높은 도시지역이 상대적 유리

- 도시화율이 낮은 우리도는 보급률이 낮을 수밖에 없음

❍ 그동안 정부정책에 따라 수도권 등 도시지역 우선지원이

이루어지면서

- ’89년 대전시 분리 이후 보급률 급락으로 전국 최하위

❍ 사업비 대부분을 국비에 의존하고 있어 재정이 열악한

지자체 의지만으로는 보급률 향상에 한계

- 우리도 여건상 소규모(50㎥/일 미만) 공공하수처리장

설치에 주력하여야 하나 경제성 미흡을 이유로 지원

대상 배제

※ 하수도보급률 1% 향상시 3천억원 이상 소요

Ⅲ. 상·하수도 시설확충 및 추진전략

□ 비 전

물로 더 행복해지는 충남

목표		최종목표	상·하수도보급률 향상
		❍ 2020년 상수도보급률 98.1%, 하수도보급률 77.5% 달성 - 국정과제인「농어촌지역 상수도 확충사업」적기 추진 - 건강한 수생태계 회복을 위한 공공하수처리시설 확충 ❍ 삶의 질을 높이는 물 복지 확대 - 농어촌 물 취약계층 및 서민층에 대한 건강한 물 공급 - 지역특성에 맞는 맞춤형 건강한 물 공급확대

정책분야		상 수 도			하 수 도		물 복지
		농 어 촌 상 수 도 확 충	도서지역 식 수 원 개 발	농촌생활용수개발	공공하수 처 리 장 신·증설	농 어 촌 마을하수 처리시설	협업형 상수도 보 급	소규모 수도시설 개 량	정수기 보 급
		[143개소]	[15개소]	[536개소]	[116개소]	[278개소]	[3,766가구]	[1,487개소]	[600개소]

보급률

및

투자목표

1. 상수도 보급률향상	90.1% → 98.1%

[그림 5] 충청남도 상수도보급률 및 사업비 투자목표(‘20년까지)

(단위 : 억원)

연도별	총 사업비	기투자	투자 사업비
			소계	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
투자액	7,900	2,443.6	5,456	569.8	844.5	854.5	784.5	784.5	763.5	854.7

2. 하수도 보급률향상	70.3% → 77.5%

[그림 6] 충청남도 하수도도보급률 및 사업비 투자목표(‘20년까지)

(단위 : 억원)

연도별	총 사업비	기투자	연도별 투자계획
			소계	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
투자액	40,956	14,196	26,760	3,400	3,500	3,600	3,800	4,000	4,000	4,460

□ 추진전략

	그림 ◈ 상수도 확충 : 농어촌 상수도 중심
- 물 복지 향상을 위한 「농어촌지역 상수도확충 실행계획」추진 - 도서지역 식수원 개발보급으로 물 사용 불편해소 - 상수도 미급수 지역의 지방상수도 전환 공급

	◈ 하수도 확충 : 소규모 하수처리시설 중심
- 기존 공공하수처리장 용량보강 및 소규모 마을하수도 집중투자 - 일정규모 마을은 인근 하수처리장에 연계 처리 검토 - 경제성 확보를 위해 2개 이상 마을 통합 처리방안 검토

	그림 ◈ 보급률 향상을 위한 「전략적 투자재원」 확보
- 상수도 확충사업 지방비중 도비 보조율 확대지원(현재 12%→15%) * 타 시도는 시도비 보조금비율 15% 지원 중. - 지역개발특별회계 예산 → 환경개선특별회계 변경건의

Ⅳ. 추진계획(3개분야 8개사업)

분 야	사업명	사업개요	비고
1. 상수도	1. 농어촌 상수도 확충	- ‘13∼’20(8년) - 143개소, 5,301억원 - 상수도 관로개설 등
	2. 도서지역 식수원개발	- ‘13∼’20(8년) - 15개소, 105억원 - 담수화시설 확충 등
	3. 농촌생활용수개발	- ‘10∼’20(11년) - 536개소, 586억원 - 농촌지역 용수공급
2. 하수도	1. 공공하수처리장 신·증설	- ‘11∼’20(10년) - 116개소, 27,301억원 - 하수처리장 신설 등
	2. 농어촌 마을하수 처리시설 확충	- ‘11∼20‘(10년) - 278개소, 13,655억원 - 소규모 하수처리시설 신설 등
3. 물 복지	1. 미급수지역 협업형 상수도 보급	- ‘15∼’16(2년) - 3시군(15리), 100억원 - 관로 및 배수지 설치 등
	2. 소규모 수도시설 개량	- ‘08∼’20(13년) - 1,487개소, 1,805억원 - 상수도 미보급지역 노후관 개량 등
	3. 취약계층 정수기 보급사업	- ‘15∼’20(6년) - 600가구, 3억원 - 음용수 부적합 가구지원

□ 분야별 추진계획

1 – 1	농어촌 상수도 확충

상수도가 미보급된 면단위 농어촌지역에 깨끗하고 안전한

수돗물을 공급하여 주민보건위생 향상 및 삶의 질 개선

□ 사업개요

❍ 추진근거 : 국정과제 이행을 위한 농어촌지역 상수도확충사업 실행계획

❍ 사업기간 : 2013 ~ 2020년(8년)

❍ 사 업 비 : 5,301억원(국비 3,710, 지방비 1,591)

❍ 사 업 량 : 143개소

❍ 사업내용 : 급수배관 및 배수지 설치 등 상수도 보급

□ 그동안 추진상황

❍ ‘13년도 까지 1,112.1억원 투자 22개소 사업완료

(단위 : 지구, 억원)

총 계획		기 투자		‘14년 계획		‘15년∼’20년
사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
143	5,301	52	1,112.1	13	417.3	78	3,771.6

□ 향후 추진계획

❍ ‘14년 총 7지구(13개소)에 417.3억원 투자계획 〔붙임 1〕

2014년 충청남도 농어촌 지방상수도 사업계획

- 신규 지구는 상반기중 설계완료 및 공사발주 추진

- 계속 지구는 이월되지 않도록 사업관리ㆍ행정지도

❍ 2015년 이후사업의 사업비 적기확보 및 차질 없는 사업추진

1 – 2	도서지역 식수원 개발

식수원 확보가 곤란한 도서지역에 맑고 풍부한 수돗물

공급으로 주민의 보건위생 및 삶의 질 향상

□ 사업개요

❍ 추진근거 : 도서지역 3단계 상수도 확충 계획에 따라 추진

❍ 사업기간 : 2013 ~ 2020년(8년)

❍ 사 업 비 : 105억원(국비 73.5, 지방비 31.5)

❍ 사 업 량 : 도서 15개 지구(보령, 서산, 당진)

❍ 사업내용 : 도서지역 담수화시설 설치 등

□ 그동안 추진상황

❍ ‘13년도는 1.5억원 투자 1지구 추진

(단위 : 억원)

총 계획		기 투자		‘14년 계획		‘15년∼’20년
사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
15	105	4	1.5	1	3.5	10	100

□ 향후 추진계획

❍ 2014년도 대상지구 : 보령시 오천면 외연도리

- 사업내용 : 담수화시설 교체

- 사 업 비 : 350백만원(국비(70%) 245  도비(9%) 31  시군비(21%) 74)

❍ 2015년 이후사업의 사업비 적기확보 및 차질 없는 사업추진

1 – 3	농어촌생활용수 개발

농어촌지역에 필요한 생활·농업용수 등 다목적 용수공급

으로 삶의 질 향상 및 주민건강 증진에 기여

□ 사업개요

❍ 추진근거 : 농어촌 생활환경개선 계획에 따라 추진

❍ 사업기간 : 2010 ~ 2020년(11년)

❍ 사 업 비 : 586억원(국비 410, 지방비 176)

❍ 사 업 량 : 536지구

❍ 사업내용 : 농촌지역 급수원 개발 및 맑은 물 공급

□ 그동안 추진상황

❍ ‘13년도는 50억원 투자 22지구 추진

(단위 : 지구, 억원)

총 계획		기 투자		‘14년 계획		‘15년∼’20년
사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
536지구	586	382	169	22	57	132	360

□ 향후 추진계획

❍ 2014년도 대상지구 : 22개지구 〔붙임 2〕

2014년 충청남도 농촌·농업생활용수 개발사업

- 사업내용 : 식수원 개발 및 급수공급

- 사 업 비 : 56.8백만원(국비(70%) 39.7,  지방비(30%) 17.1)

❍ 2015년 이후사업의 사업비 적기확보 및 차질 없는 사업추진

2 – 1	공공하수처리장 신·증설

주민 삶의 질 향상을 위한 하수도보급 확대 및 하수범람

침수피해 예방을 위한 하수시설 정비강화

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2011 ~ 2020년(10년)

❍ 사 업 비 : 27,301억원

❍ 사 업 량 : 15개 시·군 116개소 〔붙임 3〕

충청남도 공공하수처리시설중기계획(2011∼2020)

❍ 사업내용 : 공공하수처리시설, 하수관거 신·증설 및 개량

□ 그동안 추진상황

❍ ‘13년까지 116개 지구(27,301억원) 중 47개 지구(9,464억원)

추진/총진도 34.6%

(단위 : 개소, 억원)

총 계획		기 투자		‘14년 계획		‘15년∼’20년
사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
116	27,301	47	9,464	15	2,266	54	15,571

□ 향후 추진계획

❍ 2015년도 국비 확보에 총력을 기울여 차질 없는 사업추진

- 환경부 2차 심의 1,431억원 계상(`14년 대비 2.6% 증액)

- 최종 확정시 까지 국회 등과 공조하며 적정액 확보 노력

❍ 민간 투자 유치 등 하수도 보급률 향상 방안 다원화 강구

2 – 2	농어촌 마을하수도처리시설 확충

농어촌지역 생활하수의 환경적 처리제고로 삶의 질 향상

및 주민건강 증진에 기여

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2011 ~ 2020년(10년)

❍ 사 업 비 : 13,655억원

❍ 사 업 량 : 15개 시·군 278개소 〔붙임 4〕

충청남도 농어촌마을 하수처리시설중기계획(2011∼2020)

❍ 사업내용 : 소규모 공공하수처리시설, 하수관거 신·증설 및 개량

□ 그동안 추진상황

❍ ‘13년까지 4,732억원 투자 98지구 추진/총진도 35%

(단위 : 개소, 억원)

총 계획		기 투자		‘14년 계획		‘15년∼’20년
사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
278	13,655	98	4,732	24	1,134	156	7,789

□ 향후 추진계획

❍ 2015년도 국비 확보에 총력을 기울여 차질 없는 사업추진

- 환경부 2차 심의 716억원 계상(`14년 대비 2.6% 증액)

- 최종 확정시 까지 국회 등과 공조하며 적정액 확보 노력

❍ 농어촌 지역 마을하수처리시설 국비 보조 확대 방안 강구 등

3 – 1	미급수지역 협업형 상수도보급

농어촌 미급수지역에 대한 광역·지방간 협업형 상수도

보급으로 물 복지 조기 실현

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2015 ~ 2016년(2년)

❍ 사 업 비 : 100억원(국비 70, 지방비 15, 수공 15*)

* 지방비 부담률 30%중 수공에서 15% 부담

❍ 사 업 량 : 3개시군 15개리(약 39.5km) 〔붙임 5〕

미급수지역 협업형 상수도보급대상

❍ 공 급 량 : 970㎥/일

❍ 사업내용 : 광역상수도 인근 미 급수지역 상수도 공급

□ 그동안 추진상황

❍ 환경부 소외지역 상수도 공급사업 기본구상(안) 반영(‘13.12)

- 우리도 3개시군(천안, 당진, 홍성)

❍ 도 및 시군, 수공간 상호 사업비분담 및 공사 시행방법 협의

□ 향후 추진계획

(단위 : 억원)

총 사업비				2015년				2016년
총계	국비	지방비	수공	총계	국비	지방비	수공	총계	국비	지방비	수공
100	70	15	15	50	35	7.5	7.5	50	35	7.5	7.5

❍ 시행계획 확정(8월중) 후 도 및 시군·수공간 업무협약 체결(9월)

❍ 급수대상 지역 상수도 보급 실시설계 발주(‘14.12월)

❍ 보조금 교부 및 공사착공(‘14. 3월), 공사완공(’16.12)

3 – 2	소규모 수도시설 개량

상수도 미보급 지역의 불량·노후된 먹는물 공급시설을

보완·개량하여 맑은 물의 안정적 공급으로 삶의 질 향상

□ 사업개요

❍ 사업기간 : ‘08∼’20(13년)

❍ 사 업 비 : 1,805억원(국비 1,263, 지방비 542)

❍ 사 업 량 : 1,487개소

❍ 사업내용 : 노후관 교체 및 신설 등

□ 그동안 추진상황

❍ ‘13년도는 142억원 투자, 158개소 사업완료

- 그동안(‘13년까지) 총 1,161억원 투자, 850개소 완료

❍ ‘14년도는 92억원 투자, 91개소 사업추진 〔붙임 6〕

2014년 충청남도 소규모 수도시설개량 사업계획

(단위 : 개소, 억원)

총 계획		기 투자		‘14년 계획		‘15년∼’20년
사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
1,487	1,805	850	1,161	91	92	546	552

□ 향후 추진계획

❍ ‘14년도 사업의 정상적인 마무리로 건강한 물 제공

❍ ‘16년 소규모수도시설 관리체계 개선(상수도 통합관리) 국비보조 사업으로 확대추진

3 – 3	취약계층 정수기 보급사업

농어촌 상수도 미공급지역의 지하수 음용이 취약한 소외계층에게

정수기를 보급하여 건강한 물 공급으로 물 복지 향상에 기여

□ 사업개요

❍ 사업기간 : ‘15∼’20(6년)

❍ 지원대상 : 상수도 및 지하수 음용 취약가구

❍ 사 업 비 : 3억원(도비 50%, 시군비 50%)

* 2015년 시범사업 : 100가구, 50백만원

❍ 사 업 량 : 600가구(희망시군 대상)

❍ 사업내용 : 시군별 대상가구를 조사 정수기 보급·관리 지원

□ 그동안 추진상황

❍ 취약계층 맞춤형 물 복지 향상 사업으로 선정(민선 6기)

- 도 정책자문위원회 제안사업으로 검토·채택된 사업

□ 향후 추진계획

(단위 : 억원)

총 사업비			2015년			2016년∼2020년
총계	도비	시군비	총계	도비	시군비	총계	도비	시군비
3	1.5	1.5	0.5	0.25	0.25	2.5	1.25	1.25

❍ 세부 추진계획 수립 및 ‘15년 사업예산 반영(’14)

❍ 취약정수기 보급 및 관리규정 마련(‘14.12)

❍ 참여대상 시군 조사 및 보조금 교부, 사업시행(‘15.3)

□ 사업별, 연도별 투자 및 예산확보 계획

(단위 : 억원)

사 업 명	총 사업비	기 투자 사업비	연도별 투자 및 예산확보 계획
			소계	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
총 계	48,856	16,639.6	32,216	3,969.8	4,344.5	4,454.5	4,584.5	4,784.5	4,763.5	5,314.7
1.농어촌 상수도 확충	5,301	1,112.1	4,188.9	417.3	625.4	635.4	615.4	615.4	594.4	685.6
2.도서지역 식수원 개발	105	1.5	103.1	3.5	16.6	16.6	16.6	16.6	16.6	16.6
3.농촌생활용수 개발	586	169	417	57	60	60	60	60	60	60
4.공공하수처리장 신·증설	27,301	9,464	17,837	2,266	2,430	2,358	2,531	2,670	2,577	2,973
5.농어촌 마을하수 처리시설 확충	13,655	4,732	8,923	1,134	1,070	1,242	1,269	1,330	1,423	1,487
6.미급수지역 협업형 상수도 보급	100	-	100	-	50	50	-	-	-	-
7.소규모 수도 시설개량	1,805	1,161	644	92	92	92	92	92	92	92
8.취약계층 정수기 보급사업	3	-	3	-	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5

Ⅴ. 필요 조치사항

□ 국회의원 방문 정기적 예산확보 지원요청

❍ 국비보조사업 신청 시기부터 사업계획 설명 등 예산 협조요청

- 전년도 평가분석 결과를 토대로 익년도 사업계획 보고

- 예산필요 타당성 및 근거 등 충실한 자료제공

□ 국비확보 전력 및 도비보조금 확대지원

❍ 환경부의 지방상수도 확충사업에 우리도 사업반영 지원요청

- 우리도 보급률 저조 부분과 사업타당성 및 지원사유 등 어필

- 상수도사업의 지특을→환특으로 전환, 안정적 사업추진

❍ 국비 확보에 따른 도비의 안정적 확보(예산부서 협조)

- 연도별 보급목표에 대한 소요예산의 안정적 확보필요

❍ 타 시도와의 도비 보조율 형평성 유지

- 지방비중 도비 보조비율 확대 예산부서 협조 필요

- 현재 12%에서 15%로 상향 필요(+3%)

❍ 환경부 주관 상·하수도 관련 공모사업 적극 활용

- 상·하수도 보급률 향상과 관련된 각종 공모사업 적극참여

□ 물 복지 향상을 위한 제도개선

❍ 소외계층 상수도 공급을 위한 지원조례 제정추진

- 수도시설 설치 시설분담금에 대한 취약계층 지원

붙임 : 1. 2014년 농어촌 지방상수도 사업계획

2. 2014년 농촌·농업생활용수 개발사업

3. 공공하수처리시설중기계획

4. 농어촌마을하수처리시설중기계획

5. 미급수지역 협업형 상수도 공급 사업지구

6. 2014년 소규모 수도시설개량 사업계획

【붙임 1】

【2014년 농어촌 지방상수도 사업계획】

구분	지구명	예 산 액(백만원)					추 진 상 황	비 고
		계	국비	지 방 비
				소 계	도 비	시군비
계	13지구 (25개소)	41,723	30,051	11,672	4,666	7,006
공주	사곡	2,190	1,752	438	175	263	계속
보령	오천	2,000	1,400	600	240	360	〃
아산	배방	2,360	1,652	708	283	425	〃
서산	인지	1,580	1,106	474	189	285	〃
	음암	996	697	299	119	180	준공
	부석	220	154	66	26	40	신규
논산	노성․상월	1,790	1,253	537	214	323	계속
	광석	220	154	66	26	40	〃
당진	고대	2,000	1,400	600	240	360	〃
	대호지․정미	2,150	1,505	645	258	387	〃
금산	금성군북	2,080	1,456	624	250	374	〃
부여	외산․내산	1,820	1,456	364	146	218	〃
	초촌․충화	1,930	1,351	579	232	347	〃
서천	판교	2,580	1,806	774	310	464	〃
청양	화성․비봉	2,565	2,052	513	205	308	〃
	남양	1,790	1,253	537	214	323	〃
홍성	금마	2,651	1,856	795	318	477	〃
	구항서부	220	154	66	26	40	신규
예산	응봉	1,580	1,106	474	189	285	계속
	대흥광시	1,240	868	372	149	223	〃
태안	이원	1,875	1,500	375	150	225	계속
	남면	1,930	1,351	579	232	347	〃
	안면해안	1,100	770	330	132	198	신규	(유류피해)
	신두의항	1,000	700	300	120	180	신규	(유류피해)
	동문배수지	1,856	1,299	557	223	334	신규	(균형발전)

【붙임 2】

【2014년 농촌·농업생활용수 개발사업】

(단위 : 백만원)

시군별	지구수	계	국비	도비	시군비	비고
총 계	22	5,688,000	3,982,000	512,000	1,194,000
천안시	-	0
공주시	5	1,153,000	807,000	104,000	242,000
보령시	-	0
아산시	-	0
서산시	-	0
논산시	2	374,000	262,000	34,000	78,000
계룡시	-	0
당진시	4	880,000	616,000	79,000	185,000
금산군	1	367,000	257,000	33,000	77,000
부여군	2	1,000,000	700,000	90,000	210,000
서천군	1	270,000	189,000	24,000	57,000
청양군	3	744,000	521,000	67,000	156,000
홍성군	-	0
예산군	4	900,000	630,000	81,000	189,000
태안군	-	0

※ 재원 : 국비 70%, 도비  9%, 시군비 21%

【붙임 3】

【공공하수처리시설중기계획】

(2011~2020)                                                    (단위 : 백만원)

시군별	개소수	사업기간		총사업비	기투자	‘14~’20	비고
		부터	까지
15	116			2,730,109	946,450	1,783,659
천안시	5	2012	2020	171,183	80,740	90,443
공주시	7	2012	2017	183,258	86,780	96,478
보령시	11	2013	2019	191,814	87,890	103,924
아산시	12	2012	2020	278,574	155,670	122,904
서산시	7	2013	2020	125,459	31,580	93,879
논산시	7	2016	2019	124,011		124,011
계룡시	6	2015	2020	158,529		158,529
당진시	10	2012	2020	273,654	113,450	160,204
금산군	6	2012	2017	170,458	71,450	99,008
부여군	5	2012	2017	120,678	71,670	49,008
서천군	6	2012	2020	138,906	32,160	106,746
청양군	7	2013	2017	105,897	46,150	59,747
홍성군	7	2015	2020	145,678		145,678
예산군	7	2012	2018	167,890	74,510	93,380
태안군	13	2012	2020	374,120	94,400	279,720

【붙임 4】

【농어촌마을하수처리시설중기계획】

(2011~2020)                                         (단위 : 백만원)

시군명	개소수	사업기간		총사업비	기투자	‘14~’20	비고
		부터	까지
15	278			1,365,500	473,210	892,290
천안시	16	2012	2018	78,576	34,880	43,696
공주시	16	2012	2017	78,576	33,600	44,976
보령시	22	2013	2020	108,042	46,200	61,842
아산시	15	2012	2019	73,665	31,500	42,165
서산시	19	2012	2020	93,309	39,900	53,409
논산시	15	2012	2017	73,665	31,500	42,165
계룡시	7	2016	2020	34,377		34,377
당진시	10	2017	2020	49,110		49,110
금산군	22	2013	2019	108,042	47,960	60,082
부여군	33	2012	2020	162,063	71,940	90,123
서천군	24	2012	2018	117,864	52,320	65,544
청양군	26	2013	2020	127,686	56,680	71,006
홍성군	18	2012	2017	88,398	21,240	67,158
예산군	21	2014	2020	103,131	5,490	97,641
태안군	14	2016	2020	68,996		68,996

【붙임 5】

【미급수지역 협업형 상수도 공급 사업지구】

지자체	면	리	계획급수 인구(인)	공 급 물 량 (㎥/일)	관로연장(km)			공사비(백만원)
					합계	광역	지방	합계	광역	지방
3개시군	4개면	15개리	3,766	970	39.5	15.1	24.4	8,935	4,120	4,815
천안시 소계(3)			884	240	11.0	4.5	6.5	2,465	1,204	1,261
천안시	광덕면	행정리	292	80	5.0	4.5	0.5	1,337	1,204	133
천안시	광덕면	대평리	285	80	2.5	-	2.5	470	-	470
천안시	광덕면	원덕리	307	80	3.5	-	3.5	658	-	658
당진시 소계(8)			1,341	330	18.6	6.5	12.1	4,171	1,791	2,380
당진시	정미면	매방리	241	60	3.8	1.6	2.2	861	433	428
당진시	정미면	도산리	215	60	1.1	0.3	0.8	256	90	166
당진시	정미면	봉성리	165	40	4.0	2.4	1.6	967	644	323
당진시	정미면	산성리	177	40	1.3	0.5	0.8	307	143	164
당진시	정미면	대조리	134	30	3.0	1.2	1.8	679	327	352
당진시	정미면	우산리	112	30	1.1	0.2	0.9	246	64	182
당진시	정미면	하성리	100	20	1.0	0.3	0.7	235	90	145
당진시	정미면	덕삼리	197	50	3.3	-	3.3	620	-	620
홍성군 소계(4)			1,541	400	9.9	4.1	5.8	2,299	1,125	1,174
홍성군	구항면	마온리	918	240	2.9	0.5	2.4	631	141	490
홍성군	구항면	황곡리	292	80	4.5	2.6	1.9	1,078	703	375
홍성군	갈산면	동산리	204	50	0.5	0.2	0.3	142	70	72
홍성군	갈산면	쌍천리	127	30	2.0	0.8	1.2	448	211	237

※ 본 글씨체(

)는 한국수자원공사 시행계획 지역임

【붙임 6】

【2014년 소규모 수도시설개량 사업계획】

(단위 : 백만원)

시 군	지구수	계	국 비 (70%)	도 비 (0%)	시군비 (30%)	비 고
소 계	91	9,196	6,438		2,758
천안시	21	714	500		214
공주시	3	556	389		167
보령시	7	357	250		107
아산시	8	621	435		186
서산시	3	490	343		147
논산시	5	457	320		137
당진시	5	490	343		147
금산군	7	1,244	871		373
부여군	6	621	435		186
서천군	7	853	597		256
청양군	6	820	574		246
홍성군	5	689	482		207
예산군	7	1,084	759		325
태안군	1	200	140		60

※ 재원(국고 70%, 시군비 30%)