- 전자태그(RFID) 부착 -

물품관리 시스템 구축 추진계획

□  관련 법령 개정으로 전자태그(RFID) 부착 물품관리시스템

사용이 의무화되어 전문용역업체를 선정, 물품관리시스템        구축 사업을 법정기한 내 완료하고자 함.

전자태그(RFID)의 정의

① 전자태그(RFID-Radio Frequency Identification Device)란 물품의 정보를 무선주파수로 전송·처리하기 위하여 물품에 부착하는  반도체소자가 포함된 태그(스티커)를 말한다.

② “RFID 물품관리시스템”이란 전자태그의 리더기를 이용하여 물품의 정보를 기록·보관·활용할 수 있도록 안전행정부장관이 구축한 물품관리 전자업무시스템을 말한다.

⇨ 물품에 전자태그를 부착하여 리더기로 전파와 IC칩을 통하여 물품    정보를 읽은 후 자동으로 물품관리시스템에 데이터를 전송하여     물품에 대한 다양한 개체 정보를 관리할 수 있는 시스템

③ 전자태그 시스템 구성요소

리더기(PDA)	발행기	라벨태그	차폐재	렛치
부착된 태그 읽기	라벨지에 정보 인쇄	기본적인 전자태그	금속성 물체에 덧대어 붙임 (예 : 컴퓨터)	부착이 어려운 곳 (예 : 의자)

□ 추진 배경

① 공유재산 및 물품관리법시행령 개정(‘13.6.21.) - 전면시행(‘14.6.22.)

- 제67조 제2항 : 전자태그 사용을 임의규정에서 강행규정으로 개정

제67조(물품관리사무의 전산화)

☞ (현행) 자치단체장은 ∼ 전자태그를 붙여 관리할 수 있다.

(개정) 자치단체장은 ∼ 전자태그를 붙여 관리하여야 한다.

② 지속적으로 증가하고 있는 지방자치단체의 물품관리의 정확·효율성 향상을 위해 전자태그 활성화 필요

⇨ 신청사 이전 등으로 우리도 전자태그 물품관리 추진실적 저조

□ 전자태그 부착대상 물품현황

	<태그 부착 원칙>
□ 공유재산 및 물품관리법시행령 제67조 ② 항에 의거 모든 물품에 전자태그(라벨) 부착 원칙 ⇨ 그러나, 옷(부착불가), 칸막이(다수 부품으로 구성), 소프트웨어(지적재산), 기타(소모품성 물품) 등은 부착물품에서 제외됨

① 전자태그 대상 물품 : 전체 89,098점

- 본 청 :  1,045종 / 23,899점

- 직속기관․사업소 등 : 1,045종 /  65,199점

② 전자태그 기기 보유현황

- 본 청 : 리더기 : 4대, 발행기 : 3대 (2010. 10. 구매)

- 직속기관․사업소 등 : 붙임 참고

□ 기대효과

○ 물품취득, 사용, 이동, 처분 전산화로 체계적 물품관리

○ 물품 자동인식이 가능하여 인력·시간·비용 절감

○ 실물위주 물품관리에 의한 물품관리의 정확성·효율성 향상

< 전자태그 물품관리 생산성 향상 효과 >

* 출처 : RFID시범사업 측정 (조달청, 한국정보사회진흥원)

구 분	처리시간(초)		처리시간 단축율(%)	생산성 향상율(%)	비고
	수작업	RFID
물품취득	80	30	62	166	1건 처리시 평균소요시간
물품이동	90	30	66	200
불용처분	150	20	86	650
재물조사	20,770	5,383	74	285	1,010점의 재물조사시간

□ 세부 추진 계획

1. 사전 재물조사 및 전자태그 발행·부착

□ 사전 재물조사

- 기 간 : ‘14. 6. 2. ~ 6. 30.

- 주 체 : 업체 및 각 실과

- 재산대장과 비교하여 부서별 물품현황 파악

□ 전자태그 발행

- 기 간 : ‘14. 6. 9 ~ 6. 21.

- 주 체 : 업체 및 새마을회계과

- 재물조사 진행과 동시에 조사 완료된 물품 태그발행 실시

□ 재산대장 DB정리, 검토 및 물품관리시스템 반영

- 기 간 : `14. 6. 30 ~ 7. 25.

- 주 체 : 업체 및 새마을회계과

- 부서이동처리 등 실제 물품과 전산상 자료 일치화

□ 전자태그 보완 발행

- 기 간 : `14. 7. 21 ~ 7. 31.

- 주 체 : 업체 및 새마을회계과

- 대 상 : 누락된 물품, 실제와 불일치 물품 등

- 실제태그 부착대상 물품과 물품관리시스템 100% 일치화

□ 전자태그 분류 및 부착, 재물조사 실시, 시스템 마감 및 마무리

- 기 간 : ‘14. 8. 1. ~ 8. 30.

- 주 체 : 업체 및 각 실과(새마을회계과 총괄)

- 단순물품은 각 실과에서 직접 부착하여 소요시간 최소화

․사전에 부착방법, 부착위치 교육

․단순물품 : 책상, 의자, 이동서랍, 옷장, 캐비닛 등
(각 실과별 기본적, 공통적 보유 품목)

- 컴퓨터, 전화기, TV, 전산·통신장비 및 서버 : 정보화지원과 추진

- 태그부착 완료와 동시에 리더기를 이용해  `14년도 정기재물조사 실시

- 직속기관 및 사업소 최종 점검하여 완료

□ 행정사항

□ 각 실과

- 사전 재물조사, 전자태그 발행․부착 및 재물조사 시 적극 협조

- 각 실과 물품 전자태그 구축 비용 일상경비로 지출(1백만원 이하)

※ 지출방법 : 각 실과 일상경비 또는 새마을회계과 사무관리비(풀)

- 1백만원 이상 실과 : 새마을회계과(풀예산)에서 지출

- 1백만원 이하 실과 : 각 실과 일상경비에서 지출을 원칙(탄력 운영)

□ 의회, 직속기관, 사업소

- 법정기한 내 구축사업 마무리

※ 세부추진계획표 (주 단위)

구분	6월					7월					8월
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
물품조사
DB정리
DB검토
시스템반영
태그발행
태그분류
태그부착
재물조사
시스템마감
마무리