내포신도시 개발사업 주간공정 보고(2015. 01. 15. 현재)

《 추진 중 》

공사명	공 사 개 요	공사비 (억원)	사 업 기 간	진도(%)			사업추진 내 용	시공사
				전주	금주	누계 계획
▣ 신도시사업 전체 공정율		12,700	‘07.07 ~ ‘20.12	55.3	0.1	55.4 55.4	·L H : 30.6% ·충개공 : 99.2%
▣ 부지조성
1-3공구 조성공사(LH)	․면적 429천㎡	160	’13.11 ~ ’16.07	43.8	0.4	44.2 44.2	·주요도로 우오수관로 부설	명지 건설
3-2공구 조성공사(LH)	․면적 1,182천㎡	318	’12.01 ~ ’15.07	87.9	0.1	88.0 88.0	·단독택지 경계석 시공	동성 건설
▣ 조 경
2구역 조경공사(충개공)	․2구역 (1,062천㎡)	349	’12.02 ~ ’17.03	96.8	-	96.8 96.8	·동절기 공사중지	승화 건설
2단계구역 조경공사(LH)	․면적 2,676천㎡	370	‘14.12 ~ `15.12	0.3	0.2	0.5 0.5	·가설사무실 설치 준비	대방 건설
홍예공원 조성공사(LH)	․면적 275천㎡	188	‘14.09 ~ ‘15.11	18.0	-	18.0 18.0	·가설펜스 설치	구일종합건설
▣ 전 기
2구역 전기공사(충개공)	․2구역 (3,783천㎡)	127	’12.02 ~ ’15.02	99.0	-	99.0 99.0	·잔손보기	삼흥 전력
2단계구역 전기공사(LH)	․면적 2,676천㎡	90	‘14.08 ~ ’15.07	35.7	0.6	36.3 36.3	·가로등 및 신호등 배관 공사	금원 전설
▣ 기반시설
집단에너지 공급시설	․열부하량 : 374.1 Gcal/h	6,116	’11.07 ~ ’20.12	17.9㎞	-	17.9㎞ 17.9㎞	·열배관 공사	롯데 건설
진입도로 (8.43km)	․홍성측 4.33km ․예산측 4.10km	1,462	’11.07 ~ ’15.06	88.7	0.1	88.8 88.8	·아스팔트콘크리트 포장 ·가교철거	동성 건설
U-city 2단계 관로공사	․면적 2,676천㎡	8	‘14.03 ~ ‘15.12	32.0	0.4	32.4 32.4	·전기 및 통신관로설치 공사	센텍 외 2개사
U-City 2단계 시설공사	․면적 2,676천㎡	80	‘15.01 ~ ‘16.06	-	0.1	0.1 0.1	·가설사무실 설치준비	유진정보통신
▣ 건 축
RH-7BL(LH) APT건립공사	․연면적 312천㎡ ․2,127세대	3,224	`12.12 ~ `15.09	76.1	0.8	76.9 77.4	·방바닥미장공사 및 세대 내 마감공사	서희 건설
경남APT 건립공사	․연면적 147천㎡ ․990세대	2,163	’13.08 ~ ’16.02	42.4	0.5	42.9 42.7	·15층 ~ 28층 골조공사	경남 기업
중흥APT 건립공사	․연면적 106천㎡ ․1,660세대	2,100	’13.10 ~ ’16.04	31.3	0.7	32.0 30.9	·1층 ~ 18층 골조공사	중흥 건설
모아APT 건립공사	․연면적 190천㎡ ․1,260세대	1,615	’13.09 ~ ’16.03	39.8	1.0	40.8 42.8	·14층 ~ 23층 골조공사	모아주택산업
충남내포 상록아파트	․연면적 64천㎡ ․497세대	828	‘14.09 ~ ‘16.09	6.48	0.32	6.8 7.5	·터파기 및 파일항타 ·버림 Con’c 타설	한백종건

《 준   공 》

공사명	공 사 개 요	공사비 (억원)	사 업 기 간	진도(%)			사업추진 내 용	시공사
				전주	금주	누계 계획
▣ 부지조성
( 1 단계 )
2-1공구 조성공사(충개공)	․면적 991천㎡	344	’09.05 ~ ’13.11	100	-	100 100	·공사준공	현대 건설
2-2공구 조성공사(충개공)	․면적 880천㎡	424	’10.04 ~ ’13.12	100	-	100 100	·공사준공	극동 건설
2-3공구 조성공사(충개공)	․면적 1,910천㎡	321	’10.11 ~ ’13.12	100	-	100 100	·공사준공	현대 아산
( 2 단계 )
1-1공구 조성공사(LH)	․면적 1,501천㎡	509	’11.08 ~ ’14.10	100	-	100 100	·공사준공	코오롱 글로벌
▣ 조 경
초기생활권 조경공사(LH)	․면적 75천㎡	78	’12.10 ~ ’13.12	100	-	100 100	·식생유지관리	유진건설 원광건설
▣ 전 기
초기생활권 전기공사(LH)	․가로등 179EA ․보안등 58EA ․신호등 TCP-7,8	28	’12.09 ~ ’14.06	100	-	100 100	·공사준공	금평 전설
▣ 기반시설
하수처리시설 건설공사	․용량 44천톤/일 중 1단계22천톤/일	786	’10.10 ~ ’13.10	100	-	100 100	·유지관리운전 시행	G S 건설
자동집하시설 건설공사	․집하장 2개소 ․이송관로22.1㎞	736	’10.10 ~ ’14.01	100	-	100 100	·유지관리운전 시행	포스코 건설
지 구 외 생태하천	․신경천 1.72㎞ ․목리천 0.63㎞	35	’10.12 ~ ’13.12	100	-	100 100	·공사준공	성보 건설
▣ 건 축
롯데APT 건립공사	․연면적 143천㎡ ․885세대	1,908	’11.01 ~ ’12.12	100	-	100 100	·사용승인(‘12.12.04)	롯데
극동APT 건립공사	․연면적 141천㎡ ․938세대	1,912	’11.11 ~ ’13.12	100	-	100 100	·사용승인(‘14.05.30)	극동 건설
충공임대빌딩 신 축 사 업	․연면적 8,714㎡ ․지하2~지상10층	147	’12.11 ~ ’14.01	100	-	100 100	·사용승인(‘13.12.30)	명승건설산업
내포아르페온 1차(오피스텔)	․연면적 23,061㎡ ․313세대	275	’13.04 ~ ’14.06	100	-	100 100	·사용승인(‘14.07.10)	국제디아이(주)
현대아산빌엔더스(오피스텔)	․연면적 29,998㎡ ․528세대	326	’13.05 ~ ’14.08	100	-	100 100	·사용승인(`14.08.22)	현대 아산(주)
효성APT 건립공사	․연면적 137천㎡ ․915세대	1,882	’12.05 ~ ’14.09	100	-	100 100	·사용승인(‘14.09.22)	진흥 기업
내포제나우스 (오피스텔)	․연면적 24,390㎡ ․350호	275	’13.06 ~ ’14.10	100	-	100 100	·사용승인(‘14.10.29)	상리 건설