내포신도시 개발사업 주간공정 보고(2015. 05. 14. 현재)

《 추진 중 》

공사명	공 사 개 요	공사비 (억원)	사 업 기 간	진도(%)			사업추진 내 용	시공사
				전주	금주	누계 계획
▣ 신도시사업 전체 공정율		12,700	‘07.07 ~ ‘20.12	56.4	0.1	56.5 56.5	·L H : 38.1% ·충개공 : 99.3%
▣ 부지조성
1-3공구 조성공사(LH)	․면적 429천㎡	160	’13.11 ~ ’16.07	51.2	0.7	51.9 51.9	·단독택지 우오수 관로 부설	명지 건설
3-2공구 조성공사(LH)	․면적 1,182천㎡	318	’12.01 ~ ’15.07	91.2	0.5	91.7 91.7	·보도블럭 설치	동성 건설
▣ 조 경
2구역 조경공사(충개공)	․2구역 (1,062천㎡)	349	’12.02 ~ ’17.03	97.2	-	97.2 97.2	·파고라, 의자 설치 등	승화 건설
2단계구역 조경공사(LH)	․면적 2,676천㎡	370	‘14.12 ~ `15.12	8.5	0.9	9.4 9.4	·가로수 식재 등	대방 건설
홍예공원 조성공사(LH)	․면적 275천㎡	188	‘14.09 ~ ‘15.11	21.3	1.8	23.1 23.1	·교목식재, 배수시설 설치	구일종합건설
▣ 전 기
2단계구역 전기공사(LH)	․면적 2,676천㎡	90	‘14.08 ~ ’15.07	76.3	1.8	78.1 78.1	·보안등 입선 및 건주	금원 전설
▣ 기반시설
집단에너지 공급시설	․시설규모 : 전기97mw 열394.4Gcal/h	5,819	’11.07 ~ ’23.12	17.9㎞	-	17.9㎞ 17.9㎞	·열배관 공사	내포그린에너지
진입도로 (8.43km)	․홍성측 4.33km ․예산측 4.10km	1,462	’11.07 ~ ’15.06	91.3	0.1	91.4 91.4	·부체도로 콘크리트 포장 ·램프구간 아스콘 포장	동성 건설
U-city 2단계 관로공사	․면적 2,676천㎡	8	‘14.03 ~ ‘15.12	77.1	4.4	81.5 81.5	·전기 및 통신관로설치 공사	센텍 외 2개사
U-City 2단계 시설공사	․면적 2,676천㎡	80	‘15.01 ~ ‘16.06	6.2	0.3	6.5 6.5	·CCTV 기초공사	유진정보통신
▣ 건 축
RH-7BL(LH) APT건립공사	․연면적 312천㎡ ․2,127세대	3,224	`12.12 ~ `15.09	89.1	0.7	89.8 89.8	·외벽 석공사	서희 건설
경남APT 건립공사	․연면적 147천㎡ ․990세대	2,163	’13.08 ~ ’16.02	61.5	0.5	62.0 61.5	·30층 골조공사	경남 기업
중흥APT 건립공사	․연면적 106천㎡ ․1,660세대	2,100	’13.10 ~ ’16.04	57.5	2.3	59.8 52.0	·9층 ~ 20층 골조공사	중흥 건설
모아APT 건립공사	․연면적 190천㎡ ․1,260세대	1,615	’13.09 ~ ’16.03	58.4	1.3	59.7 61.6	·옥탑골조 공사	모아주택산업
충남내포 상록아파트	․연면적 64천㎡ ․497세대	828	‘14.09 ~ ‘16.09	25.6	1.2	26.8 29.1	·지하층 ~ 3층 골조공사	한백종건

《 준   공 》

공사명	공 사 개 요	공사비 (억원)	사 업 기 간	진도(%)			사업추진 내 용	시공사
				전주	금주	누계 계획
▣ 부지조성
( 1 단계 )
2-1공구 조성공사(충개공)	․면적 991천㎡	344	’09.05 ~ ’13.11	100	-	100 100	·공사준공	현대 건설
2-2공구 조성공사(충개공)	․면적 880천㎡	424	’10.04 ~ ’13.12	100	-	100 100	·공사준공	극동 건설
2-3공구 조성공사(충개공)	․면적 1,910천㎡	321	’10.11 ~ ’13.12	100	-	100 100	·공사준공	현대 아산
( 2 단계 )
1-1공구 조성공사(LH)	․면적 1,501천㎡	509	’11.08 ~ ’14.10	100	-	100 100	·공사준공	코오롱 글로벌
▣ 조 경
초기생활권 조경공사(LH)	․면적 75천㎡	78	’12.10 ~ ’13.12	100	-	100 100	·식생유지관리	유진건설 원광건설
▣ 전 기
초기생활권 전기공사(LH)	․가로등 179EA ․보안등 58EA ․신호등 TCP-7,8	28	’12.09 ~ ’14.06	100	-	100 100	·공사준공	금평 전설
2구역 전기공사(충개공)	․2구역 (3,783천㎡)	127	’12.02 ~ ’15.02	100.0	-	100.0 100.0	·공사준공	삼흥 전력
▣ 기반시설
하수처리시설 건설공사	․용량 44천톤/일 중 1단계22천톤/일	786	’10.10 ~ ’13.10	100	-	100 100	·유지관리운전 시행	G S 건설
자동집하시설 건설공사	․집하장 2개소 ․이송관로22.1㎞	736	’10.10 ~ ’14.01	100	-	100 100	·유지관리운전 시행	포스코 건설
지 구 외 생태하천	․신경천 1.72㎞ ․목리천 0.63㎞	35	’10.12 ~ ’13.12	100	-	100 100	·공사준공	성보 건설
▣ 건 축
롯데APT 건립공사	․연면적 143천㎡ ․885세대	1,908	’11.01 ~ ’12.12	100	-	100 100	·사용승인(‘12.12.04)	롯데
극동APT 건립공사	․연면적 141천㎡ ․938세대	1,912	’11.11 ~ ’13.12	100	-	100 100	·사용승인(‘14.05.30)	극동 건설
충공임대빌딩 신 축 사 업	․연면적 8,714㎡ ․지하2~지상10층	147	’12.11 ~ ’14.01	100	-	100 100	·사용승인(‘13.12.30)	명승건설산업
내포아르페온 1차(오피스텔)	․연면적 23,061㎡ ․313세대	275	’13.04 ~ ’14.06	100	-	100 100	·사용승인(‘14.07.10)	국제디아이(주)
현대아산빌엔더스(오피스텔)	․연면적 29,998㎡ ․528세대	326	’13.05 ~ ’14.08	100	-	100 100	·사용승인(`14.08.22)	현대 아산(주)
효성APT 건립공사	․연면적 137천㎡ ․915세대	1,882	’12.05 ~ ’14.09	100	-	100 100	·사용승인(‘14.09.22)	진흥 기업
내포제나우스 (오피스텔)	․연면적 24,390㎡ ․350호	275	’13.06 ~ ’14.10	100	-	100 100	·사용승인(‘14.10.29)	상리 건설