충청남도 노인회관 건립(민선6기 공약사항)

□ 사업개요

❍ 전국에서 충남도만 도 단위 노인회관이 없어, 도내 노인들의

구심적 역할을 하는 도 단위 노인회관 건립 필요

- 시․군 지회장들이 대전에 위치한 도연합회의 내포 이전을 강력 촉구

※ 17개 시․도는 독립건물 확보, 충남도만 미확보

❍ 위    치 : 충남 홍성군 홍북면 신경리 916번지(1,040㎡)

❍ 건축규모 : 연면적 1,560㎡(지하1층, 지상3층)

❍ 사 업 비 : 4,471백만원(부지매입 571, 설계 113, 건축 3,722, 기자재 등 65)

❍ 공사기간 : ’15. 3~12(약 9개월) ※’15. 12.10준공예정

❍ 입주기관 : 노인회, 통합취업지원센터, 경로당광역지원센터 등

❍ 운영방안 : 소유(道) / 운영(노인회)

□ 상반기 추진실적

❍ ’13. 4월 도유재산 관리계획 의결(261회 본회의)

❍ ’13. 7월 제2차 투용자 심사 반영

❍ ’14.12월 부지매입 및 설계비 예산(687,600천원) 확보

❍ ’14. 2월 부지매입

❍ ’14. 8월 기본 및 실시설계 완료

❍ ’14.12월 공사비 및 부대비 예산(3,722,000천원) 확보

❍ ’15. 2월 입찰공고 및 낙찰자 선정

❍ ’15. 3월 공사 착공 ※ 공정율 : 30%(’15.6월말 기준)

❍ ’15. 5월 이사비 및 기자재 구입비 예산(64,650천원) 확보

□ 기대효과

❍ 도연합회 숙원사업 해결 및 31천명 노인회의 업무집적화에 기여