내포신도시 개발사업 주간공정 보고(2015. 08. 20. 현재)

《 추진 중 》

공사명	공 사 개 요	공사비 (억원)	사 업 기 간	진도(%)			사업추진 내 용	시공사
				전주	금주	누계 계획
▣ 신도시사업 전체 공정률		12,700	‘07.07 ~ ‘20.12	57.3	0.1	57.4 57.4	·L H : 44.2% ·충개공 : 99.3%
▣ 부지조성
1-3공구 조성공사(LH)	․면적 429천㎡	160	’13. 11 ~ ’16. 7	65.9	1.4	67.3 67.3	·대로 보조기층 포설, 보도블록 포장	명지 건설
▣ 조 경
2단계구역 조경공사(LH)	․면적 2,676천㎡	370	‘14.12 ~ ‘15.12	21.9	1.4	23.3 23.3	· 근린공원 인조화강성블록 포장, 연결녹지 포장	대방 건설
홍예공원 조성공사(LH)	․면적 275천㎡	188	‘14.09 ~ ‘15.11	54.2	1.5	55.7 55.7	실개천 밑다짐, 석축쌓기	구일종합건설
▣ 전 기
2단계구역 전기공사(LH)	․면적 2,676천㎡	90	‘14.08 ~ ’15.12	89.5	0.1	89.6 89.6	·가로등 및 보안등 접속함 설치	금원 전설
▣ 기반시설
집단에너지 공급시설	․열부하량 : 전기 97Mw 374.1 Gcal/h	5,819	’11.07 ~ ’23.12	17.9㎞		17.9㎞ 17.9㎞	·열배관 공사	롯데 건설
U-City 2단계 시설공사	․면적 2,676천㎡	80	‘15.01 ~ ‘15.12	21.8	2.6	24.4 24.4	·시설물 기초위치 선정 정보시스템 장비 협의	유진정보통신
▣ 건 축
경남APT 건립공사	․연면적 147천㎡ ․990세대	2,163	’13.08 ~ ’16.02	72.2	1.6	73.8 76.9	·내부 내장재, 설치 ·외부 도장 및 석공사	경남 기업
중흥APT 건립공사	․연면적 264천㎡ ․1,660세대	3,813	’13.10 ~ ’16.04	73.8	0.7	74.5 66.8	·옥탑골조공사	중흥 건설
모아APT 건립공사	․연면적 190천㎡ ․1,260세대	3,093	’13.09 ~ ’16.05	71.4	1.0	72.4 72.7	·내부마감공사	모아주택산업
충남내포 상록아파트	․연면적 64천㎡ ․497세대	828	‘14.09 ~ ‘16.09	45.6	0.5	46.1 48.3	·지하층 ~ 7층 골조공사	한백종건

《 준   공 》

공사명	공 사 개 요	공사비 (억원)	사 업 기 간	진도(%)			사업추진 내 용	시공사
				전주	금주	누계 계획
▣ 부지조성
( 1 단계 )
2-1공구 조성공사(충개공)	․면적 991천㎡	344	’09.05 ~ ’13.11	100	-	100 100	·공사준공	현대 건설
2-2공구 조성공사(충개공)	․면적 880천㎡	424	’10.04 ~ ’13.12	100	-	100 100	·공사준공	극동 건설
2-3공구 조성공사(충개공)	․면적 1,910천㎡	321	’10.11 ~ ’13.12	100	-	100 100	·공사준공	현대 아산

《 준   공 》

공사명	공 사 개 요	공사비 (억원)	사 업 기 간	진도(%)			사업추진 내 용	시공사
				전주	금주	누계 계획
▣ 부지조성
( 2 단계 )
1-1공구 조성공사(LH)	․면적 1,501천㎡	509	’11.08 ~ ’14.10	100	-	100 100	·준공검사	코오롱 글로벌
3-2공구 조성공사(LH)	․면적 1,182천㎡	318	’12. 1 ~ ’15. 7	100		100 100	·공사준공	동성 건설
▣ 조 경
초기생활권 조경공사(LH)	․면적 75천㎡	78	’12.10 ~ ’15.12	100	-	100 100	·식생유지관리	유진건설 원광건설
2구역 조경공사(충개공)	․2구역 (1,062천㎡)	349	’12.02 ~ ’17.05	100	-	100 100	·공사준공	승화 건설
▣ 전 기
초기생활권 전기공사(LH)	․가로등 179EA ․보안등 58EA ․신호등 TCP-7,8	28	’12.09 ~ ’14.06	100	-	100 100	·공사준공	금평 전설
2구역 전기공사(충개공)	․2구역 (3,783천㎡)	127	’12.02 ~ ’15.02	100		100 100	·공사준공	삼흥 전력
▣ 기반시설
하수처리시설 건설공사	․용량 44천톤/일 중 1단계22천톤/일	705	’10.10 ~ ’13.10	100	-	100 100	·유지관리운전 시행	G S 건설
자동집하시설 건설공사	․집하장 2개소 ․이송관로22.1㎞	676	’10.10 ~ ’14.01	100	-	100 100	·유지관리운전 시행	포스코 건설
지 구 외 생태하천	․신경천 1.72㎞ ․목리천 0.63㎞	35	’10.12 ~ ’13.12	100	-	100 100	·공사준공	성보 건설
U-city 2단계 관로공사	․면적 2,676천㎡	8	‘14.03 ~ ‘15.06	100	-	100 100	·공사준공	센텍 외 2개사
진입도로 (8.43km)	․홍성측 4.33km ․예산측 4.10km	1,459	’11.07 ~ ’15.06	100	0	100 100	·공사준공	동성 건설
▣ 건 축
롯데APT 건립공사	․연면적 143천㎡ ․885세대	1,908	’11.01 ~ ’12.12	100	-	100 100	·사용승인(‘12.12.04)	롯데
극동APT 건립공사	․연면적 141천㎡ ․938세대	1,912	’11.11 ~ ’13.12	100	-	100 100	·사용승인(‘14.05.30)	극동 건설
RH-7BL(LH) APT건립공사	․연면적 312천㎡ ․2,127세대	3,857	`12.12 ~ `15.12	100		100 100	·준공	서희 건설
충공임대빌딩 신 축 사 업	․연면적 8,714㎡ ․지하2~지상10층	147	’12.11 ~ ’14.01	100	-	100 100	·사용승인(‘13.12.30)	명승건설산업
내포아르페온 1차(오피스텔)	․연면적 23,061㎡ ․313세대	275	’13.04 ~ ’14.06	100	-	100 100	·사용승인(‘14.07.10)	국제디아이(주)
현대아산빌엔더스(오피스텔)	․연면적 29,998㎡ ․528세대	326	’13.05 ~ ’14.08	100	-	100 100	·사용승인(`14.08.22)	현대 아산(주)
효성APT 건립공사	․연면적 137천㎡ ․915세대	1,882	’12.05 ~ ’14.09	100	-	100 100	·사용승인(‘14.09.22)	진흥 기업
내포제나우스 (오피스텔)	․연면적 24,390㎡ ․350호	275	’13.06 ~ ’14.10	100	-	100 100	·사용승인(‘14.10.29)	상리 건설