내포문화권 특정지역 종합개발사업 개략투자사업 및 투자계획 구상

Ⅰ. 투자사업 선정의 접근방법

1. 투자대상 포함사업

○ 중앙정부, 도 추진 및 지원사업

- 내포문화권 특정지역의 역사문화.관광자원 개발을 위하여 기추진 또는 지원하는 지역개발사업(예: 전국관광개발계획, 제3차충청남도종합발전계획 등)

○ 시·군 추진 및 지원사업

- 내포문화권 특정지역의 개발을 위하여 시·군차원에서 반영을 요구하는 사업(시·군 반영요구사업)

2. 투자대상사업의 포함여부 및 우선순위 결정기준

○ 지속추진사업 여부

- 현재 추진중이거나 추진확정사업(지속사업, 추진확정사업 등)

○ 개발목표 달성부합도

-「학습.체험위주의 복합여가문화지대 조성」의 개발목표 및 부문별 개발방향, 추진시책과의 부합·달성가능사업

·중점진흥지구별 개발주제를 극대화할 수 있는 역사문화, 관광개발, 도로개발사업 및 보완사업

○ 지역개발 파급효과

- 지역개발 선도효과 및 타 사업과의 연계성이 높은 사업, 지역경제 및 개발파급효과가 큰 사업, 자치단체의 재정수입에 직접적으로 기여할 수 있는 사업

○ 개발수요 및 여건구비도

- 개발에 따른 효과가 단기적으로 예상되어 사업추진시 재원조달이 용이하고 자체적으로 비용을 회수할 수 있는 사업, 혹은 주변의 개발여건이 갖추어져 있는 개발사업

·도로개설시 주변개발여건 변화와 통행량 등 교통수요 감안

< 기준적용방법 >

- 해당사업별로 선정기준을 적용 (● 높음  ○ 보통  △ 낮음)

- 적용결과: ● 1개이상, ○ 2개이상인 사업은 대상사업에 포함(△ 2개는 ○ 1개로 감안)

3. 투자사업비 산출 및 단계별,주체별 분담내역

○ 총투자사업비 산출

- 각 부문별 현행사업단가를 적용하여 개략 산출

* 도로사업비 단가: 2차선 50억원/□, 4차선은 120억원/□

- 사업비 제외: 도로 등 광역적 차원에서 중앙정부가 추진하는 사업(고속도로, 국도, 국지도, 철도 등), 기존 국가 및 지방계획에 의거하여 추진중인 사업

○ 주체별 분담내역

- 각 부문별 현행 분담기준 적용 산출

Ⅱ. 내포문화권 특정지역 개발사업 총괄표

구 분	사업유형	사업비 (억원)	단계별 투자내역		주체별 투자내역			주요사업
			1단계	2단계	국비	지방비	민자
총 계		15,491	9,458	6,033	9,170	4,580	1,741
역사문화 자원의 보전 및 정비부문	종교자원	826	316	510	511	265	50	보원사지 복원·정비, 가야동유적 발굴정비, 대련사 보수정비, 수덕사보수정비, 봉산 사면석불 정비, 안국사 복원, 해미읍성 복원 및 천주교 순례지 성역화 사업, 갈매못성지 정화, 청주교유적지 성역화 및 정화 등 10건
	관방유적 관련자원	2,271	450	1,821	1,522	749	-	임존성·홍주관아·장곡산성·오천성·보령성 복원·정비, 안흥성 복원사업, 소근진성 정비사업, 면천읍성 복원, 관내정화, 당진읍성 복원, 합덕제 복원정정, 백제부흥운동관련 유적 정화, 대흥동헌 보수정비, 승전목공원 조성 등 14건
	선사유적 관련자원	18	13	5	9	9	-	학술조사 및 유적발굴, 내포지역 도서학술조사 등 2건
	인물· 문화자원	202	147	55	134	68	-	최영,성삼문 생가지 정비, 만해 한용운·백야 김좌진 생가지 성역화, 최치원 유적고증 및 발굴조사, 송곡서원 보수·정비, 홍주의사총 성역화사업, 송익필 묘소 정화·기념사업 등 9건
	민속· 문화자원	184	132	52	79	69	36	전통옹기 시연장, 서산 박첨지놀이 전수회관, 한성준 민속무용 전수관, 궁중요리 전수관, 소목장 전시관, 결성농요 농사박물관 등 9건
	소계	3,501	1,058	2,443	2,255	1,160	86
관광단지 및 관광시설 확충	관광시설 및 테마체험촌 조성	1,450	800	650	445	355	650	내포민속촌, 가야산불교문화촌, 청소년수련마을, 용봉산 수련시설, 해양박물관 등 5건
	관광지 및 관광단지 조성	1,340	300	1,040	160	175	1,005	용형계곡 관광지, 축산체험 관광지, 천북지구 전문휴양촌, 왜목관광지, 철새·해양 생태공원, 오서산 억새풀 자연생태공원, 예당저수지 관광지, 남당지구 관광지, 안면도 국제관광단지, 간월도 관광지 등 10건
	관광이벤트 사업	-	-	-	-	-	-	-
	소계	2,790	1,100	1,690	605	530	1,655
도로교통 부문	간선교통시설	-	-	-	-	-	-	당진∼대전고속도로, 장항선 복선화, 서해안 관광철도, 동서산업선, 서남선, 남당 1종항 개발, 안흥항 개발 및 정비 등 7건
	지역교통시설	9,200	7,300	1,900	6,310	2,890	-	가야산 순환도로, 역사문화체험도로, 내포문화연계도로, 임존성 진입로 확·포장, 추사고택진입로 확·포장 등 8건
	소계	9,200	7,300	1,900	6,310	2,890	-

Ⅲ. 투자사업 선정 및 개략사업비 산출

< 역사문화자원의 보전 및 정비부문 >

구 분			사 업 명	사 업 개 요	사업비 (억원)	단계별 투자내역		주체별 투자내역
						1단계	2단계	국비	지방비	민자
종교자원	불교자원	사지복원 및 정비	보원사지 복원·정비	-위치: 서산시 운산면 용현리(100천평) -사업기간: 2005-2011 -발굴·고증, 토지매입, 발굴조사, 복원, 주변정비 등 보원사지 복원사업(보물4점)	200	50	150	140	60	-
			가야동유적 발굴정비	-위치:덕산면 상가리(사업기간: 2002-2010) -가야사지 발굴·정비,남연군묘주변정비, 보덕사 정비, 옥병계정비 등	50	25	25	35	15	-
		사찰 등 보수정비	대련사 보수정비	-위치: 예산군 광시면 동산리(2002-2005) -구락전, 신검당 보수 및 주변정비	10	10	-	5	5	-
			수덕사 보수정비	-위치:덕산면 사천리(사업기간: 2002-2005) -대웅전, 견성암 보수 및 주변정비	20	20	-	14	6	-
			봉산 사면석불 정비	-위치:봉산면 화전2리(2,497평) -사업기간: 2002-2005 -주변정비,보호각 보수,진입로확포장,주차장	6	6	-	4	2	-
			안국사 복원	-당진군 정미면 수당리 -안국사 복원 대지매입, 사찰건축, 진입로 개설(보물 101호, 향토유적 제6호)	100	-	100	50	50	-
			기 타	-남문리 5층석탑 정비공사 -천장사 사찰보수	10	10	-	8	2	-
	천주교 자원	성지 성역화 사업	해미읍성 복원 및 천주교순례지 성역화 사업	-위치: 서산시 해미면 읍내리(40천평) -사업기간: 1990-2011 -충청도 병마절도사영복원,역,객사,주막 및 민가복원, 성벽 등 트랙킹코스 개발, 천주교인 박해감옥 복원, 호야나무 조성, 기타 편의시설	300	130	170	210	90	-
			갈매못성지 정화	-위치:보령시 오천면 영보리 -사업기간:2002∼2012(10년) -사업내용:토지매입, 성지조사 및 복원, 고증, 주변정비 편익시설확충 1식	30	15	15	15	5	10
			천주교유적지 성역화 및 정화	-솔뫼성지, 신리성지, 합덕성당, 이존창 생가지 정비, 여숫골 정비 등	100	50	50	30	30	40

구 분		사 업 명	사 업 개 요	사업비 (억원)	단계별 투자내역		주체별 투자내역
					1단계	2단계	국비	지방비	민자
관방자원	성곽복원·정비	임존성 복원정비	-위치: 예산군대흥면 상중리, 광시면 동산리;홍성군금마면 월암리(봉수산) -규모:937천□(283천면)/ -사업기간: 1999-2010 -산성복원(1,500m),등산로정비(2.5km),편의시설	200	100	100	140	60	-
		홍주관아 복원 ·정비(고도옛모습되살리기사업)	-위치: 홍성군 홍성읍 오관리(12천평) -사업기간: 2002-2011 -내아, 책실, 관청, 공고, 내삼문 등 복원	400	200	200	280	120	-
		장곡산성 복원정비	-위치: 홍성군 장곡면 산성리(산성 1353m, 28천평) -사업기간: 2002-2010 -토지매입, 발굴조사, 산성정비 등	50	25	25	25	25	-
		안흥성 복원사업	-위치:태안군 근흥면 정죽리 산 377-2 -사업기간: 1993-2011	81	30	51	40	41	-
		소근진성 정비사업	-위치:소원면 소근리 산 2번지 일원 -사업기간: 1995-2011	30	10	20	15	15	-
		면천읍성 복원, 관내정화	-당진군 면천면 성상리 소재 -조선세종 21년 축조(도기념물 91호)	500	-	500	350	150	-
		당진읍성 복원	-당진군 당진읍 읍내리 소재(장기구상사업)	100	-	100	80	20	-
		합덕제(연호제) 복원정정	-당진군 합덕읍 소재 -후백제 견원이 축조(토목사업)	300	-	300	150	150	-
		기타관방유적 자원복원	-신평현성복원, 몽산성 복원, 아후산성 복원, 당진태미산성, 웅포성 복원, 당진군 진성 복원 등 6건	300	-	300	240	60	-
		백제부흥운동 관련 유적정화	-백제부흥운동 당시 석문면 백사, 백흔강 전투지(웅포성) 장암, 순향, 지벌포, 막무덤, 배울무테	200	-	200	140	60	-
		오천성 복원·정비	-위치:보령시 오천면 소성리 -사업기간:2002∼2011(10년) -사업내용:성곽보수, 문루복원, 토지매입, 발굴조사, 고증, 지장물매입, 성내정비	50	25	25	25	25	-
		보령성곽복원·정비	-위치:보령시 주포면 보령리 -사업기간:2002∼2006(5년) -사업내용:성곽보수,발굴조사, 지장물매입, 성내정비	30	30	-	20	10	-

구 분		사 업 명	사 업 개 요	사업비 (억원)	단계별 투자내역		주체별 투자내역
					1단계	2단계	국비	지방비	민자
관방자원	성곽 보수·정비	대흥동헌 보수정비	-위치:대흥면 동서리(사업기간: 2002-2005) -대흥동헌 보수정비	20	20	-	10	10	-
	동학관련유적	당진 승전목 공원 조성	-당진 승전목 공원조성	10	10	-	7	3	-
	기타사업	면천골정제복원	-당진 면천면 성상리	-	-	-	-	-	-
선사유적자원	유적발굴 및 정비	학술조사 및 유적발굴	-초락도 고란초 학술조사, 난지도 가시연꽃 학술조사, 교로리, 난지도 등 패총발굴조사 -내포지역 전역으로 확대(지표조사)	8	8	-	4	4	-
		내포지역 도서학술조사	-10여개도서(행담도, 대·소난지도, 우무도등) -내포지역 전역으로 확대(지표조사)	10	5	5	5	5	-
인물·문화자원	생가지, 서원 등 보수·정비	최영,성삼문 생가지 정비	-위치: 홍성군 홍북면 노은리(4천평) -사업기간: 2002-2006 -비각, 사당	71	71	-	50	21	-
		만해 한용운 생가지 생역화	-위치: 홍성군 결성면 성곡리 (20,734□) -사업기간: 2002-2007 -생가, 사당, 삼문, 관리사, 화장실, 급수대, 성역화비, 안내판	32	12	20	22	10	-
		백야 김좌진 생가지 성역화	-위치: 홍성군 갈산면 행산리(20,139□) -사업기간: 2002-2006 -생가, 사당, 문간채, 관리사, 성역화비, 전시관, 기타 편의시설	13	13	-	7	6	-
		고운 최치원 선생 유적고증 및 발굴조사	-위치: 홍성군 장곡면 월계리 일원 -묘소 및 금석문	10	5	5	8	2	-
		기타 생가보전 및 기념비 설치	-이종진 선생 생가, 옥파이종일 생가지정비, 윤곤강 시비건립, 이달선생 기념사업	10	-	10	5	5	-
		송곡서원 보수·정비	-위치: 서산시 인지면 애정리 -사업기간: 2002-2005 -본전, 동서재, 내삼문 보수 및 주변정비	10	10	-	5	5	-
	묘소 등 정비	홍주의사총 성역화 사업	-위치: 홍성군홍성읍 대교리 124-2번지(37,784□) -사업기간: 2002-2006 -묘역, 창의사, 관리사, 창의문, 진충문, 성역화비 등	26	26	-	16	10	-
		송익필 묘소 정화, 기념사업	-조선 선조때 대학자, 시인, 8대문장가 -당진군 당진읍 원당리 소재(군지정향토유적 5호)	10	-	10	5	5	-
		기타 묘소 및 선양사업	-영의정 이양원 묘소정화 및 사당건립 -태사 복지겸, 박술희 선양사업	20	10	10	16	4	-

구 분		사 업 명	사 업 개 요	사업비 (억원)	단계별 투자내역		주체별 투자내역
					1단계	2단계	국비	지방비	민자
민속문화자원	전수 및 학습시설	전통옹기 시연장 설치	-위치: 아산시 도고면 금산2리 -규모: 시연장 1동, 옹기가마 1식 -기간: 2002∼2003	10	10	-	-	2	8
		서산 박첨지놀이 전수회관	-서산승무회관 등	10	5	5	2	2	6
		한성준 민속무용 전수관 (무형문화재)	-위치: 홍성군 갈산면 일원 -주요시설: 한성준 기념관, 민속무용 전수관, 야외공연장 및 공원 등	20	10	10	4	6	10
		궁중요리 전수관 (무형문화재)	-위치: 예산군 덕산면 사동리 일원 -주요시설: 궁중음식 시연장, 전수관 등	10	5	5	2	2	6
		소목장 전시관 (무형문화재)	-위치: 예산군 덕산면 옥계리 일원 -주요시설: 목공예 전시관 및 체험장 등	10	5	5	2	2	6
		결성농요 농사박물관 건립	-홍성군 결성면 읍내리 -규모:400평 -주요시설: 농요전수관, 농사관련유물전시관 -사업기간: 2001-2002	10	10	-	4	6	-
	민속자원 보수정비	옛포구 정비	-위치: 예산군 예산읍 창소리, 고덕면 구만리 -사업기간: 2002-2006 -창소리뱃길정비(9km),선착장(2),고덕면구만리뱃길정비(10km),선착장(2)	50	50	-	25	25	-
		기념물 보호시설 설치	-동학 이한눌 신도비 보호각, 당진 탑동석물복원, 신평 석장승 보호각, 당진 배바위 보호각, 태안 승언리 상여 보호각 정비, 회화나무보호 등 6건	34	17	17	17	17	-
		기타 사업	-황도붕기풍어제 당집정비공사	10	10	-	7	3	-
기 타			-목애당 정비공사/-홍주사 만세루 정비공사 -경이정 정비공사 / -서산 객사 보수	20	10	10	16	4	-

< 관광단지 및 관광시설 확충 >

구분	사 업 명	사 업 개 요	사업비 (억원)	단계별 투자내역		주체별 투자내역
				1단계	2단계	국비	지방비	민자
관광시설 및 테마 체험촌 조성	내포민속촌	-위치: 예산군 덕산면 일원 -사업기간: 2002-2011 -주요시설: 보부상유물전시관 신축, 보부상거리 조성(39,000□), 보부상촌,내포민속박물관(2천평,내포지역역사·민속·풍속·자연 사료보전), 노천시장 확대, 장목신축 등	350	250	100	20	30	300
	가야산불교문화촌	-위치: 가야산 주변(서산시 일원) -주요시설: 불교역사문화 전시관, 불교문화체험관, 수도관, 불교관련 기념품점, 음식점, 상가 등	200	100	100	25	25	150
	청소년수련마을	-위치:홍성군 일원 -사업기간: 2002-2010 -주요시설: 청소년 휴식공간 및 청소년 교육장(교육관), 인물박물관 조성	200	100	100	100	100	-
	용봉산 수련시설	-위치:홍성군 홍북면 상하리 일원(용봉산) -규모:160,000평(사업기간: 2002-2011) -바이오파크, 아트캠프 시설 등	400	200	200	100	100	200
	해양박물관	-위치: 태안군 일원 -지역특화박물관 -사업기간: 2001∼2011	300	150	150	200	100
관광지 및 관광단지 조성	용현계곡 관광지	-위치: 서산시 운산면 용현리(300천평) -사업기간: 2006-2011 -관광·휴양활동시설, 운동 및 놀이시설, 숙박시설	500	-	500	50	50	400
	축산체험 관광지	-도입시설:한우박물관, 한우시식장, 골프장, 조각공원, 기타 편의시설(규모: 400만평)	500	100	400	50	50	400
	천북지구 전문휴양촌	-위치: 보령시 천북면 장은리 산 207, 사호리 산130 -기간: 2001-2005 / 면적: 43,635□ -사업:관리사무소, 양육장, 어류장, 방갈로 등	50	50	-	-	15	35
	철새·해양 생태공원	-친환경적 철새공원 조성, 광관측시설, 휴게실, 서식환경 답사시설, 생태박물관 등 -위치: 천수만, 가로림만, 대호만 일원	240	100	140	50	50	140
	오서산 억새풀 자연생태공원	-위치: 홍성군 광천읍 오서산 일원 -사업기간: 2002∼2005 -주요사업: 전망데크 및 오두막, 해설센터, 안내판 등	50	50	-	10	10	30

구분	사 업 명	사 업 개 요	사업비 (억원)	단계별 투자내역		주체별 투자내역
				1단계	2단계	국비	지방비	민자
관광지 및 관광단지 조성	예당저수지 관광지 (추진중)	-위치:응봉면 후사리(규모:42천평) -사업기간: 1986-2006 -야영·숙박시설, 휴게시설, 편익시설 등	10 (48)*	10	-	3	2	5
	남당지구 관광지 (추진중)	-위치:홍성군 서부면 남당리, 어사리, 궁리 -사업기간: 1999-2010 -부지매입 및 기반시설, 건축공사	1081 (1)*	753	328	88	86	907
	안면도 국제관광단지 (추진중)	-안면읍(사업기간: 2000-2020년)	5,565 (11,129)	2,565	3,000	1,390	1,390	2,785
	간월도 관광지 (추진중)	-위치:서산시 부석면 간월도리 (149,800□) -사업기간:1996-2007 -공공편의시설, 숙박시설, 휴양·문화시설,철새조망대, 조류생태관	466.5 (2.5)*	334.5	132	-	74.5	392
축제 및 이벤트 추진		-지역축제 및 이벤트 개발

* 아미처리된 부분은 사업비 미포함

< 도로교통부문 >

구 분		사 업 명	사 업 개 요	사업비 (억원)	단계별 투자내역		주체별 투자내역
					1단계	2단계	국비	지방비	민자
간선교통시설	고속도로	당진-대전간 고속도로	-구간: 당진∼대전(94□, 권역내 약50□) -사업기간: 1996-2010년	6,055 (11,383)	3,000	3,055	6,055	-	-
	철 도	장항선 복선화	-구간: 천안∼장항(총143□, 권역 70□) -사업기간: 1997∼2006년	6,982 (13,964)	6,982	-	6,982	-	-
		서해안 관광철도	-위치:삽교∼덕산∼해미∼서산∼태안∼안흥(54□, 단선) 사업기간:2005-2010(장기구상)	6,900	-	6,900	6,900	-	-
		동서산업선	-구간: 천안∼당진∼안흥(98□ 단선) -사업기간: 2005-2010년	(13,426)	-	(13,426)	(13,426)	-	-
		서남선	-구간: 당진∼예산(70□) -사업기간: 2011-2020년	(9,590)	-	(9,590)	(9,590)	-	-
	항 만 (어항정비)	남당 1종항 개발	-위치:서부면 남당리 일원 -사업기간: 2002-2006 -시설:동서 방파제, 호안시설, 물양장, 준설 (어항개발사업 추진중)	257	257	-	257	-	-
		안홍항 개발 및 정비	-음식 및 특산물판매장, 주차시설, 도시기반시설 및 어항정비 (어항개발사업 추진중)	200	200	-	200	-	-
지역교통시설	관광진입도로 개설 및 연계도로 확포장	가야산순환도로	-위치:덕산∼가야동유적∼보원사지∼마애삼존불∼운산(지방도618, 647호)∼해미∼부석 -규모:연장 25□, 폭 12m (관광전용도로) -사업기간: 2002-2006	1,250	1,250	-	750	500	-
		역사문화 체험도로	-시설구간:예산군덕산면∼서산시고북면∼간월도,부남호(연장:20□) -확포장구간:서산시예천동∼부석면 창리(지방도 649호, 21□)	2,520	2,520	-	1,764	756	-
		내포문화 연계도로	-위치:합덕∼면천∼고덕∼덕산∼갈산(지방도 622호)∼고북∼간월호∼부남호∼남면∼태안(남면∼태안:4차선 확포장) -사업기간: 2002-2005 -규모:개설 20□, 확포장 15□ 폭 18.5m *국지도 40호선 사업비(1,800억) 미포함	2,400	2,400	-	1,680	720	-

주 *: 아미 처리된 부분은 사업비 미포함

구 분		사 업 명	사 업 개 요	사업비 (억원)	단계별 투자내역		주체별 투자내역
					1단계	2단계	국비	지방비	민자
지역교통시설	관광진입도로 개설 및 연계도로 확포장	임존성진입로 확.포장	-위치:광시∼대흥∼응봉∼삽교(지방도 619호) -사업기간: 2002-2005 -규모:연장 14□, 폭 18.5m	1,680	1,680	-	1,176	324	-
		추사고택진입로 확.포장	-위치:오가면 역탑리, 신암면 용궁리(군도5호) -사업기간: 2002-2005 -규모:연장 9□, 폭 18.5m	1,080	1,080	-	756	324	-
		왜목관광지 진입도로	-위치: 당진군 왜목마을(해뜨고지는마을) -주요사업: 왜목마을 관광지 진입도로(장고항∼왜목), 등	300	50	250	200	100	-
	지방도 개설 및 확포장	해미IC-태안읍간 직통지방도 신설	-해미IC-태안읍간 직통지방도 신설(17□)	850	-	850	600	250	-
		서산시 2호선 확포장	-서산시 2호선 (부석∼고북) (16□)	800	-	800	560	240	-
		기타 도로확포장	-갈산∼해미간 4차선 확포장(국도) -홍성∼덕산간 4차선 확포장(추진중) -홍성∼청양간 확포장(국도) -지방도 69호∼국도29호 도로개설(국도) -군도 17호 확포장 공사	-	-	-	-	-	-