금산 생태숲

❍ 지역문화와 관광예술 ․ 전통(현대와 옛것) ․ 동식물 ․ 교육 ․

학습․환경이 어우러지는 차별화 된 생태 숲 조성

〈 사업개요 〉

❍ 위  치 : 금산 남이 건천 자연휴양림 연접 400ha(군유림)

❍ 기  간 : 2002~2007년(1년 설계, 5년 조성)

❍ 사업비 : 7,558백만원(국비 50%, 도비 15%, 군비 35%)

- ’07까지 52억 800만원(설계비 포함)

- 보완 : ’08년-5억원, ’09년-4.5억원, ’10년-5억원, ’11년-5억원,

’12년-3억원, ’13년-1억원

〈 그간 추진상황 〉

❍ 기본계획 승인 : ’04. 4. 6(충청남도지사)

❍ 기본 및 실시설계 : 204,641천원(’02. 12∼’05. 3)

❍ 토목공사(완료) : 1,097,511천원(’05. 1∼’05. 11)

- 교량(2), 비탈면 자연토 복원공(810㎡)

- 임도변 자연석쌓기(843㎡), 배수암거 설치

❍ 조경공사 착수 : ’06. 10. 2

❍ 생태학습관 전시시설 완료 : ’07. 11. 4

- 전시관 : 768.53㎡(지상2층),  교육관 : 408.6㎡(지상2층)

❍ 교육관 공사 완료 : ’08. 3. 15

❍ 공사 완료 : ’08. 6. 13(’08. 6. 13 개장)

2. 백제 생태숲

〈 사업개요 〉

❍ 위    치 : 부여군 규암면 합정리 산11번지 일원(52ha)

❍ 면    적 : 52ha(집중복원지역 8ha, 자연생태원 44ha)

❍ 사업기간 : ’03년 ~ ’06년(4년간)

❍ 사 업 비 : 48억원(국비 50%, 도비 50%)

※ ’07년 보완사업비 500백만원(국비 250, 도비250) 포함

〈 그간 추진상황 〉

❍ 기본계획 승인 : ’04. 1(충청남도지사)

❍ 기본 및 실시설계 : 200백만원(’03 7~’03. 12)

❍ 백제숲 조성사업 완료 : 4,300백만원(’04~’06.12)

- 집중복원지역(8ha) : 소나무 등 67종 146천본 식재 등,

- 자연 생태원(44ha) : 생태습지원, 자연생태원 등

❍ 백제숲 보완계획 수립(’07. 9~’08. 5) - ’07정기종합감사 지적

❍ 백제생태숲 보완사업 추진(’08. 6 ~ 현재)

❍ 일부지역 민자사업계획 중복에 따른 협의 추진중(’09년 7월 현재)

❍ 보완공사(5억원) 마무리 : ’09. 12. 27

- 소나무 등 4종 1,409본 식재,  수목이식 129본(소나무)

❍ 민자사업계획 중복지역 협의 완료 및 생태숲 조성 변경승인

❍ ’07년 종합감사시 지적사항(고사목 보식) 보완

❍ 민자사업으로 인한 구역 재지정 : 2009. 12. 23

3. 자생식물원

① 자생식물원 조성 필요성

- 우리 고유의 향토․자생식물 등 초본류․관목류의 체계적인

보전․육성으로 식물종다양성․자원화 연구의 활성화 촉진

② 사업개요

- 대 상 지 : 3ha이상의 공유지

- 사업기간 : 3년(설계 1년, 조성 2년)

- 사 업 비 : 개소당 총사업비 15억원 이내 또는 1ha당 2억원 이내

- 사업내용

· 지방고유의 향토․특산식물을 보존․전시할 수 있는 전시원 조성

· 자생식물의 교육․탐방․체험 등을 위한 전시관․체험관․

산림생태관찰원․탐방로 등 설치․조성

③ 자생식물원 추진 현황 : 2개소(완료 1, 조성 1)

<서산 버드랜드 : 조성 완료>

❍ 위    치 : 서산시 부석면 창리 산5-1번지 일원(버드랜드 내)

❍ 면    적 : 4ha(40,000㎡)

❍ 사업기간 : 2013년~2015년(3년간)

❍ 사업내용 : 약용식물원, 초화원, 수변식물원, 생태교육장, 산책로 등

<공주 주미산 : 조성 中>

❍ 위    치 : 공주 금학동 산54-2번지 일원(주미산 자연휴양림 내)

❍ 면    적 : 4ha(40,000㎡)

❍ 사업기간 : 2015년~2017년(3년간)

❍ 사업내용 : 전통체험관, 화목원, 수생원, 희귀원, 테라피원 등