구례군 고시 제2016 - 55호

하천공사 시행계획 고시

하천법 제27조 및 같은법 시행령 제26조의 규정에 따라 하천공사 시행계획을 다음과 같이 고시합니다.

2016.   11.   14.

구  례  군  수

1. 사업의  명칭 : 서시천 하천재해예방사업

2. 사업의 목적 및 개요

가. 목  적 : 본 과업은 지방하천 서시천에 대하여 군민의 정서함양 및 역사 ․ 문화와 연계한 하천정비를 통해 홍수방어시설은 물론 다양한 생물이 서식할 수 있는 하천공간계획을 수립하며, 또한, 지역 고유의 역사․문화가 고려된 자연친화적인 하천조성을 위해서, 하천기본계획, 관련 개발계획 및 하천설계기준 등 제반 설계기준에 의거 재해예방사업 실시설계 용역을 시행하는데 그 목적이 있음.

나. 사업량

1) 축 제 공 : L=4.82 km

2) 호 안 공 : 전석쌓기 L=2,380.1m(A=12,781.7㎡), 식생환경블럭

L=1,260.0m(A=12,621.7㎡), 전석붙임 L=1,055.5m

(A=9,074.36㎡), 보축 L=120.0m

3) 구조물공 : 배수통관 23개소, 배수통문 3개소, U형측구 등

4) 보    공 : 가동보 3개소, 고정보 7개소 등

5) 교 량 공 : 3 개소(한천교, 원촌교, 효동교)

6) 포 장 공 : 콘크리트포장 L=1,718.0m, A=1,374.4㎡

7) 부 대 공 : 1식

3. 사업 시행지역의 위치 : 전라남도 구례군 산동면 관산리 ∼ 외산리 일원

4. 사업 시행자의 명칭 및 주소

가.명  칭 : 구례군청

나.주  소 : 전라남도 구례군 구례읍 봉성로 1

5. 사업의 착공 및 준공예정일

가. 착  공  일 : 2016. 06. 29.

나. 준공예정일 : 2019. 06. 13.

6. 수용 또는 사용하고자 하는 물건 또는 권리에 관한 명세와 소유자외

의 권리자 성명 및 주소

가. 토지 및 토지에 관한 소유권외의 권리 :“붙임”

나. 토지에 정착한 물건 또는 그 물건에 관한 소유권 외의 권리

7. 실시설계도서 : 전라남도 구례군청 안전건설과 비치

8. 사업비 및 자금조달계획

구 분	사 업 비(천원)				비 고
	계	국 비	도 비	군 비
전체분	20,000,000	12,000,000	-	8,000,000
2015년	667,000	400,000	-	267,000
2016년	5,000,000	3,000,000	-	2,000,000
2017년	5,000,000	3,000,000	-	2,000,000
2018년	5,000,000	3,000,000	-	2,000,000
2019년	4,333,000	2,600,000	-	1,733,000

9. 예정공정표

월 별 공 종		보 할 (%)	추 진 계 획 ( 월 )																		비고
			2월	4월	6월	8월	10월	12월	14월	16월	18월	20월	22월	24월	26월	28월	30월	32월	34월	36월
축 제 공 (토 공)		16.07	0.75	1.00	1.95	2.58	2.76	2.58	1.95	1.45	1.05
			0.75	1.75	3.70	6.28	9.04	11.62	13.57	15.02	16.07
축 제 공 (호 안 공)		23.80			1.58	1.75	1.75	1.98	1.98	1.98	1.98	1.98	1.98	1.93	1.75	1.58	1.58
					1.58	3.33	5.08	7.06	9.04	11.02	13.00	14.98	16.96	18.89	20.64	22.22	23.80
축 제 공 (배 수 공)		4.74		0.25	0.35	0.55	0.58	0.64	0.64	0.58	0.55	0.35	0.25
				0.25	0.60	1.15	1.73	2.37	3.01	3.59	4.14	4.49	4.74
축 제 공 (포 장 공)		0.62												0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10
														0.10	0.20	0.31	0.42	0.52	0.62
보 공		20.54			1.78	1.78		2.28	2.42	2.42	2.42	2.42		1.78	1.68	1.56
					1.78	3.56		5.84	8.26	10.68	13.10	15.52		17.30	18.98	20.54
교 량 공		31.29			1.95	1.95		2.38	2.95	3.17	3.17	3.17		2.95	2.95	2.75	1.95	1.95
					1.95	3.90		6.28	9.23	12.40	15.57	18.74		21.69	24.64	27.39	29.34	31.29
부 대 공		2.94	0.12	0.12	0.16	0.16	0.16	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.18	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.12	0.12
			0.12	0.24	0.40	0.56	0.72	0.92	1.12	1.32	1.52	1.72	1.90	2.06	2.22	2.38	2.54	2.70	2.82	2.94
계	월 별	100.0	0.87	1.37	7.77	8.77	5.25	10.06	10.14	9.80	9.37	8.12	2.41	6.92	6.64	6.16	3.80	2.21	0.22	0.12
	누 계	100.0	0.87	2.24	10.01	18.78	24.03	34.09	44.23	54.03	63.40	71.52	73.93	80.85	87.49	93.65	97.45	99.66	99.88	100.00

10. 하천시설의 관리에 관한사항 : 구례군청에서 유지관리

11. 폐천부지 등의 발생 예상 면적 : 없음
12. 기타사항 : 기타 자세한 사항은 구례군청 안전건설과

(☎061)780-2457)으로 문의하시기 바랍니다.

13. 수용 또는 사용할 토지에 관한 권리 명세 : 별첨(편입용지조서)