내포신도시 개발사업 월간공정 보고(11월)

《 공공ㆍ기반시설 》                                                 (2016. 11. 23. 현재)

공사명	공 사 개 요				공사비 (억원)	사 업 기 간	진도(%)			사업추진 내 용	시공사
							전월	금월	누계 계획
▣ 신도시사업 전체 공정률						‘07.07 ~ ‘20.12	70.8	2.0	72.8 72.8	·L H : 46.5% ·충개공 : 91.2%
▣ 부지조성		(9,952천㎡)					70.8	2.0	72.8	(7,248천㎡)	면적대비
2-1공구 조성공사(충개공)	․면적 984천㎡				344	’09.05 ~ ’13.11	100	-	100 100	·공사준공	현대 건설
2-2공구 조성공사(충개공)	․면적 889천㎡				424	’10.04 ~ ’13.12	100	-	100 100	(특화2, 근린5호, 병원/복지)	극동 건설
2-3공구 조성공사(충개공)	․면적 1,909천㎡				321	’10.11 ~ ’13.12	79.4	0.4	79.8 100	(보훈공원,단독주택용지, 대학1)	현대 아산
1-1공구 조성공사(LH)	․면적 1,501천㎡				509	’11.08 ~ ’14.10	98.7	-	98.7 100	(특화상업용지1, 초등학교2용지 일대)	코오롱 글로벌
1-3공구 조성공사(LH)	․면적 429천㎡				165	’13. 11 ~ ’16. 7	77.1	-	77.1 100	(단독주택용지 일대)	명지 건설
3-2공구 조성공사(LH)	․면적 1,182천㎡				318	’12. 1 ~ ’15. 7	100	-	100 100	(유보지 2 일대)	동성 건설
1-2,3-1공구 조성공사(LH)	․면적3,058천㎡ (2,328천㎡)				340	-	0.6	1.6	2.2 2.2	가설펜스 설치공사	지평 토건
▣ 조 경			(4,831천㎡)				85.3	1.6	86.9	(4,200천㎡)	면적대비
충개공 조경공사	․2구역 1,062천㎡				349	’12.02 ~ ’17.05	100	-	100 100	·공사준공	승화 건설
보훈공원 조성공사(충공)	․면적 51천㎡				29	’15.10 ~ ’16.11	63.7	17.5	81.2 81.2	·애국광장 잔디 및 교목식재	서진 산업
LH 1단계 조경공사	․면적 75천㎡				78	’12.10 ~ ’15.12	100	-	100 100	·공사준공	유진건설 원광건설
LH 2단계 조경공사	․면적 2,618천㎡				370	‘14.12 ~ ‘15.12	100	-	100 100	·공사준공	대방 건설
홍예공원 조성공사(LH)	․면적 275천㎡				188	‘14.09 ~ ‘15.12	100	-	100 100	·공사준공	구일종합건설
LH 3단계 조경공사	․면적 750천㎡				(410)	-				-
▣ 전 기			(9,638천㎡)				67.3		67.3	(6,486천㎡)	면적대비
충개공 전기공사	․면적 3,783천㎡				127	’12.02 ~ ’15.02	100	-	100 100	·공사준공	삼흥 전력
LH 1단계 전기공사	․면적 400천㎡				28	’12.09 ~ ’14.06	100	-	100 100	·공사준공	금평 전설
LH 2단계 전기공사	․면적 2,303천㎡				90	‘14.08 ~ ’15.12	100	-	100 100	·공사준공	금원 전설
LH 3단계 전기공사	․면적 3,152천㎡				(95)	-				-
▣ 기반시설				(9개 사업)	9,334		34.2	-	34.2	(3,191억원)	금액대비
집단에너지 공급시설	․열부하량 : 전기 97Mw 374.1 Gcal/h				5,819	’11.07 ~ ’23.12		-		·열배관 공사 전체 83.3㎞중 38.65㎞	롯데 건설
U-City 1단계 공사	․면적 400천㎡				20	‘13.01 ~ ‘14.09	100	-	100 100	·공사준공	명성 씨앤에스 외 1개사
U-City 2단계 공사	․면적 2,303천㎡				90	‘15.01 ~ ‘15.12	100	-	100 100	·공사준공	센텍 외 2개사
U-city 3단계 공사	․면적 3,152천㎡				(110)	-				-
하수처리시설 건설공사	․용량 44천톤/일 중 1단계22천톤/일				705	’10.10 ~ ’13.10	100	-	100 100	·유지관리운전 시행	G S 건설
자동집하시설 건설공사	․집하장 2개소 ․이송관로22.1㎞				676	’10.10 ~ ’14.01	100	-	100 100	·유지관리운전 시행	포스코 건설
지 구 외 생태하천(1단계)	․신경천 1.72㎞ ․목리천 0.63㎞				35	’10.12 ~ ’13.12	100	-	100 100	·공사준공	성보 건설
진입도로 (8.43km)	․홍성측 4.33km ․예산측 4.10km				1,459	’11.07 ~ ’15.06	100	-	100 100	·공사준공	동성 건설
제2진입도로	․예산측 3.39km				420	‘15.10 ~ ‘18.12	28	4	32 100	·토공, 구조물공 공사중	하남 외 2개사

《 아파트 등 건축 》

아파트	총 계획	준공(입주)	공사중	착공준비	토지매각	미 정
	36개 단지	8	2	0	6	12

공사명	공 사 개 요	공사비 (억원)	사 업 기 간	사업추진 내 용	시공사
▣ 준 공
롯데 APT	․연면적 143천㎡, ․885세대	1,908	’11.01~’12.12	·사용승인(‘12.12.04)	롯데
극동 APT	․연면적 141천㎡ ․938세대	1,912	’11.11~’13.12	·사용승인(‘14.05.30)	극동건설
LH APT	․연면적 312천㎡ ․2,127세대	3,857	`12.12~`15.12	·사용승인(‘15.08.21)	서희건설
충공임대빌딩	․연면적 8,714㎡ ․지하2~지상10층	147	’12.11~’14.01	·사용승인(‘13.12.30)	명승건설산업
효성 APT	․연면적 137천㎡ ․915세대	1,882	’12.05~’14.09	·사용승인(‘14.09.22)	진흥기업
경남 APT	․연면적 147천㎡ ․990세대	2,163	’13.08~’16.02	·사용승인(`16.1.29)	경남기업
중흥 APT	․연면적 264천㎡ ․1,660세대	3,813	’13.10~’16.04	·사용승인(‘16.04.05)	중흥건설
모아 APT	․연면적 190천㎡ ․1,260세대	3,093	’13.09~’16.04	·사용승인(‘16.04.08)	모아주택산업
상록아파트	․연면적 64천㎡ ․497세대	828	’14.09~’16.09	·사용승인(‘16.07.25)	한백종합건설
내포아르페온 1차(오피스텔)	․연면적 23,061㎡ ․313세대	275	’13.04~’14.06	·사용승인(‘14.07.10)	국제디아이(주)
현대아산빌엔더스(오피스텔)	․연면적 29,998㎡ ․528세대	326	’13.05~’14.08	·사용승인(`14.08.22)	현대아산(주)
내포제나우스 (오피스텔)	․연면적 24,390㎡ ․350호	275	’13.06~’14.10	·사용승인(‘14.10.29)	상리건설

공사명	공 사 개 요	공사비 (억원)	사 업 기 간	진도(%)			사업추진 내 용	시공사
				전월	금월	누계 계획
▣ 공사중
이지 APT (RM7-1)	․연면적 137천㎡ ․892세대	2,369	‘15.11 ~ ‘17.12	22.2	2.6	24.8 24.8	·골조공사	라인건설
이지 APT (RM7-2)	․연면적 123천㎡ ․817세대	1,979	‘15.11 ~ ‘18.04	1.0	-	1.0 14.0	·공사중지	라인건설