내포 도시첨단산업단지

지속가능한 자족도시의 건설을 위해 도시첨단산업단지 지정

내포신도시 인구유입 촉진을 위해 기업유치 추진 중

- 산학협력 및 산업시설 거점 형성

- 주변지역과 균형발전 및 상호보완적 산업단지 조성

□ 사업 개요

❍ 면    적 : 126만㎡(신도시 995만㎡의 12.1%, 산업용지 656,821㎡)

❍ 유치업종 : IT □ BT산업

* 컴퓨터 및 사무용기기, 기타전기기계 및 전기변환장치, 전자부품, 영상음향 및

통신장비, 의료, 정밀, 광학기기 및 시계, 자동차 및 트레일러

□ 추진 상황

❍ ’14. 1 : 산업입지법 개정(신도시 내 도시첨단산단 중복 지정 허용)

❍ ’14. 7 : 산업단지 지정을 위한 용역착수(입주수요조사)

❍ ’14.10 : LH 용지규정 시행세칙 개정(조성원가 이하 공급 가능)

❍ ’14.12 : (현재) 내포신도시 내 6개 기업 투자유치 협약체결

❍ ’14.12 : 2015년 산업단지 지정 공고(내포 도시첨단산단 반영)

❍ ’15. 4 :  도시첨단산업단지 지정 신청, 관계기관 협의(4. 7∼5. 1)

❍ ’15. 4 : 주민의견청취를 위한 공람·공고(4. 17∼5. 8)

❍ ’15. 5 : 전문가 자문 및 경관심의· 수요검증 완료(5. 18∼6. 8)

❍ ’15. 6 : 산업단지계획심의위원회 심의(6. 17)

❍ ’15. 6. 26 : 도시첨단산업단지 지정승인 및 고시, 산업단지계획 승인

❍ ’15. 10. 30 : 관리기본계획 승인

❍ ’16. 2. 29 : 실시설계 완료(설계 VE, 일상감사 등)

❍ ’16. 8. 31 : 단지조성사업 착수(대행개발업체 : 지평토건)

❍ ’17. 5. 1 : 지구 외 사업(진입도로) 실시계획 승인 신청

❍ ’17. 5. 10 ~ : 지구 외 사업(진입도로) 실시계획 승인 신청에 따른 협의 진행 중

❍ ’17. 6. 14 : 지구 외 사업(진입도로) 주민설명회 개최

❍ ’17. 8. 21 : 지구외사업(진입도로) 실시계획 승인

❍ ’18. 2. 28 : 단지조성사업 현재 공정률 49%

□ 향후 추진계획

❍ 산업단지 조성 사업 및 진입도로 사업 완료

❍ 산학협력용지 등 전략적 기업유치 추진

담당부서	투자입지과 산업입지팀	담당자	조유경(☎041-635-3391)

태안 도시 첨단 산업단지 조성

□ 사업개요

◈ 위    치 : 태안군 태안읍 장산리 877번지 일원

◈ 사 업 량 : 도시첨단산업단지 39,220㎡ 조성

◈ 사업기간 : 2011. 11. ~ 2014. 12.

※ 단지조성 후 2015. 12 까지 ㈜엠게임 본사 이전

◈ 사업시행 : ㈜엠게임 <수요자 직접 개발>

□ 추진실적

○ 2010. 08. 17. 태안군 · (주)엠게임 양해 각서 체결

○ 2011. 11. 15. 도시첨단산업단지 계획 승인

○ 2011. 12. 23 ~  사업 착공

○ 2013. 08. 30. 본사 건물 및 공장 건축물 건축 허가 신청

○ 2014. 02. 14. 도시첨단산업단지 계획 변경 승인

○ 2014. 12. 29. 도시첨단산업단지 준공인가 신청

○ 2015. 1월 현재 기숙사 1개동 건축완료, 2개동 건축진행

○ 2015. 2. 15. 도시첨단산업단지 준공

○ 2016. 6.  9. 사무동 및 근린시설 생활동 착공

○ 2017. 3. 17. 근린시설 생활동 준공(998,760㎡)

⇒ 현재 AS부 5명, VR 사업부 5명 상주

□ 문제점 및 대책

○ 없음

담당부서	투자입지과 산업입지팀	담당자	조유경(☎041-635-3391)