【2018-01】

정책실명 공개과제 사업내역서

① 정책사업명	충남공감마루 건립
② 추진배경	각종 센터(중간지원조직) 및 시민사회단체간 협업･교류를 통해 시너지 효과를 창출할 수 있는 통합거점 및 도민 열린공간 조성
③ 사업개요	충남공감마루 건축물 건립 1식 - 부지 5,886㎡, 연면적 2,894㎡(지하 1층, 지상 3층)
④ 사업부서	공동체정책과		⑤ 담당자	행정6급 이건주(3680) 공동체정책과장 유재룡(2270)
⑥ 선정기준	② 시설 및 전기, 통신 등을 포함한 총사업비 50억원 이상의 공사		⑦ 사업기간	2018. ~ 2020.
<그간 주요 추진내용>
내포혁신플랫폼 건립 계획		‘16. 7.31.	도지사 안희정 정무부지사 허승욱 자치행정국장 김돈곤 도민협력새마을과장 조병학 협치기획팀장 신필승 주무관 우석성
내포혁신플랫폼 실무추진단 구성ㆍ운영		‘17. 5.24.	자치행정국장 이윤선 도민협력새마을과장 조병학 협치기획팀장 신필승 주무관 김미옥
내포혁신플랫폼 건립 기본계획 수립 용역		‘17.11.13.	자치행정국장 이윤선 도민협력새마을과장 유병덕 협치기획팀장 신필승 주무관 김보성
내포혁신플랫폼 건립규모 변경 ㆍ사업비 : 70억원 → 80억원 ㆍ연면적 : 1,465㎡ → 1,830㎡		‘18. 2. 8.	행정부지사 남궁영 공동체새마을정책관 김찬배 사회혁신팀장 남성연 주무관 김보성
내포혁신플랫폼 건립공사 건축설계 제안공모		‘18. 4.19.	공동체새마을정책관 김찬배 사회혁신팀장 남성연 주무관 김보성

부지 매입(5,886㎡/ 3,238백만원) - 부지매입(3,238백만원), 설계용역(88백만원) 집행 후 1,071백만원 이월(건축비)	‘18. 6월	행정부지사 남궁영 공동체새마을정책관 김찬배 사회혁신팀장 남성연 주무관 김보성
착수보고 (건립 사업규모 확대, 증액검토 지시) - (연면적) 1,830㎡ → 2,894㎡(지하 1층, 지상 3층) - (사업비) 80억 → 110.9억	‘18. 9. 4.	공동체새마을정책관 김찬배 사회혁신팀장 남성연 주무관 김보성
설계용역 중간보고	‘19. 2. 28.	도지사 양승조 공동체정책관 김찬배 건축도시과장 윤영산 종합건설사업소장 최석봉 사회혁신팀장 최권성 주무관 이건주
명칭 공모, 충남공감마루 선정	‘19. 5. 8.	도지사 양승조 행정부지사 김용찬 문화체육부지사 나소열 공동체정책관 김찬배 사회혁신팀장 최권성 주무관 이건주
기본‧실시설계 용역 완료 및 최종보고회 개최	‘19. 5. 28.	공동체정책관 김찬배 사회혁신팀장 최권성 주무관 이건주
입주기관 선정 완료 - 선정결과 : 16개 기관	‘19. 6. 28.	행정부지사 김용찬 문화체육부지사 나소열 공동체정책관 김찬배 사회혁신팀장 최권성 주무관 이건주
사업변경계획 보고 및 착공 - 사업비 : 110.9억 → 134.9억 (24억 증 : BF인증 등 설계변경, 인테리어·가구) - 사업기간 : 2018.1.~2020.3→ 2018.1.~2020.12.	‘19. 11. 30.	도지사 양승조 행정부지사 김용찬 공동체정책관 구상 사회혁신팀장 최권성 주무관 김영성