정책실명 공개과제 사업관리이력서(완료)

정책실명제 등록번호	2018-37	담당부서 작성자	소방본부 / 소방행정과 (정해근/041-635-5565)
정 책 명	아산소방서 청사 이전 신축
사업개요	○ 추진배경 - 노후 협소한 소방서 청사 이전신축 - 원활한 소방업무 추진 및 근무환경 개선을 통한 만족도 향상 ○ 추진기간 : 2015.01.01. ~ 2018.05.19. ○ 총사업비 : 8,343백만원 ○ 주요내용 - 위 치 : 아산시 모종동 210번지 - 구 조 : 철근 콘크리트조 슬래브즙 지하1층/지상3층 - 규 모 : 부지 6,750㎡ / 연면적 3,641㎡ - 사업방법 : 종합건설사업소 의뢰 설계 및 건축 추진
추진경과 및 사업 관련자	□ 사업관련자 현황 ○ ‘13.11.20. : 공유재산심의회 심의(아산소방서 이전신축) - 관련자 : 충청남도 세정과 주무관 고효열, 과장 김기승 ○ ‘13.12.31. : 아산소방서 이전신축계획 수립(도지사 결재) - 관련자 : 충청남도 소방행정과 주무관 이학민, 팀장 김성찬, 과장 방상천, 본부장, 정문호, 도지사 안희정 ○ ‘14.03.24. : 지방재정 중앙 투자심사(승인) - 관련자 : 충청남도 기획조정실 주무관 우종갑, 팀장 조중연, 담당관 김현표 ○ ‘14.10.13. : 충청남도 공유재산 관리계획 도의회 의결 - 관련자 : 충청남도 세정과 주무관 이정, 팀장 김성관, 과장 김기승 ○ ‘15.06.23. : 아산소방서 이전 신축부지 확보 (충청남도 ↔ 아산시) 교환 - 관련자 : 충청남도 소방행정과 주무관 류진원, 팀장 김성찬, 과장 김근제, 본부장 한상대

추진경과 및 사업 관련자	○ ‘15.08.12. : 아산소방서 이전신축공사 기본 및 실시설계 시행 결의 - 관련자 : 종합건설사업소 주무관 김종현, 팀장 정진호, 과장 조봉환, 소장 남광현 ○ ‘15.10.20. : 아산소방서 이전신축공사 기본 및 실시설계 용역 계약체결 - 관련자 : 충청남도 세무회계과 주무관 김영준, 과장 김기승 ○ ‘16.07.19. : 아산소방서 청사 신축공사 발주계획 수립 - 관련자 : 충청남도 소방행정과 주무관 정해근, 팀장 진종현, 과장 이동우, 본부장 이창섭 ○ ‘16.08.30. : 도시계획시설(공공청사)사업 실시계획 인가 고시 - 관련자 : 충청남도 건설정책과 주무관 박상돈, 팀장 임승만, 과장 강일권 ○ ‘16.11.03. : 아산소방서 신축공사 일상감사 및 계약심사 - 관련자 : 충청남도 감사위원회 주무관 이성두, 팀장 박정순, 과장 엄일섭 ○ ‘16.11.08. : 아산소방서 청사 신축공사 시행 결의 - 관련자 : 종합건설사업소 주무관 김종현, 팀장 정진호, 과장 조봉환, 소장 최재왕 ○ ‘16.12.02. : 아산소방서 청사 신축공사 계약 체결 - 관련자 : 충청남도 세무회계과 주무관 김영준, 팀장 김성관, 과장 김기승, 국장 김돈곤 ○ ‘16.12.06. : 아산소방서 청사 신축공사 착공(착수) - 관련자 : 충청남도 종합건설사업소 주무관 고은영, 팀장 박정완, 과장 차양환, 소장 최재왕 ○ ‘18.05.19. : 청사 준공 - 관련자 : 충청남도 종합건설사업소 시설2과 주무관 전용헌, 팀장 김태영, 과장 오인균 ○ ‘18.06.01. : 아산소방서 청사 이전 및 업무 개시 - 관련자 : 충청남도 아산소방서 주무관 윤여준, 팀장 홍정표, 과장 문재현