【2018-36】

정책실명 공개과제 사업내역서(완료)

① 정책사업명	보령소방서 청사 이전 신축
② 추진배경	ㅇ노후 협소한 소방서 청사 이전신축 ㅇ원활한 소방업무 추진 및 근무환경 개선을 통한 만족도 향상
③ 사업개요	ㅇ위 치 : 보령시 성주산로 72(명천동 715-10) ㅇ구 조 : 철근 콘크리트조 슬래브즙 지상3층 ㅇ규 모 : 부지 9,447㎡ / 연면적 3,573.99㎡ ㅇ총사업비 : 8,450백만원(도비) ㅇ사업방법 : 종합건설사업소 의뢰 설계 및 건축 추진
④ 사업부서	소방행정과		⑤ 담당자	과 장 김경철(5510) 주무관 정해근(5565)
⑥ 선정기준	시설 및 전기, 통신 등을 포함한 총사업비 50억원 이상의 공사		⑦ 사업기간	2016년 ~ 2019년
<그간 주요 추진내용>
○ 공유재산(이전 신축부지) 취득 승인 (등가교환)		‘10.04.19.	세무회계과장 정병희 재산관리팀장 김경환 재산관리팀 주무관 정태수
○ 2014년도 제6회 충청남도 공유 재산심의회 의결		‘14.10.28.	세정과장 김기승 재산관리팀장 김성관 재산관리팀 주무관 이정
○ 보령소방서 도시 관리계획(공공청사) 승인고시		‘14.12.05.	보령시 경제개발국장 이영우 보령시 도시과장 이석구
○ 2015년 제1차 지방재정 중앙 투자 심사 승인		‘15.02.23.	예산담당관 김현표 재정지원팀장 박태진 재정지원팀 주무관 김옥선
○ 보령소방서 이전계획 방침 결정 (도지사 결재)		‘15.02.25.	충청남도지사 안희정 소방본부장 한상대 소방행정과장 김근제 회계장비팀장 김성찬 회계장비팀 주무관 류진원
○ 보령소방서 신축사업 발주 의뢰		‘16.04.05.	소방행정과장 이동우 복합시설팀장 진종현 복합시설팀 주무관 정해근

<그간 주요 추진내용>
○ 보령소방서 청사 신축공사 설계 용역 추진계획 검토 보고	‘16.05.23.	종합건설사업소 시설2과장 조봉환 종합건설사업소 건축팀장 정진호 종합건설사업소 건축팀 주무관 임택균
○ 보령소방서 청사 신축공사 설계 용역 시행결의	‘16.06.14.	종합건설사업소장 최재왕 종합건설사업소 시설2과장 조봉환 종합건설사업소 건축팀장 정진호 종합건설사업소 건축팀 주무관 임택균
○ 보령소방서 건축설계 제안공모 낙찰자 결정 및 계약 체결	‘16.09.21	종합건설사업소장 최재왕 종합건설사업소 서무과장 차양환 종합건설사업소 계약팀장 박정완 종합건설사업소 계약팀 주무관 고은영
○ 보령소방서 청사 신축공사 설계 용역 착수보고회	‘16.10.06.	종합건설사업소 시설2과장 조봉환 종합건설사업소 건축팀장 정진호 종합건설사업소 건축팀 주무관 임택균
○ 보령소방서 청사 신축공사 설계 용역 완료보고회	‘17.05.11.	종합건설사업소장 최재왕 종합건설사업소 시설2과장 조봉환 종합건설사업소 건축팀장 정진호 종합건설사업소 건축팀 주무관 임택균
○ 보령소방서 청사 신축공사 설계 용역 완료	‘17.06.05.	종합건설사업소장 최재왕 종합건설사업소 서무과장 김종흠 종합건설사업소 계약팀장 문윤선 종합건설사업소 계약팀 주무관 김상엽
○ 보령소방서 청사 신축공사 낙찰자 결정 및 전자계약 체결	‘17.10.18.	자치행정국장 이윤선 세무회계과장 류재홍 계약팀장 김성관 계약팀 주무관 한성대
○ 보령소방서 신축공사 착공	‘17.10.24.	종합건설사업소장 윤병환 종합건설사업소 서무과장 김종흠 종합건설사업소 계약팀장 한인영 종합건설사업소 계약팀 주무관 김상엽
○ 보령소방서 청사 준공	‘19.02.25.	종합건설사업소장 최석봉 종합건설사업소 시설2과장 오인균 종합건설사업소 건축팀장 백상엽 종합건설사업소 건축팀 주무관 전용헌
○ 보령소방서 청사 이전 및 업무개시	‘19.04.30.	보령소방서 소방행정과장 김창현 보령소방서 예산장비팀장 강정훈 보령소방서 소방행정과 주무관 김선구