정책실명 공개과제 사업관리이력서(완료)

정책실명제 등록번호	2018-36	담당부서 작성자	소방본부 / 소방행정과 (정해근/041-635-5565)
정 책 명	보령소방서 청사 이전 신축
사업개요	○ 추진배경 - 노후 협소한 소방서 청사 이전신축 - 원활한 소방업무 추진 및 근무환경 개선을 통한 만족도 향상 ○ 추진기간 : 2016년 ~ 2019년 ○ 총사업비 : 8,450백만원(도비) ○ 주요내용 - 위 치 : 보령시 성주산로 72(명천동 715-10) - 구 조 : 철근 콘크리트조 슬래브즙 지상3층 - 규 모 : 부지 9,447㎡ / 연면적 3,573.99㎡ - 사업방법 : 종합건설사업소 의뢰 설계 및 건축 추진
추진경과 및 사업 관련자	□ 사업관련자 현황 ○ ‘14.10.28. : 공유재산심의회 심의(보령소방서 이전신축) - 관련자 : 충청남도 세정과 주무관 이정, 재산관리팀장 김성관, 세정과장 김기승 ○ ‘15.02.23. : 지방재정 중앙 투자심사 승인 - 관련자 : 충청남도 예산담당관실 주무관 김옥선, 재정지원팀장 박태진, 예산담당관 김현표 ○ ‘15.02.25. : 보령소방서 이전신축 기본계획 수립(도시사 결재) - 관련자 : 충청남도 소방행정과 회계장비팀 주무관 류진원, 회계장비팀장 김성찬, 소방행정과장 김근제, 소방본부장 한상대, 도지사 안희정 ○ ‘16.04.05. : 보령소방서 신축사업 발주의뢰 - 관련자 : 충청남도 소방행정과 복합시설팀 주무관 정해근, 복합시설팀장 진종현, 소방행정과장 이동우 ○ ‘16.05.23. : 보령소방서 이전신축 기본 및 실시설계 시행 결의 - 관련자 : 종합건설사업소 시설2과 주무관 임택균, 건축팀장 정진호, 시설2과장 조봉환, 종합건설사업소장 최재왕

추진경과 및 사업 관련자	○ ‘16.09.21. : 보령소방서 이전신축 기본 및 실시설계 용역 낙찰자 결정 및 계약체결 - 관련자 : 충청남도 종합건설사업소 계약팀 주무관 고은영, 계약팀장 박정완, 서무과장 차양환, 소장 최재왕 ○ ‘16.10.06. : 보령소방서 청사 신축공사 설계용역 착수보고회 - 관련자 : 충청남도 종합건설사업소 건축팀 주무관 임택균 건축팀장 정진호, 시설2과장 조봉환, 종합건설사업소장 최재왕 ○ ‘17.05.11. : 보령소방서 청사 신축공사 설계용역 완료보고회 - 관련자 : 충청남도 종합건설사업소 건축팀 주무관 임택균, 건축팀장 정진호, 시설2과장 조봉환, 소장 최재왕 ○ ‘17.06.05. : 보령소방서 청사 신축공사 설계용역 준공 - 관련자 : 충청남도 종합건설사업소 건축팀 주무관 임택균, 건축팀장 정진호, 시설2과장 조봉환, 종합건설사업소장 최재왕 ○ ‘17.06.05. : 보령소방서 청사 신축공사 낙찰자 결정 및 계약 체결 - 관련자 : 충청남도 세무회계과 계약팀 주무관 한성대, 계약팀장 김성관, 세무회계과장 류재홍, 자치행정국장 이윤선 ○ ‘17.10.18. : 보령소방서 신축공사 계약 체결 - 관련자 : 충청남도 세무회계과 계약팀 주무관 한성대, 계약팀장 김성관, 세무회계과장 류재홍, 자치행정국장 이윤선 ○ ‘17.10.24. : 보령소방서 신축공사 착공(착수) - 관련자 : 충청남도 종합건설사업소 계약팀 주무관 김상엽, 계약팀장 한인영, 서무과장 김종홍, 소장 윤병환 ○ ‘19.02.25. : 보령소방서 청사 준공 - 관련자 : 충청남도 종합건설사업소 건축팀 주무관 전용헌, 건축팀장 백상엽, 과장 오인균, 소장 최석봉 ○ ‘19.04.30. : 보령소방서 청사 이전 및 업무 개시 - 관련자 : 충청남도 보령소방서 소방행정과 주무관 김선구, 예산장비팀장 강정훈, 소방행정과장 김창현