부여군 고시 제2022-57호

남성천 지방하천 정비사업 시행계획 고시

남성천 지방하천 정비사업에 대하여 하천법 제27조 제3항 및 같은법 시행령 제26조의 규정에 의거 하천공사 시행계획을 다음과 같이 고시합니다.

2022년 5월  25일

부 여 군 수

1. 공 사 명: 남성천 지방하천 정비사업

2. 위    치: 부여군 임천면 칠산리 1000번지 일원(남성천)

3. 목    적

○ 본 과업은 하천기본계획을 토대로 남성천 지방하천 정비를 위한 공사를 시행하여 집중호우 및 우기시 원활한 유수의 흐름을 유도하여 하천 유역의 영농편익과 농지 및 지역주민의 생명과 재산을 보호하고자 하는데 그 목적이 있음.

4. 사업개요: 하천정비(축제 및 호안) L=0.15km(양안)

○축 제 공: 흙깍기 3,407㎥, 흙쌓기 2,389㎥

○호 안 공: 게비온매트리스 2,786㎡

○구조물공: 배수통관 2개소

○포 장 공: 콘크리트포장 993㎡

○부 대 공 : 1식

5. 시 행 자: 부여군수 (부여군 부여읍 사비로 33번길)

6. 하천공사의 착수 및 준공예정일: 2022. 5. ~ 2023. 5.

7. 사 업 비: 600백만원

8. 위 치 도

9. 예정공정표

월별 공종별	비율 (%)	공 사 기 간												비고
		1개월	2개월	3개월	4개월	5개월	6개월	7개월	8개월	9개월	10개월	11개월	12개월
1.토 공	41.14
2.호안공	13.02
3.구조물공	1.84
4.포장공	7.76
5.부대공	15.54
6.관급자재대	20.70
누계	100	1.02	10.98	21.09	31.39	36.54	41.69	52.32	63.15	73.97	84.48	94.98	100.00

10. 사업비 및 자금조달 계획서

(금액 : 백만원)

사 업 명	계	2022년	2023년	비 고
남성천 지방하천 정비사업	600	600

11. 수용하거나 사용할 편입용지(세부내역 별첨)

구 분	필지수	편입면적(㎡)	비 고
국공유지	6필지	3,983
사 유 지	4필지	3,045
합 계	10필지	7,028

12. 관계도서 열람 및 문의사항: 부여군 건설과 하천관리팀(☎041-830-2362)

※ 열람서류 : “편입용지조서”, “편입용지도”, “사업계획서”