<1-2-2>	그린수소 생산 수전해 부품개발 지원 플랫폼 구축

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 24. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타
	○

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
추진계획	그린수소 생산 수전해 부품개발 지원 플랫폼 구축		건축물 설계,, 장비선정 및 검토	착공, 장비구축/시범운영 및 기업지원	평가, 분석, 신뢰성 장비 구축 및 서비스 지원 체계 구축완료	자립화 운영 추진
추진실적			협약체결 및 부지매입, 건축설계 완료	․공사착공 (5월), 장비구축, 기술지도	장비 구축

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	4,798	1,820	280	2,670	0	0	28
	집행	4,798	1,820	280	2,670	0	0	28
23년	확보	5,638	2,160	830	2,620	0	0	28
	집행	5,638	2,160	830	2,620	0	0	28
24년	확보	2,278	1,600	290	360	0	0	28
	집행	0	0	0	0	0	0	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022 ~ 2024(3개년)

○ 사 업 비 : 13,114백만원(국비 5,980, 도비 1,400, 시군비 5,650, 기타 84)

○ 사업내용 : 센터건축(825㎡), 신규장비 11종 12대·개선장비 2종 2대· 장비 유틸리티 5종 구축, 기업 기술지원, 전문인력 양성 등

○ 수혜대상 : 도내 수소기업 및 연관기업

□ 주요 추진실적(성과)

○ KIAT와 사업협약 체결 및 부지 매입('22. 6.)

○ 센터 건축비 6억원 증액('22. 8.)

○ 센터 건축설계 완료('22. 12.)

○ 기술지원 42건 및 인력양성 8명 완료('22. 12.)

○ 센터 구축 관련 출연금 8.3억원 지급('23. 3.)

○ 건축·소방·전기 감리 업체 조달공고 및 업체선정('23. 2. / '23. 4.)

○ 공사착공('23. 5.)

○ 수전해 장비구축 추진

- 1차년도 장비 구매 원가 산출('22. 12.) 및 조달청 구매 계약('23. 6.)

- 2차년도 장비 세부 규격검토 및 자체장비도입심의위원회 개최('23. 3.)

- 3차년도 중앙장비도입 심의 평가('23. 5.) 및 도입승인('23. 6.)

○ 수전해 관련 시험평가 및 컨설팅 추진(23. 12.)

- 수전해 장비 4종 5대 구축

- 기술지도 10건 및 시제품 제작지원 1건 완료

- 전문인력 양성 4건(22명) 완료 등

○ 수전해 관련 시험평가 및 컨설팅 추진(23. 12.)

○ 2차년도 장비 4종 5대 장비 조달 추진(24. 2.)

□ 향후 추진계획

○ 플랫폼 구축사업 준공('24. 5.중)

○ 3차년도 수전해 장비(3종 3대) 센터 입고 및 설치('24. 7.말)

○ 센터 준공식 개최('24. 10.중)

○ 장비도입 및 지원사업, 인력양성사업 추진(~'24. 12.)

탄소중립경제과  수소에너지팀   팀장 여동구   담당자 서기원 (☎3469)