<1-3-18>	다목적 보령신항 조기 완공

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 24. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타
	○

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
추진계획	준설토 투기장	공사 착공	지반 개량	지반개량, 호안조성	호안조성	호안조성, 준공		2, 3단계 계획추진
추진실적			지반개량 (23%)	지반개량, 호안조성 (공정률 48%)	공정률 54%
추진계획	관리부두	공사 착공	준설, 매립	준설, 방파제축조	방파제축조	부대시설,준공		2, 3단계 계획추진
추진실적			준설, 매립 (33%)	준설, 방파제 축조 (공정률 61%)	공정률 62%

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	17,606	0	17,606	0	0	0	0
	집행	17,606	0	17,606	0	0	0	0
23년	확보	23,000	0	23,000	0	0	0	0
	집행	22,423	0	22423	0	0	0	0
24년	확보	34,000	0	34,000	0	0	0	0
	집행	7,249	0	7,249	0	0	0	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2017 ~ 2025년

○ 사 업 비 : 104,118백만원(국 14,038, 도 90,080)

○ 사업내용 : 미래 물동량 대비 항만예정부지 및 관리부두 확보

- 준설토투기장 : 배후부지 419천㎡(호안 2,552m)

- 관리부두 : 안벽 250m, 방파제 610m

○ 수혜대상 : 보령항, 국민

○ 중장기계획 반영 여부 : 제2차 신항만건설 기본계획

□ 주요 추진실적(성과)

○ (준설토투기장) ‘21. 5 : 전체분 공사 착공 / 전체 공정율 : 54%

- 지반개량(연약지반처리) 58,373m 완료

- 5차분(‘24.1~‘25.1) 호안 조성 추진중

○ (관리부두) ‘21. 3 : 전체분 공사 착공 / 전체 공정율 : 62%

- 기초준설 35,251㎥ 및 박지준설 174,783㎥ 완료

- 5차분(‘24.2~‘25.12) 방파제 조성 추진중

□ 추진상 문제점 및 대책

○ 단계별 추진계획 중 2, 3단계 사업 추진 지난

- 현재 신항만건설 1단계인 부지조성 및 관리부두 사업을 추진하고 있으나, 항만개발은 물동량 부족 등의 사유로 기본계획 반영 지난

○ 기존 물동량 개념 탈피

- 탄소중립항만, 해양레저산업 특화단지 등 전략적 추진방안을 수립하여 기본계획 반영 노력

□ 향후 추진계획

○ ’25. : 준설토투기장 및 관리부두 축조공사 준공

○ ’26. : 준설토투기장 매립 완료

○ ’26. : 제4차 국가 항만기본계획 보령신항 개발계획 반영

해운항만과   항만개발팀   팀장 가두순   담당자 이양구 (☎4823)