<1-3-4>	GTX-C 천안·아산 연장

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 24. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타
		○

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
추진계획	GTX-C 천안아산 연장	-	사전타당성조사 용역 착수	사전타당성조사 시행	광역철도 지정 및 민간사업 시행자 협상	민간사업 시행자 협약	사업시행	사업완료
추진실적		-	사전타당성조사 용역 착수(12월)	사전타당성 조사 완료	상생협약 (국토부-충남-경기)

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	300	0	300	0	0	0	0
	집행	150	0	150	0	0	0	0
23년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
24년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2023 ~ 2030년

○ 사 업 비 : 4,385,700백만원 (민자 4,385,700)  ※ GTX-C 노선 기본계획

- 천안·아산 연장 사업비 116,000백만원 추가 소요

○ 사업내용 : 74.8㎞ (기본계획, 덕정~수원), 차량기지 1개소,

- 천안·아산 연장 41㎞

○ 중장기계획 반영 여부 : 제3차 국가철도망 구축계획(2016.~2025.) 반영

- 수도권광역급행철도 의정부~금정(신설 노선구간) 표기

□ 주요 추진실적(성과)

○ ’22.  6. : ‘GTX 확충 통합기획 연구용역’ 착수(국토부)

○ ’22. 10. : 국토부, 국회 방문 국가계획 반영 및 조기 추진 건의(건설교통국장)

○ ’22. 11. : 광역철도 지정 및 사업 조기 추진 건의(도지사→국토부장관)

○ ’22. 12. 14. : 道 사전타당성조사 용역 착수(~‘23.12.)

○ ’23.  1.  5. : 광역철도 지정 및 사업 조기 추진 건의(국토부-충청권 협력회의)

○ ’23.  1. : 사전타당성조사 착수 보고(추진 방향 및 기술·정책적 여건 등 자문)

○ ’23.  2. : 충남도 주요 현안 철도사업 추진 건의(국토부)

○ ’23.  4. : GTX-C 천안·아산 연장 사전타당성조사 전문가 자문 실시

○ ’23.  5. : 국토부 GTX-C 연장사업 ‘지자체 원인자 부담’ 제시

- 신속한 사업추진 목적, 참여 희망 지자체간 협의체 운영하여 절차 등 논의(`23.6.~`24.6.)

※ (지자체 의견) 천안시-원인자 부담 수용 / 아산시-원인자 부담 유보적, 지자체 협의체는 참여

○ ’23.  7. ~ 8. : 민자사업 컨소시엄 구성 관련 관계기관 협의(경기도, OO건설)

○ ’23. 10. : GTX-C 연장 6개 지자체 원인자 부담 추진 검토 건의(국토부)

○ ’23. 12. : 道 사전타당성조사 완료

○ ’23. 12. : 국토교통부 장관 아산시(온양온천역) 방문, 사업 추진 건의(아산시장)

○ ’24.  1. : GTX-C 연장 사업 타당성 검증용역 착수(,~‘24.7,철도공단)

○ ’24.  2. : GTX-C 연장 상생협력 협약 체결(국토부, 충남도, 경기도, 6개 지자체)

□ 추진상 문제점 및 대책

○ GTX-C 온양온천역(신창역 회차)까지 연장 필요(민선 8기 공약)

- 국토부 온양온천역 연장 동의, C 연장 사업 타당성 검증용역 시 검토

○ 지자체 원인자 부담 방식으로 사업추진 시, 과중한 재원 부담 우려

- 국토부, 지자체와 재원조달 방안 논의(건설보조금, 개발부담금 등)

※ 자체 사타 결과 추정된 사업비는 4,359억 원(경기 2,1121 천안 1,337, 아산 901)

□ 향후 추진계획

○ GTX-C 연장 사업 방식(재정사업, 원인자 부담) 병행 검토 추진

- (재정사업) 5차망계획(`26~`35) 신규사업 반영 노력(`24.~`25.)

- (원인자 부담) C 연장 타당성 검증 및 원인자 부담 논의(6개 지자체, ~‘24.7)

도로철도항공과   철도물류팀   팀장 황선은   담당자 조민희 (☎2835)