<2-5-10>	베이밸리 메가시티 건설(수소에너지 융복합 산업벨트 조성)

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 24. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타
		○

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
추진계획	수소특화단지 지정		산업부 협의	공모 추진	지정계획 수립	단지 지정
추진실적			산업부 협의	산업부 협의
추진계획	수소기업 육성		수소기업 지원사업 추진
추진실적			12개 수소 기업 지원	10개 예비 수소기업 지원
추진계획	수소발전소 구축		수소발전소 인허가 지원	수소발전소 구축
추진실적			수소발전소 인허가 지원	석문그린 에너지 준공
추진계획	폐플라스틱 수소생산기지 구축		인허가 추진	생산시설 설계	착공	공사 추진	준공
추진실적			실시설계 추진	경영상황 변경으로 투자 지연
추진계획	수소도시 조성		예산편성	마스터플랜 수립	공사착공	공사추진	사업준공
추진실적			예산편성 완료	마스터플랜 수립 완료(12월)

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	5,618	2,320	600	2,670	28	0	0
	집행	5,618	2,320	600	2,670	28	0	0
23년	확보	158,458	3,660	1,450	3,320	150,028	0	0
	집행	58,430	3,660	1,450	3,320	50,000	0	0
24년	확보	30,000	10,000	3,000	7,000	10,000	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2023 ~ 2030년

○ 사 업 비 : 700,000백만원(국비 20,000, 도비 6,000, 시군비 14,000, 민자 660,000)

○ 사업내용 : 수소에너지 융복합산업벨트 조성

- 수소특화단지 지정 추진(당진, 서산)

- 수소용품 제조 수소기업 육성 및 산업벨트화추진(천안, 아산)

- 산업단지 청정에너지 공급을 위한 단지 내 수소발전소 구축

- 재활용 플라스틱 수소생산시설 구축 및 당진 수소도시 조성

□ 주요 추진실적(성과)

○ ΄23년 예비수소전문기업 선정(΄23.3.~΄23.12.)

○ 재활용 플라스틱 활용 수소생산시설 세부 착공 검토(~23.5.)

○ 한화-서부발전 수소혼소(60%) 실증 성공(΄23.6.)

○ 당진 석문그린에너지 연료전지 발전소(19.8㎿)준공(΄23.11.)

○ 당진 수소도시 조성사업 마스터플랜 수립 완료(΄23.12.)

○ 당진 수소도시 조성사업 기본 및 실시설계 추진(΄24.3.)

□ 추진상 문제점 및 대책

○ 산업부 수소특화단지 지정 요건 변경으로 지정신청 지연

- 법령 개정 완료시 도내 시‧군과 협의를 통해 지정 요건 충족시 지정 신청 예정

○ 수소연료전지 발전소 추진을 위한 환경변화*로 추진 지연

- 수소발전 입찰시장에 낙찰이 된후 사업 추진 가능

*연료전지 사업: 기존(RPS:신재생에너지 공급 의무화제도), 변경(CHPS:수소발전 입찰시장)

□ 향후 추진계획

○ 당진 수소특화단지 지정 신청(~΄24.下.) / 법령 개정시

○ 충남도내 수소연료전지 보급을 위해 정부 수소입찰시장 개선 노력

- 산업부 및 전력거래소에 수소입찰 평가방식 개정 지속 건의

○ 당진 수소도시 조성사업 추진(~΄26.12.)

○ 민자 수소연료전지발전소 1개소 상업운전 개시(~΄26.12.)

○ 재활용 플라스틱 수소생산시설 준공 및 상업운전 개시(~΄25.12.)

탄소중립경제과 수소에너지팀 팀장 정도영 담당자 정광수‧서기원 (☎3468~9)