<2-5-11>	한국 해양바이오 클러스터 조성

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 24. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타
	○

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
추진계획	해양바이오 클러스터 조성		산업화지원센터 착공	산업화지원센터 운영 방안 마련	2개소 (산업화지원센터, 지식 산업센터)	1개소 (해양수산 캠퍼스)	3개소 (인증지원 센터, 수장연구동, 소재대량생산 플랜트)
추진실적			산업화지원센터 착공	운영방안 연구용역 최종보고회(12월)	산업화 지원센터 공정률 40%, 지식산업센터 공정률 8%

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	13,632	4,316	3,795	5,521	0	0	0
	집행	13,632	4,316	3,795	5,521	0	0	0
23년	확보	11,980	10,007	105	1,868	0	0	0
	집행	11,980	10,007	105	1,868	0	0	0
24년	확보	24,228	13,062	1,438	9,728	0	0	0
	집행	19,999	11,272	1,006	7,721	0	0	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2020 ~ 2026년

○ 사 업 비 : 190,292백만원(국 144,060, 도 8,953, 군 37,279)

○ 사업내용 : 해양바이오 시장 선점을 위한 해양바이오산업 육성 기반 조성

➀ (컨트롤타워) 해수부 산하, 해양바이오 산업진흥원＊ 건립(’25~)

➁  (소재연구) 산업화 유용소재확보 및 연구개발(해양바이오뱅크(’20~), 수장연구동(’25~)

➂  (산 업 화) 해양바이오 산업화 원스톱 지원체계 마련

- 기업육성산업화지원센터(’22~) → 기업지원지식산업센터(’23) → 사업화인증지원센터(’24~), 소재대량생산플랜트(’25~)

➃  (인재양성) 현장·전문 인력양성(폴리텍 해양수산캠퍼스(’23~)

○ 중장기계획 반영 여부 : 제3차 해양수산발전기본계획(2021-2030)                             충청남도 해양수산발전계획(2015~2030)

□ 주요 추진실적(성과)

○ 바이오특화 지식산업센터 건립 설계용역(’22.6.)

○ 해양바이오 산업화 지원센터 착공(’22.8.)

○ 폴리텍대학 해양수산캠퍼스 건립 설계용역(’22.10.)

○ 해양바이오 인증지원센터 건립 기획용역 착수(’23.8.)

○ 바이오특화 지식산업센터 착공(’23.10.)

○ 해양바이오 소재 대량생산 플랜트 타당성 조사 용역(’24.2.)

□ 향후 추진계획

○ 해양바이오 인프라 정상 구축 및 집적화로 기업유치 기반 조성

- 산업화지원센터, 지식산업센터, 인증지원센터, 소재대량생산플랜트

○ 해양바이오 인프라 추가 확충을 위한 국비 확보 총력

- 소재대량생산플랜트, 수장연구동

해양정책과   해양산업팀   팀장 가순신   담당자 임선환 (☎4765)