<2-5-12>	백제문화 복합단지 및 백제문화 체험마을 조성

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 24. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타
		○

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
추진계획	백제문화 복합단지 등 조성		기본구상 수립		국비 확보 및 공공부분 사업 추진, 민간 자본 유치
추진실적			기본구상 수립 추진	기본구상 수립완료 (12월)	’25년 정부예산 확보건의
추진계획	백제고도 지역한옥 건립 확대		한옥건립 지원 확대 방안 협의	증액 예산 확보	한옥건립비 확대 지원
추진실적			협의 완료	증액 예산 확보를 위한 한옥 관련 분야별 전문 자문단 구성	기본계획 용역추진

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	3,615	2,320	598	697	0	0	0
	집행	3,615	2,320	598	697	0	0	0
23년	확보	2,539	1,777	229	533	0	0	0
	집행	2,539	1,777	229	533	0	0	0
24년	확보	20,334	2,092	9,250	8,992	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022 ~ 2030년

○ 사 업 비 : 8,800억원(국 3,435, 도 1,422, 시군 1,443, 민자 2,500)

○ 사업내용

- 백제고도(공주, 부여) 지역 한옥 건립 확대

- 백제문화권 체험-휴양-생태 특화 관광권역 조성

○ 중장기계획 반영 여부 : 백제문화 관광거점 조성 타당성조사 및 기본계획(‘24.~’30.)

□ 주요 추진실적(성과)

<백제문화 복합단지>

○ 2022년  6월 : 민선 8기 공약사업(백제문화 복합단지 및 백제문화 체험마을 조성) 추진 방안 검토

○ 2022년  7월 : 사업 계획 수립(기본구상 수립 대행사업 추진 결정)

○ 2022년  9월 : 기본구상 대상사업비(3억원) 추경 확보

○ 2022년 10월 : 대행사업에 앞서 충남연구원 자체 과제 추진

○ 2022년 11월 : 기본구상 대행사업 착수

○ 2022년 12월 : 1차 사업 아이템 발굴 회의 및 충남연구원 자체 과제 완료

○ 2023년  1월 : 문화유산과, 공주, 부여, 충남연 회의

○ 2023년  3월 : 선도사업 3개 국비 반영 문체부 및 지역 국회의원 등 건의

○ 2023년  4월 : 기본구상(안)에 대한 전문가 자문회의 개최

- 다 부처 국비 확보할 수 있는 사업별 발굴 필요 등

○ 2023년  5월 : 국비 확보 활동 전개(문체부장관/도지사, 문체부 기조실장/정무부지사)

○ 2023년  6월 : 관광객 시내권 유입을 위한 연계사업 등 추가 검토

○ 2023년  9월 : 기본구상 수립 중간보고회

○ 2023년 12월 : 기본구상 수립 완료

※ 기본구상 : 총 38개 사업 7,613억원(국 1,862, 지 2,401, 민자 3,350)

○ 2024년 2월 : 제2단계 제2기 균형발전사업 수요조사 제출(→도 균형발전정책과)

- 백제문화 복합단지 및 체험마을 조성(공주, 부여, 청양) / 사업비 1,000억원

○ 2024년 2월~3월 : 균형발전사업 대응 실무회의 추진(2회)

- 도·시군 담당팀장 및 담당자, 충남연구원, 용역사

○ 2024년 2월~3월 : ‘25년 정부예산 확보 건의(문체부, 국토부)

- 서부내륙권 광역관광개발 및 관광진흥사업, 금강 국가관광도로, 죽당리 대지예술공원 조성

<백제고도 한옥건립 확대>

○ 2022년 12월 : 보조금 지원 상한액 확대 및 지원율 개선을 위한 문화재청 협의

○ 2023년  3월 : 백제고도 한옥건립확대 추진계획 수립

○ 2023년  5월 : 백제고도 한옥건립 확대 및 활성화 방안 문화재청 차장 방문협의 및 한옥 관련 전문가(5인) 자문단 구성

○ 2023년  6월~9월

- 한옥거주자 대상 만족도 및 개선방안 설문 조사 추진

○ 2023년 6월~12월 : 백제고도 한옥건립 확대 및 정체성 회복을 위한 전문가 컨설팅 추진

- 1단계 : 2024~2025 (공공부문 한옥형건축물 우선건립)

- 2단계 : 2026~ 2033(민간부문 확대를 통한 한옥 활성화 도모)

○ 2023년 11월 ~ 2024. 1월 : 백제고도 한옥경관 조성 기본계획 용역 추진

○ 2023년 3월 : 백제고도 한옥마을 조성 추진계획 보고(도지사)

□ 추진상 문제점 및 대책

<백제문화 복합단지>

○ 국비 및 민자 유치의 어려움

- 중앙부처 공모사업 적극 신청 및 민자 사업 협의 등 지속 노력

<백제고도 한옥건립 확대>

○ 한옥건립 민간지원금 확대 지원율 개선은 시․군 조례 개정 필요

○ 한옥건립사업비 도․시군 지방비 분담율 조정 및 지원액 확대 등에 따라 예산 대폭 증액 예상

□ 향후 추진계획

<백제문화 복합단지>

○ ‘24년 7개 사업 추진 : 실시설계2, 공사착수2, 공사중2, 관광코스 개발1

□ (공주) 백제문화 스타케이션조성사업(총 84억원), 백제문화이음길(총 35.8억원)

대지예술공원 조성사업(총 6억원)

□ (부여) 서동요역사관광지 활성화사업(총 30억원)

□ (청양) 칠갑호 수상관광조성사업(총 20억원), 칠갑호 물빛별빛 조성사업(총 4억원)

□ (연계) 서부내륙권 관광진흥사업(총 39억원)-관광코스 개발

○ 제2단계 제2기 균형발전사업 도 제안 공모사업* 선정(’24.7.) 노력

* 백제문화 복합단지 및 체험마을 조성(공주, 부여, 청양) / 사업비 1,000억원

<백제고도 한옥건립확대>

○ 백제고도 공공한옥 및 한옥마을 조성 타당성 용역추진(’24. 4. ~ ’24. 6.)

○ 백제한옥 건축양식 표준모델 개발연구 용역추진(’24. 4. ~ ’24. 12.)

관광진흥과	관광개발팀	팀장 이연수	담당자 고동환 (☎3888)
문화유산과	문화유산전략팀	팀장 이정호	담당자 이강복 (☎3919)