<2-5-13>	자연치유센터 유치

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 24. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타
		○

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
추진계획	자연치유 센터유치		예정지 사전조사	기본구상 계획 용역	착공	준공	운영
추진실적			현장조사, 청양군 업무협의	기본계획 용역 추진

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
24년	확보	600	0	300	300	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2023 ~ 2025년('23년) 기본계획수립 등 1년, '24~'25년)조성 2년)

○ 사 업 비 : 5,000백만원(도비 2,500, 군비 2,500)

- 기본설계비(청양군), 실시설계 및 공사비 : 5,000백만원

○ 사업내용 : 자연치유센터 건립 등

- 산림 및 푸드체험관, 체험시설 및 건강 측정실 등

- 명상, 아로마테라피, 요가 등 치유시설 등

□ 주요 추진실적(성과)

○ (’23.3.3.) 우산공원(청양읍 백천리)으로 대상지 결정 회신(청양군)

- 사업비 50억 → 100억, 도비 비율 50 → 60% 증액 건의

○ (’23.5.18.) 기본설계 용역 발주(청양군)

- 우산 어린이 테마공원 조성 등에 포함, 8천만원, 디오랩(서울 소재)

○ (’23.7.17.) 착수보고회(청양군) - 부군수, 자문위원, 용역사 등

- 지방정원조성, 관광객 킬러아이템 필요, 120억 투자효과성 등 제언

○ (’23.9.21.) 최종보고회(청양군) - 부군수, 자문위원, 용역사 등

- 우산공원 테마공원 내 포함되어 자연치유센터 기본계획 보강 필요

※ 자체 예산(청양군)으로 세부 기본계획 용역 별도 추진

○ (’23.9.) 24년 예산 반영 – 6억원(도비 3, 군비 3)

※ 총25억원 요청하였으나 이월이 예상되어 본예산에 실시설계비만 반영

(필요시 추경에 사업비 요청–도 예산담당관실)

○ (’23.12.) ’24년 예산 확정 – 6억원(도비3, 군비3)  * 특별조정교부금 별도지원 계획

○ (’24. 2.) 자연치유센터 건립 기본계획 수립 용역 완료

○ (’24. 3.) 자연치유센터 건립 건축 기획 용역 추진

□ 향후 추진계획

○ 자연치유센터 조성을 위한 실시설계 등(행정절차 이행)

○ 조성 후 고추문화마을, 고운식물원 등과 연계하여 자연치유센터 활성화

산림자원과   산림복지팀   팀장 송재길   담당자 김기연 (☎4511)