<2-5-2>	천안(종축장 등) 부지 대규모 최첨단 국가산단 조성

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 24. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타
		○

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
추진계획	천안 종축장 부지 대규모 최첨단 국가산단 조성	사업계획 수립용역 착수	자문회의 및 관계기관 협의 등	사업계획 수립	연구용역 추진	산업단지 계획 수립·신청	산업단지 계획 승인	국가산단 조성완료
추진실적			관계기관 협의 및 후보지 현장 실사(11.6.)	계획 수립 및 용역발주 (7월)	예비타당성 조사 신청 준비

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
24년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 행정절차 및 연계용역 등 완료 후 사업기간 확정 예정

○ 사 업 비 : 추후확정(행정절차 및 연계용역 등 완료 후 사업비 확정 예정)

○ 위    치 : 천안시 서북구 성환읍 신방리 일원, 경기도 평택시 팽성읍 노와리 일원

○ 사업내용

구 분	합 계	거점산단 (종축장부지)	협력산단	일반산단 (북부BIT)	배후주거지 (성환,매주지구)	비고
개발(예정)면적	232만평	127만평	55만평	27만평	23만평

□ 주요 추진실적(성과)

○ '22. 10. 21. : 국가산업단지 후보지 제안서 제출(국토부)

○ '22. 11. 16. : 국가산업단지 후보지 현장실사

○ '23. 03. 15. : 국가산업단지 후보지 최종 선정(국토부)

○ '23. 05. 01. : 사업 시행자 예비 선정(국토부 / 사업 시행자 : LH)

○  ‘23. 07.     : 사업 타당성조사 용역 발주(LH)

○  ‘23. 12.     : 상생협약 체결

□ 향후 추진계획

○ ‘24. 상반기 : 예·타 신청(LH → 기재부)

○ ‘25. 하반기 : 예비타당성 조사 완료(기재부)

○ ‘26. 상반기 : 공사 착공

산업입지과   입지정책팀   팀장 박선욱   담당자 박재순 (☎3446)