<2-5-5>	천안역세권 개발

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 24. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타
		○

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
추진계획	역세권 도새재생	어울림 센터 준공	어울림센터 개관	지구대 등 설립추진	복합환승센터 등 준공	공사추진	주상복합 등 준공
추진실적			어울림센터 개관(8월)	지장물 철거협의 (6월)	지구대 착공
추진계획	역전지구 도시개발			투자심사	보상 추진	공사 추진	공사추진	사업완료 (’28)
추진실적				투자심사 (3~5월)	중투심 보완조치

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	49,693	9,755	3,279	10,759	0	0	25,900
	집행	49,693	9,755	3,279	10,759	0	0	25,900
23년	확보	36,336	2,914	4,582	8,840	0	0	20,000
	집행	36,336	2,914	4,582	8,840	0	0	20,000
24년	확보	52,115	2,431	2,786	5,598	0	0	41,000
	집행	9,002	920	2,184	5,898	0	0	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2018 ~ 2028년

○ 사 업 비 : 1,291,110백만원(국비 65,700, 도비 18,824, 시군비 42,086, 민자 970,750, 기타 193,750)

○ 사업내용 : 천안 역세권 일대 도시재생사업 등을 통한 원도심 활성화

- (역세권 도시재생) 도시재생어울림센터, 복합캠퍼스타운, 공영주차장, 복합환승 센터, 그린스타트업 타운, 상업‧업무 복합센터 등

- (역전지구 도시개발) 주상복합아파트, 광장 및 지하주차장 A=47,459㎡

○ 수혜대상 : 천안역 주변 원도심 주변지역

□ 주요 추진실적(성과)

○ 국토부 공모사업선정 : 중심시가지형(’17. 12.), 혁신지구(’21. 12.)

○ 혁신지구 시공사 선정(’21.12.) 및 시행계획 인가(’22.1.)

○ 도시재생어울림센터 준공(’21.6월) 및 개관식(’22.8.17.)

○ 도시재생 혁신지구 착공식(’22.11.15.)

○ 역전지구 도시개발 투자심사 의뢰(’23.3.)

○ 역전지구 도시개발 투자심사 결과(’23.5.)

○ 도시재생 혁신지구 지장물철거 협의 완료(’23.6.)

○ 도시재생 혁신지구 건축 인·허가(변경) 완료(’23.11.)

○ 도시재생 혁신지구 지구대 착공(’24.3.)

□ 추진상 문제점 및 대책

○ (문제점) 역전지구 중앙투자심사 결과 ‘반려’(‘23.11.)

○ (대책) 중앙투자 심사결과 보완조치 이행중(협약서 관련 국토부   협의), ’24년 상반기 협약체결 후 재상정 예정

□ 향후 추진계획

○ '24. 4. : 역전지구 도시개발 민간사업자 재공모

○ '24. 9. : 역세권 도시재생(혁신지구) 지구대 준공 및 기존 지구대 철거

○ '24. 11. : 역전지구 도시개발 투자심사 재상정

○ `25. 3. : 역전지구 도시개발 SPC 법인 설립

○ '26.12. : 역세권 도시재생 사업완료(예정)

○ `26.12. : 역전지구 도시개발 보상협의 완료 및 착공

○ '29.12. : 역전지구 도시개발 사업 완료(예정)

건축도시과   도시재생팀   팀장 윤병상   담당자 이현주 (☎4662)