<2-7-2>	충남 ICT 융복합 스마트축산 시범단지 조성

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 24. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타
		○

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
추진계획	축산단지 조성		추진계획 수립	연구용역 추진	간척지 활용 사업구역 지정, 사업시행자 충남도 지정	실시계획 수립․승인, 기반공사 착공	기반공사 준공	축사, 분뇨 에너지화 시설 등 착공
추진실적			조성계획 수립(8월)	연구용역 (3월~)	연구용역 완료(~2월)

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	200	0	200	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	133	0	133	0	0	0	0
24년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	58	0	58	0	0	0	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022~2026년

○ 사 업 비 : 109,000백만원(국비 75,500, 도비 10,060, 시군비 23,440)

* 충남도는 기반조성 시행, 사업자 모집을 통해 축사, 에너지화, 도축 가공장 조성

○ 사업내용 : 도내 간척지(2개소/석문, 부사 간척지)에 스마트 축사 및 분뇨 에너지화 시설, 도축․가공장 등이 집적화된 축산 산업단지 조성

* 지역에 산재된 양돈농가 이전 및 분뇨 에너지화로 탄소중립 및 축산 구조개혁 추진

○ 중장기계획 반영 여부 : 충남형 ICT 융복합 스마트 축산단지 조성 추진계획

□ 주요 추진실적(성과)

○『충남형 ICT 융복합 스마트 축산단지 조성 추진계획』수립(`22. 8.)

○ `22년 제2회 추경 “간척지내 축산단지 조성 연구용역” 예산 확보(`22. 9.)

○ 연구용역 추진을 위한 “과업지시 적정여부” 전문가(교수 3인) 사전검토(`22. 10.)

○ 유관기관 등(농식품부, 농어촌공사, 관계 시․군, 한돈협회) 과업 의견조회 및 계약심사 의뢰(`22. 11.)

○ 연구용역 제안요청서 등 마련, 연구용역 계약의뢰(`22. 12.)

○ 연구용역 입찰공고, 제안서 평가위원회 개최(`23. 1.) → 계약․용역착수(`23. 2.)

○ 연구용역 착수보고회 개최(`23. 3. / 농식품부, 시‧군, 농어촌공사, 학계 등 자문)

○ 간척지 활용 방안 관련 농식품부(기반조성과) 업무 협의(`23. 4.)

○ 예산 확보방안 협의(기재부․농식품부) 및 축산 시범단지 조성현장(고성‧당진) 방문․견학(`23. 5.)

○ 연구용역 중간(1차)보고회 개최(`23. 6./ 농식품부, 시‧군, 학계 등 자문)

○ 충남형 스마트 축산단지 세부 추진 전략‧계획 설정 관련 업무협의(`23. 7./축산과+용역사)

○ 축산단지 조성을 통한 산업 융복합 방안 설명회 개최(`23. 8.)

○ 가축분뇨 에너지화시설 현장((주)성우, 홍성 결성) 방문‧견학(`23. 9.)

○ 연구용역 중간(2차)보고회 개최(`23. 10./ 시‧군, 학계, 협회, 농협 등 자문)

○ 연구용역 업무협의(`11.16./축산과+용역사) 및 축산단지 예정부지 현지 확인(`23. 11.~12.)

○ 연구용역 최종 보고회 개최(`24. 2./ 농식품부, 전문가 등 자문) 및 준공

○ 연구용역 결과에 따른 스마트 축산 복합단지 조성계획 수립(`24. 3.)

* 당진 석문간척지(30만 두, 180ha) / 보령․서천 부사간척지(30만 두, 180ha)

** 가축분뇨에서 바이오가스(메탄) 생산 후 전력 또는 수소로 전환하고, 폐열을 ‘스마트팜’에 이용

⇨ ①시범모델(당진 석문 6만두/30ha) + ②복합단지(당진 석문, 보령서천 부사 54만두/330ha)

○ 간척지 부지확보를 위한 농식품부 관계부서 업무 협의(2회 / `24. 3.)

○ 농식품부에 ‘종합계획 반영’과 ‘활용사업구역 지정’ 요청(‘24. 3.)

□ 추진상 문제점 및 대책

○ 간척지 임대농 및 지역 주민 등 스마트 축산 복합단지 조성 반대 예상

⇨ 선진지 견학 등을 통해 주민 이해설득(악취 Zero, 환경 친화) 지속 추진

□ 향후 추진계획

○ 농식품부「간척지 농어업적 이용 종합계획」에 축산단지 조성계획 반영

* 농식품부로부터 ‘간척지 활용사업구역’ 지정 및 ‘사업시행자’ 충남도 지정 병행 추진

○ 법적 이행사항 및 이주대상자 선정 기준 마련 등을 위한 TF추진단 구성(4월)

○ 現, 간척지(당진 석문) 임대법인 대상으로 축산단지 조성계획 설명 및 사업부지 편입에 따른 민원 해소 방안등 지속 협의

○ 시범모델(석문-6만두)은 농식품부 ‘25년 개별사업으로 추진, 복합단지(석문, 부사-54만두)는 신규사업으로 ‘예비타당성 조사’ 절차 진행

축산과   스마트축산정책팀   팀장 이형구   담당자 이정배 (☎4101)