<2-7-5>	충남형 스마트팜 청년 창업 보육 지원

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 24. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타
	○

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
추진계획	스마트팜 교육장 건립(도)			용역진행	1개동 신축
추진실적			․ 계획수립 (8월) ․ 행정절차 이행	실시설계 용역 착수	착공(3월)
추진계획	스마트팜 전문교육 운영(도)		1회 22명 (22.12∼23.5)	1회 24명	1회 24명	1회 24명	1회 24명
추진실적			1회 22명	․ 정예지도사 5회 22명 ․ 창업보육교육 50명(6개월)	이론교육 30명 현장실습 30명
추진계획	스마트팜 실습교육장 조성(시군)			8개소 (1.320㎡/ 개소당)	3개소 (990㎡/ 개소당)
추진실적				17개소 (990㎡내외/ 개소당)
추진계획	스마트팜 전문교육 운영(시군)			2회 180명 (창업+확대)	2회 180명 (창업+확대)	2회 180명 (창업+확대)	2회 180명 (창업+확대)
추진실적			6과정 12회 300명 운영	(테스트베드) 26회 194명, (기술교육) 6과정 12회 231명	20명

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	9,300	0	6,300	3,000	0	0	0
	집행	2,347	0	1428	919	0	0	0
24년	확보	6,665	0	2,469	4,142	0	54	0
	집행	13	0	13	0	0	0	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

① 충남형 스마트팜 교육시설 건립(도)

- 사업기간: ʼ22. 8. ~ ʼ24. 6.

- 대 상 지: 농업기술원 내(예산군 신암면 종경리 354)

- 사 업 비: 28억원(도비 100%)

- 면    적: 1,729.8㎡(온실 1,297.8, 다목적실 432)  ※ 약 520평(온실 393평)

- 건축형태: 교육장 1동, 지상1층(높이 7.32m)

- 도입작물: 딸기, 토마토, 오이, 고추, 쪽파, 엽채류 ※ 작물별 210㎡(65평)

② 충남형 스마트팜 사관학교(실습교육장) 조성(시군)

- 사 업 량: 20개소(ʼ22 2개소, ʼ23 15개소, ʼ24 3개소)

- 사 업 비: 180백만원(ʼ24년 예산, 개소당 60백만원, 도비30%, 시군비70%)

- 사업내용: 지자체 보유지에 시설을 신축(개보수)하여 재배실습을

할 수 있는 스마트팜 교육장 조성   * 개소당 약 990㎡기준

③ 스마트팜 청년창업 전문교육 운영(도)

- 기    간: ʼ24. 1. ~ 12.(기간 중 6개월)

- 인    원: 120명(도 60명제2기, 제4기, 시군 60명제3기)

- 교육대상: (도) 만 40세 미만의 충남 거주자, 또는 귀농 희망자

(시군) 만 50세 미만의 충남 거주자

구 분	인 원 (명)	소요예산 (백만원)	기 간	비 고
계	120	1,080
제2기 창업교육 (도)	30	270 (도 100%)	1월 ~ 7월	(도) 입문교육 → (도) 현장실습* * 선도 농가 현장실습교육(5개월)
제3기 창업교육 (시군)	60	540 (도 30%, 시군 70%)	3월 ~ 12월	(도) 입문교육 → (시군) 현장실습
제4기 창업교육 (도)	30	270 (도 100%) * 추경확보	7월 ~ 12월	(도) 입문교육 → (도) 현장실습* * 기술원 내 스마트팜 교육장(3개월) * 선도 농가 현장실습교육(2개월)

④ 스마트팜 현장 실용교육(도)

- 기    간 : ‘24. 2. ~ 11.

- 장    소 : 농업기술원 교육관

- 대    상 : 스마트온실 전환 농업인 및 보조사업 지원 농업인

- 내    용 : 스마트팜 시설 구축·제어 기술 및 작물별 운영방법 등

* 대상작물 : 딸기, 과채류, 엽채류

- 운    영 : 12개 과정, 240명 (과정별 20명)

□ 주요 추진실적(성과)

<스마트팜 교육시설 건립>

○ 교육장 건립 기획설계용역 착수(2023. 1.)

○ 교육장 건립 공공건축 심의 의결(2023. 6.)

○ 교육장 건립 실시설계 용역 착수(2023. 12.)

<스마트팜 육성 정예전문지도사 양성교육>

○ 스마트팜 정예전문지도사 양성 교육 추진(’22. 12~’23. 9, 5회 22명)

<스마트팜 청년 창업 교육>

○ 스마트팜 청년 창업 교육 대상자(6개월, 40명) 선발(2023. 6.)

○ 스마트팜 청년 창업 입문교육 추진(2023. 7.~12. 50명)

<스마트팜 사관학교>

○ 스마트팜 실습교육장 사관학교 17개소 조성 추진

- 8개소(공주, 아산, 서산, 당진, 서천, 청양, 예산, 태안)

- 7개소(천안, 보령, 논산, 금산, 부여, 서천, 홍성)

- 2개소(보령, 부여)

○ 충남형 청년창업 스마트팜 교육장 실시 설계 용역 완료(ʼ24. 2.)

→ 시공업체 계약, 공사착공(ʼ24. 3.)

○ 제2기 스마트팜 청년창업 이론교육(ʼ24.1.25.~2.23./1개월/30명)

→ 선도농가 현장실습 교육(ʼ24.3.1.~6.30./5개월/30명)

○ 충남형 스마트팜 사관학교 추진상황 점검회의(ʼ24.2.5./14개시군)

→ 담당자 워크숍(ʼ24.3.19./부여/30명)

○ 스마트팜 현장 실용교육「스마트팜 시설 구축 및 운영」(ʼ24.2.5./20명)

□ 향후 추진계획

○ 충남형 청년창업 스마트팜 교육장 준공(ʼ24.6.)

○ 제3~4기 스마트팜 청년 창업 교육 추진(ʼ24.3.~12.): 90명

○ 스마트팜 사관학교 신규 조성, 고도화, 운영지원: 3종 50개소

→ 사관학교 준공(20개소) 및 청년농업인 입주(30명 내외)

○ 스마트팜 현장 실용교육: 11과정 120명

스마트기술정책과	스마트인재팀	팀장 남연미	담당자 김용준 (☎6143)
역량개발과	실용교육팀	팀장 임주빈	담당자 조현철 (☎6206)