<2-7-8>	간척지의 첨단양식단지 조성

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 24. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타
		○

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
추진계획	간척지 내 스마트 양식단지 조성		-간척지 어업적 이용 타당성 조사 연구용역 지원	-연구용역 및 파일럿사업 (양식장 1개소) -해수부 신규사업 편성 및 국비 확보	-스마트 양식 단지 조성 실시설계 -청년 창업·임대양식단지 조성 국비 확보	-스마트양식단지 조성 착공 -청년 창업·임대양식단지 조성 실시설계	-스마트양식단지 조성 준공 -청년 창업·임대양식단지 조성사업 착공	-스마트양식단지 시범양식 추진 -청년 창업·임대양식단지 조성사업 착공 및 준공
추진실적			연구용역 추진	-파일럿사업준공(12월) 국비확보 (100억원)

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	300	0	150	150	0	0	0
	집행	300	0	150	150	0	0	0
23년	확보	1,900	0	510	1,190	0	200	0
	집행	1,900	0	510	1,190	0	200	0
24년	확보	2,500	1,000	432	1,008	0	60	0
	집행	500	0	132	308	0	0	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022 ~ 2026년

○ 사 업 비 : 42,900백만원(국비 22,000, 도비 10,010, 시군비 10,690, 자담 200)

○ 사업내용 : 간척지 내 스마트 양식단지 및 청년창업임대 양식단지 조성

○ 수혜대상 : 도내 수산양식업 관련 어업인 및 수산식품 기업

○ 중장기계획 반영 여부 : 해수부 제5차 양식산업발전 기본계획(’23~’27)

2024년 충청남도 양식산업발전 시행계획

□ 주요 추진실적(성과)

○ ’23. 1. : 간척지 어업적 이용 타당성 조사 연구용역 추진(용역사-한경대 산학협력단)

○ ’23. 2.~11. : ’24년도 신규사업 편성 및 국비 확보 해수부, 국회 방문(5회)

- 사업 당위성 및 충남형 간척지 스마트 양식 모델링 설명 등 ’24년도 예산반영 건의

○ ’23. 3.~12. : 파일럿(시범) 사업(순환여과식 연어양식장 조성) 착공 및 준공

○ ’23. 3., 6., 11. : 간척지 스마트 양식 모델링 개발 민관 워킹그룹 회의(3회)

○ ’23. 8.~9. : 파일럿(시범) 사업(순환여과식 연어양식장 조성) 추진상황 점검

○ ’23. 12. : 2024년 신규사업(청년 창업․임대양식단지 조성) 편성 및 당진 간척지 스마트 양식단지 국비 확보(100억원/3년)

○ ’24. 1. : 당진 간척지 스마트 양식단지 조성부지 농림부 매각 승인 협의

○ ’24. 1.~3. : 파일럿(시범) 사업 연어양식 추진 및 양식 데이터 수집 추진

□ 추진상 문제점 및 대책

○ 충남형 간척지 스마트 양식 모델링 개발 등으로 ’24년 해수부 신규사업 반영 요청‧추진

⇒ 2024년도 예산 감축 재정 기조로 인한 기재부에서 총사업비 감액

○ 당초 계획에 따라 추가 사업비 200억원 확보 필요

⇒ 2025년도 신규 사업 발굴 등을 통해 국비 추가 반영 노력

⇒ 기업 유치 등을 통해 투자 방안 논의 등

○ 간척지 스마트 양식단지 조성 실시설계 완료 후 농림부 소유부지 매각 등 조건부 매각 승인 결정

- 원활한 사업부지 확보를 위해 실시설계 공정률 50%시 매각토록 설득

□ 향후 추진계획

○ (’24. 4.) 청년창업·임대 양식단지 조성 신규사업 반영 및 국비 확보 추진

○ (’24. 5.~12.) 기본 및 실시설계, 기타 제반 행정절차 이행 등

○ (’‘24. 12.) 농림부 소유 부지(11.5ha, 46억원) 매입

○ (’25.~’26.) 간척지 스마트 양식단지 조성 사업 착공·준공

○ (’25.~’27.) 간척지 청년창업·임대 양식단지 조성사업 추진

수산자원과   수산자원팀   팀장 김성헌   담당자 노은주 (☎4136)