<2-8-3>	태안 해양치유센터 건립

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 24. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타
	○

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
추진계획	태안 해양치유 센터 건립	실시설계 총사업비 확정	착공	정상건립 운영방안 마련	준공 운영개시
추진실적			착공(3월)	운영방안 마련(12월)	공정률 38% (3월 기준)

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	9,100	4,200	1,260	3,640	0	0	0
	집행	9,100	4,200	1,260	3,640	0	0	0
23년	확보	9,800	4,900	1,470	3,430	0	0	0
	집행	9,800	4,900	1,470	3,430	0	0	0
24년	확보	6,203	3,075	922	2,206	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2020 ~ 2024년

○ 사 업 비 : 34,000백만원(국비  17,000, 도비 5,100, 시군비 11,900)

※ 총사업비 조정(기재부) 30,403백만원(국비 15,175, 도비 4,552, 군비 10,676)

○ 사업내용 : 해양치유자원 활용 건강관리 및 휴양서비스 인프라 조성

- 태안군 남면 달산포 일원 / 지하1층, 지상2층(연면적 8,478㎡)

○ 중장기계획 반영 여부 : 제3차 해양수산발전기본계획(2021-2030)

충청남도 해양수산발전계획(2015-2030)

□ 주요 추진실적(성과)

○ ’17.11. : 해양치유 R&D 협력지자체 공모사업 최종선정

- 전국 4곳 : (서해) 태안, (동해) 경북 울진, (남해) 전남 완도, 경남 고성

○ ’19.12. : 2020년 정부예산 10억원 반영(설계비)

○ ’20. 9. : 공공건축 심의(5월) 및 중앙투자심사(9월) 완료

○ ’21.10. : 해양치유센터 기본 및 실시설계 완료

○ ’21.12. : 기재부 총사업비 확정(340억원)

○ ’22. 3. : 해양치유센터 건축공사 착공

○ ’23.12. : 해양치유센터 시설(장비) 운영관리계획 수립 용역 완료

○ ’24. 3. : 해양치유센터 건축공사 진행(공정률 38%, 2층 바닥타설 완료)

※ 동절기 일시정지('23. 12. 26. ~ '24. 2. 29.) 후 공사재개

□ 향후 추진계획

○ '24.  7. : 치유센터 건축공사 준공 및 내부공사(프로그램실) 착공

○ '24. 11. : 내부공사 준공 및 시설장비 도입

○ '24. 12. : 해양치유센터 시범운영

해양정책과   해양산업팀   팀장 가순신   담당자 유창재 (☎4764)