<3-12-4>	중부권 거점 재활전문병원 건립

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 24. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타
	○

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
추진계획	재활전문 병원건립	공모선정 지방재정 투자심사	지방재정 투자재심사 설계적정성검토	착공	공사 공유재산 심의	준공 및 개원	운영	운영
추진실적			지방재정 투자재심사 설계적정성검토(12월)	시공사 선정 및 착공(8월)	공사

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	6,000	0	3,000	3,000	0	0	0
	집행	6,000	0	3,000	3,000	0	0	0
24년	확보	15,000	0	10,000	5,000	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

❹ 공약별 입법현황

분류 (해당 분야에 O 표기)		국회 입법 관련 이행근거				지방의회 조례 관련 이행근거			비고
입법	조례
	○	입법명 :				조례명 : 가칭 충청남도 권역 재활병원 운영 지원 조례			12월 제정 계획
		발의	상임위심사	법사위심사	본회의의결	발의	위원회심사	본회의의결

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2017 ~ 2025년

○ 사업규모 : 150병상(지하 1층, 지상 4층), 연면적 11,712㎡

○ 사 업 비 : 49,500백만원(국비 9,500, 도비 28,000, 아산시비 12,000)

○ 사업내용 : 전문적인 재활치료를 위한 재활의료 전문병원 건립

- 재활병동, 수 치료실 및 로봇 치료실 등 각종 치료실, 검사실, 외래 진료실, 의지 보조기실, 지역장애인보건의료센터 등

○ 중장기계획 반영 여부 : 제5기 충청남도지역사회보장계획

□ 주요 추진실적(성과)

○ 권역재활병원 추진사항 보고 및 추진방향 정립(’22.7)

- 사업비 증가분 도와 아산시 분담, 연내 착공 목표로 추진

○ 중앙지방재정투자 재심사 조건부 승인(’22.11)

- 총사업비 500억원 이상으로 증가 시, 타당성 조사 실시

○ 복지부 사업계획 변경 승인, 조달청 설계적정성 검토 이행(’22.12)

○ ’22년에 이월만료 되는 국비 40억원 집행, 반납사유 해소(’22.12)

○ ’23년 7월 조달청 입찰 및 8월 시공사 선정, 착공(’23.8.25.)

○ 사업 지연으로 인한 국비 반납액 40억원* ’24년 본예산 확보(’23.12.)

* ’17～’19년 미집행 국비 반납액 40억원

○ 부지 무단점유자 아산시 행정대집행 진행(’24.2.)

○ 재활병원 부지정리작업 진행(’24.3.)

□ 향후 추진계획

○ 공사 정상 추진 : ’24. 4월

○ 조례 제정 : ’24. 12월      ○ 준공 및 개원 : ’25. 12월

장애인복지과  장애인재활팀   팀장 최영규   담당자 이영섭 (☎4278)