<4-14-2>	안면도 국제꽃박람회 재추진

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 24. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타
		○

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
추진계획	안면도 국제 원예치유 박람회 개최		․ 연구용역 예산확보 ․ 용역착수	․ AIPH 한국 위원회 협약 ․ 국제행사 추진 분위기 조성 ․ AIPH 공인 신청서 제출 ․ 국제행사 신청서 제출	․ 국제행사 심의, 정책성등급조사 ․ AIPH 공인 ․ 조직위원회 출범	․ 행사준비 (~’26.4월)	․ 박람회 개최
추진실적			․ 연구용역 예산확보 ․ 용역업체공고 및 협상	․ 연구용역 시행 ․ 업무협약(도‧태안군‧AIPH한국위원회) ․ 기본계획 수립 ․ 관련조례 제정 ․ 국제행사 신청서 제출 ․ AIPH공인신청발표	조직위 설립등기 (3월)

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
24년	확보	410	0	360	50	0	0	0
	집행	9	0	9	0	0	0	0

❹ 공약별 입법현황

분류 (해당 분야에 O 표기)		국회 입법 관련 이행근거				지방의회 조례 관련 이행근거			비고
입법	조례
	○	입법명 :				조례명 : 충청남도 재단법인 국제원예치유박람회 조직위원회 설립 및 지원 조례
		발의	상임위심사	법사위심사	본회의의결	발의	위원회심사	본회의의결
								○

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022 ~ 2026년

○ 사 업 비 : 22,000백만원(국6,60030%, 지방비 등 15,40070%) * 부담비율 미확정

* 기본계획 구상 및 타당성조사 용역(1.5억원), 세부실행계획용역(4억원) 별도

○ 사업내용 : AI‧IT융복합, 스마트팜 등 원예산업의 미래비전 제시 및

농업·산림·해양 인프라를 활용한 치유산업 모델 보급

□ 주요 추진실적(성과)

○ 기본계획 및 타당성 연구용역 보고[착수(2월), 중간(4월), 최종(7월)]

○ 박람회 준비계획(준비팀 구성, 15대과제 등) 도지사 방침결정(’23.3.3)

○ 박람회 자문단 회의(15명) 및 안면도 꽃지공원 현지 순람 등(‘23.3.22)

○ 박람회 성공개최 상호협력 업무협약 체결(‘23.4.14./도‧태안군‧AIPH*한국위원회)

○ 조직위원회 설립 및 지원 조례 제정(‘23.8.10. 조례안 공포)

○「2026 태안국제원예치유박람회」기본계획 수립 (‘23.8.14.)

○ 국제행사 개최계획서 제출(‘23.8.30. / 농식품부)

○ 국제원예생산자단체(AIPH) 국제공인 추진계획 발표(‘23.9.18. / 순천만)

○ 박람회 조직위원회 설립·출연 계획 수립(‘23. 10.), 조직위원회 출연금 동의(‘23. 12.)

○ 박람회 국제행사 개최신청서 제출(`23.12./농식품부 → 기재부)

* AIPH(국제원예생산자협회) : 벨기에 브뤼셀에 등록한 국제적 비영리협회(30개국 회원)

○ (재)태안국제원예치유박람회 조직위원회 설립 등기 완료(`24.3.)

○ 기재부 국제행사심사위원회 심의(`24.1.~4.)

□ 추진상 문제점 및 대책

○ 2026세종정원도시박람회와 유사 주제 및 개최시기 중복*

- 원예와 정원 차별성 설명 및 행사 중복내용 제거, 시기 관련 양 기관 협의

* 태안국제원예치유박람회(’26.4.25~5.24), 세종정원도시박람회(’26.4.10~5.24)

○ 국외 관계기관 및 관람객 참여 위한 구체적 계획 필요

- AIPH ‘C등급’ 공인, 국외 관계기관 및 관람객 유치전략 수립

□ 향후 추진계획

○ 국제행사 정책성 등급 조사(`24.4.~8./기재부)

○ (재)태안국제원예치유박람회 조직위원회 출범(`24.5./2본부 4팀 21명)

○ AIPH 총회(폴란드) 참석, 박람회 추진계획 발표 및 ‘C등급’ 공인(`24.9.)

스마트농업과   박람회준비TF팀   팀장 이상열   담당자 박영수 (☎4036)