<4-16-1>	e스포츠 메카 조성

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 24. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타
		○

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
추진계획	e스포츠 상설경기장 건립		-부지 확보 -타당성조사 및 기본계획 수립	-행안부 지방 재정투자심사 -공공건축심의 -건축설계 공모 및 실시설계	-공사착공	-공사준공 -안전검사 및 시범운영 -경기장 개장	-경기장 투어 프로그램 운영	-MICE행사 및 각종 공연 등 개최
추진실적			-부지확보 -타당성조사 및 기본계획 수립 착수	-국비 40억원 확보 (’23~’25) -지방재정투자 심사(도) 및 공공 건축심의 승인 -경기장 설계용역 공모	-실시설계 용역 추진중 (’24. 1.∼9.)
추진계획	e스포츠 생태계 활성화		-도지사배 충남 세대별 e스포츠 대회 개최	-도지사배 충남 세대별 e스포츠 대회 개최	-도지사배 충남/전국 세대별 e스포츠 대회 개최 -청소년 진로 체험 교육, e스포츠 전문인력 양성 -e스포츠 프로게임단 스폰서십 및 연고제 운영	-도지사배 충남/전국 세대별 e스포츠 대회 개최 -청소년 진로 체험 교육, e스포츠 전문인력 양성 -e스포츠 프로게임단 스폰서십 및 연고제 운영	-도지사배 충남/전국 세대별 e스포츠 대회 개최 진로체험 교육, e스포츠 전문 인력 양성 -e스포츠 프로 게임단 스폰서십 및 연고제 운영 -글로벌 e스포츠 대회 개최	-도지사배 충남/전국 세대별 e스포츠 대회 개최, 청소년 진로체험교육, e스포츠 전문인력 양성 -e스포츠 프로 게임단 스폰서십 및 연고제 운영 -글로벌 e스포츠 대회 개최
추진실적			-도지사배 청소년 e스포츠대회 개최	-24년 대통령배 전국 e스포츠 대회 유치 -충남 e스포츠 정규리그 (청소년·직장인) 개최	-전국장애인 e스포츠 개최 관련 업무 협의(3회)

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	100	0	100	0	0	0	0
	집행	100	0	100	0	0	0	0
23년	확보	2,300	1,000	1,300	0	0	0	0
	집행	2,300	1,000	1,300	0	0	0	0
24년	확보	11,496	1,750	9,596	150	0	0	0
	집행	2,650	1,000	1,650	0	0	0	0

❹ 공약별 입법현황

분류 (해당 분야에 O 표기)		국회 입법 관련 이행근거				지방의회 조례 관련 이행근거			비고
입법	조례
○	○	입법명 : 이스포츠(전자스포츠) 진흥에 관한 법률				조례명 : 충청남도 이스포츠(전자스포츠) 진흥 및 지원에 관한 조례, 충청남도 게임산업 육성·지원에 관한 조례
		발의	상임위심사	법사위심사	본회의의결	발의	위원회심사	본회의의결
					○			○

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022 ~ 2026년

○ 사 업 비 : 308억원(국비 40, 도비 268)

○ 사업내용 : e스포츠 상설경기장 건립 및 운영, e스포츠 생태계 활성화

○ 수혜대상 : 전 도민

□ 주요 추진실적(성과)

<충남 e스포츠 상설 경기장 건립>

○ e스포츠 경기장 구축사업 문체부 공모 선정* 및 국비 40억원 확보

* 도↔한국콘텐츠진흥원↔정보문화산업진흥원 협약(’23.8.)/’23~’25/275.3억원(국 40, 도 235.3)

○ e스포츠 경기장 건립 기본계획 수립 및 타당성 조사 용역(’23.1.~4.)

○ 도 지방재정투자심사 조건부 승인(’23.7.)  ※ 조건부이행 완료(’23.10.)

○ 도 공공건축심의 조건부 승인(’23.10.)  ※ 조건부이행 완료(’23.11.)

○ 기본 및 실시설계 용역 공모(’23.12.) 및 설계용역 추진(’24.1.19∼9. 16.)

○ e스포츠 경기장 건립 기본 및 실시설계 착수보고 (’24. 2. 1.)

○ e스포츠 경기장 건립관련 자문위원회 구성 및 운영(2회 : 2. 29., 3. 22)

<충남 e스포츠 생태계 활성화>

○ ‘24년 전국 대통령배 이스포츠 대회 유치(’23.8.)  ※국비 3.5억원 확보

○ 충남 e스포츠 정규리그(청소년‧직장인) 개최(’23.9./1,000여명 참여)

○ 2024 전국 장애인 e스포츠 유치 의향 제출(콘진원) : 2024. 1. 5.

○ 전국장애인 e스포츠 개최 예정지(천안 2, 아산 2) 협의 : 2024. 1. 5

○ 전국 장애인 e스포츠 개최 관련 관련기관 2차 업무협의 : 2024. 3.

○ e스포츠 대회 개최 경기장 대관 가능관련 협의(아산시) : 2024. 3.

⇢ 장애인스포츠연맹에 대관 가능여부 회신 / ’24. 7. 12. ~ 7. 14.

□ 향후 추진계획

<충남 e스포츠 상설 경기장 건립>

○ 공공건축물 예비인증(BF) 및 계약심의, 입찰공고(’24. 5.~ ’24. 7.)

○ 기본 및 실시설계 용역(’24. 1.~ 5.) 및 공사 추진(’24. 6.~ ’25. 12.)

<충남 e스포츠 생태계 활성화>

○ 전국 장애인 e스포츠 개최지 현장실사(’24.4. 4.)

○ ‘24년 전국 대통령배 이스포츠 대회 개최(’24. 8월중/ 아산 이순신체육관)

문화정책과   문화산업팀   팀장 조정림   담당자 최윤미 (☎2413)