<4-16-3>	어르신들을 위한 생활체육시설 확대

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 24. 3. 31. 기준						비 고
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타
	○

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
추진 계획	파크골프장 조성		파크골프장 운영실태 및 수요조사 추진계획 수립 공모사업 (9개소)	공모사업 (12개소)	공모사업 (9개소)	공모사업 반납분 (3.5개소)
추진 실적			공모사업 선정(11월) *18홀 9개소	공모사업 선정(2,7월) *9홀 3개소, 18홀 7개소 *27홀 1개소 *36홀 1개소	공모사업 선정(3월) *9홀 1개소, *18홀 5개소 *36홀 1개소

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	9,000	0	2,700	6,300	0	0	0
	집행	9,000	0	2,700	6,300	0	0	0
23년	확보	12,000	0	3,600	8,400	0	0	0
	집행	12,000	0	3,600	8,400	0	0	0
24년	확보	9,000	0	2,700	6,300	0	0	0
	집행	7,500	0	2,250	5,250	0	0	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022 11. ~ 2024. 12.

○ 사 업 비 : 개소당 10억원(도 3, 시군 7)

※ 총사업비 : 300억원(도 90, 시군 210)

○ 사업내용 : 면적 18,000㎡ 이상 18홀 20m~100m, 총 1km 조성

- ’22년 9개소, ’23년 12개소, ’24년 9개소 공모사업으로 추진

※ ’22년 : 보령, 당진, 금산, 서천, 청양, 홍성, 태안 선정(7개 시군, 9개소)

’23년 : 천안, 아산, 서산, 논산, 당진, 예산, 금산, 부여, 서천, 태안 선정(10개 시군, 12개소)

’24년 : 천안, 공주, 보령, 아산, 서산, 논산, 태안 선정(7개 시군, 7.5개소)

□ 주요 추진실적(성과)

○ ’22.  8. : 파크골프장 전수조사 및 수요 파악

○ ’22.  9. : 2회추경 예산 확보(27억원)

○ ’22. 10. : 2022년 파크골프 조성 공모사업 시행

○ ’22. 11. : 공모사업 선정(18홀 9개소)

○ ’23.  1. : ’23년 파크골프장 조성사업 공모

○ ’23.  2. : ’23 상반기 공모사업 선정(9홀 3개소, 18홀 5개소)

○ ’23.  6. : 파크골프장 공모사업 추진상황 점검

○ ’23.  7. : ’23년 하반기 파크골프장 조성사업 공모

○ ’23.  8. : ’23 하반기 공모사업 선정(18홀 2개소, 27홀 1개소, 36홀 1개소)

○ ’23. 12. : 하반기 파크골프장 공모사업 추진상황 점검

○ ’24.  1. : ’24년 파크골프장 조성사업 공모

○ ’24.  2. : 서면평가 및 현장실사

○ ’24.  3. : ‘24년 상반기 공모사업 선정(9홀 1개소, 18홀 5개소, 36홀 1개소)

□ 추진상 문제점 및 대책

○ 사업추진이 어려운 시군의 사업 반납분(3.5개소)에 대하여 1회 추경에 요청하였으나 미반영

○ `25년 본예산에 요청하여 사업추진 예정

□ 향후 추진계획

○ ’24년 하반기 파크골프장 추가 공모사업 시행(9홀1개소, 18홀 1개소)

○ ’25년 본예산에 사업 반납분(3.5개소) 요청

○ 공모사업 관리

체육진흥과   체육시설지원팀   팀장 이용석   담당자 강석모 (☎3866)