정책실명 공개과제 사업관리이력서(완료)

정책실명제 등록번호	2017-09	담당부서 작성자	소방본부 / 소방행정과 (정해근/041-635-5565)
정 책 명	계룡소방서 신축
사업개요	○ 추진배경 - 도민 모두 안전으로부터 소외받지 않는 소방 환경 조성 및 재난현장 골든타임 확보 - 신설 된 소방서의 청사 신축을 통해 원활한 업무수행 및 근무환경 개선 ○ 추진기간 : 2017년 ~ 2020년 ○ 총사업비 : 11,579백만원(부지매입 1,500, 건축 10,079) ○ 주요내용 - 위 치 : 계룡시 엄사면 유동리 283번지 일원 - 구 조 : 철근 콘크리트조 슬래브즙, 지하1층 / 지상3층 - 규 모 : 11,579백만원(부지매입 1,500, 건축 10,079) - 사업방법 : 종합건설사업소 의뢰 설계 및 건축 추진
추진경과 및 사업 관련자	□ 사업관련자 현황 ○ ‘16.05.30. : 신설 계룡소방서 청사 신축계획 수립 - 관련자 : 충청남도 소방행정과 복합시설팀 주무관 정해근, 복합시설팀장 진종현, 소방행정과장 이동우, 소방본부장 한상대, 도지사 안희정 ○ ‘16.08.09. : 지방재정 중앙 투자심사 승인 - 관련자 : 충청남도 예산담당관실 주무관 김현기, 재정지원팀장 박태진, 예산담당관 고준근 ○ ‘16.11.23. : 충청남도 공유재산심의회 취득 승인 - 관련자 : 충청남도 세무회계과 재산관리팀 주무관 이광복, 재산관리팀장 허선무, 세무회계과장 김기승 ○ ‘17.04.03. : 충청남도 공유재산 관리계획 도의회 의결 - 관련자 : 충청남도 세무회계과 재산관리팀 주무관 황평하, 재산관리팀장 이헌희, 세무회계과장 류재홍

추진경과 및 사업 관련자	○ ‘17.08.28. : 계룡소방서 청사 신축공사 설계용역 일상감사 및 계약심사 - 관련자 : 충청남도 감사위원회 계약심사팀 주무관 안유환, 계약심사팀장 박정순, 조사과장 엄일섭 ○ ‘17.09.29.. : 계룡소방서 신축공사 건축설계 공모 공고 - 관련자 : 충청남도 회계과 계약팀 주무관 한성대, 계약팀장 김성관, 회계과장 임옥순 ○ ‘18.01.11. : 계룡소방서 신축공사 건축설계 공모 결과에 따른 계약 체결 - 관련자 : 충청남도 회계과 계약팀 주무관 한성대, 계약팀장 김성관, 회계과장 임옥순 ○ ‘18.01.22 : 계룡소방서 청사 신축공사 설계용역 착수 - 관련자 : 충청남도 종합건설사업소 서무과 계약팀 주무관 이길재, 계약팀장 최양진, 서무과장 김종흠 ○ ‘18.08.20. : 계룡소방서 청사 신축공사 설계용역 완료 - 관련자 : 충청남도 종합건설사업소 서무과 계약팀 주무관 이길재 계약팀장 박상용, 서무과장 허영 ○ ‘19.01.11. : 계룡소방서 청사 신축공사 낙찰자 결정 및 계약 체결 - 관련자 : 충청남도 운영지원과 계약팀 주무관 한성대, 계약팀장 이헌희, 운영지원과장 임옥순, 자치행정국장 이윤선 ○ ‘19.01.25. : 계룡소방서 청사 신축공사 착공 - 관련자 : 충청남도 종합건설사업소 서무과 계약팀 주무관 임선환, 계약팀장 이영희, 서무과장 허영