충남도청(내포)신도시 개발사업 주간공정 보고

(2011. 06. 30일 현재)

공사명	공사 개요	공사비 (억원)	사업기간	진도(%)			사업추진 내 용	시공사
				전주	금주	누계
도청및의회청사 건립공사	․연면적 104천㎡ ․지상7층	2,327	’08.12 ~ ’12.12	44.8%	0.3%	45.1%	․기계, 소방공사 추진	계룡 건설
2-1공구 조성공사	․면적 994천㎡	330	’09.5 ~ ’13.5	62.6%	0.5%	63.1%	․우천으로 인한 작업 대기 및 배수로 정비	현대 건설
2-2공구 조성공사	․면적 881천㎡	425	’10.4 ~ ’13.10	29.0%	0%	29.0%	․우천으로 인한 작업 대기 및 배수로 정비	극동 건설
2-3공구 조성공사	․면적 1,908천㎡	321	’10.11 ~ ’13.11	15.4%	0%	15.4%	․우천으로 인한 작업 대기 및 배수로 정비	현대 아산
지하차도 건설공사	․연장 1.275㎞	360	’10.7 ~ ’12.7	30.7%	0.8%	31.5%	․우천에 의한 작업대기 ․벽체철근조립	진흥 기업
하수처리시설 건설공사	․용량 44,000㎡/일	663	’10.10 ~ ’13.1	17.4%	0.7%	18.1%	․우천에 의한 작업대기 ․벽체철근조립	GS 건설
자동집하시설 건설공사	․용량 70톤/일	750	’10.10 ~ ’13.1	10.6%	0.4%	11.0%	․우천에 의한 작업대기 ․이송관로 부설	포스코 건설
배수지 건설공사	․용량 30,000㎡	96	’10.10 ~ ’12.10	39.6%	1.4%	41.0%	․우천에 의한 작업대기 ․벽체철근조립	태성 건설
지장물철거	․폐기물처리, 수목이식 등	136	’09.6 ~ ’11.10	71.4%	0%	71.4%	․우천으로 인한 작업 대기 및 배수로 정비	주민생계조합
생태하천	․신경천 3.3㎞ ․목리천 2.6㎞	92	’10.12 ~ ’12.11	7.8%	0%	7.8%	․우천으로 인한 작업 대기 및 배수로 정비	구일종합건설
농업용수로 대체시설	․연장 8.6㎞ ․양수장 2개소	123	’09.12 ~ ’11.6	99.8%	0%	99.8%	․기타 보완작업 추진	농어촌 공사
교육청사 신축공사	․연면적 27천㎡ ․지상7층	477	’11.4 ~ ’12.12	1.86%	0%	1.86%	․우천으로 인한 작업 대기 및 배수로 정비	계룡 건설
경찰청사 신축공사	․연면적 20천㎡ ․지상7층	139	’11.5 ~ ’13.09	1.15%	0%	1.15%	․우천으로 인한 작업 대기 및 배수로 정비	장위 건설
롯데캐슬 건립공사	․연면적 144천㎡ ․지상15~20층	1,827	’11.1 ~ ’12.12	16.9%	0.8%	17.7%	․우천에 의한 작업대기 ․벽체철근조립	롯데 건설