충남도청(내포)신도시 개발사업 주간공정 보고

(2011. 09. 22일 현재)

공사명	공사 개요	공사비 (억원)	사업기간	진도(%)			사업추진 내 용	시공사
				전주	금주	누계 계획
도청및의회청사 건립공사	․연면적 104천㎡ ․지상7층	2,327	’08.12 ~ ’12.12	52.9%	2.3%	55.2% 58.8%	․각동 내부 조적, 미장, 방수, 전기입선 등	계룡 건설
2-1공구 조성공사	․면적 994천㎡	330	’09.5 ~ ’13.5	69.2%	1.3%	70.5% 72.1%	․이주자단지 우수 관로 부설(D450)	현대 건설
2-2공구 조성공사	․면적 881천㎡	425	’10.4 ~ ’13.10	33.7%	1.2%	34.9% 36.1%	․신경천 낙차공 설치	극동 건설
2-3공구 조성공사	․면적 1,908천㎡	321	’10.11 ~ ’13.11	19.0%	0.3%	19.3% 19.9%	․신리1교 교대 거푸집 설치	현대 아산
지하차도 건설공사	․연장 1.275㎞	360	’10.7 ~ ’12.7	41.3%	1.4%	42.7% 44.8%	․도청사 진입도로 우회작업(토공)	진흥 기업
하수처리시설 건설공사	․용량 44,000㎡/일	663	’10.10 ~ ’13.1	26.2%	0.7%	26.9% 28.3%	․전처리시설 중간 슬라브 Con'c 타설	GS 건설
자동집하시설 건설공사	․용량 70톤/일	750	’10.10 ~ ’13.1	13.7%	0.5%	14.2% 15.0%	․1집하장 지하 2층 벽체 철근조립	포스코 건설
배수지 건설공사	․용량 30,000㎡	96	’10.10 ~ ’12.10	53.5%	1.7%	55.2% 57.9%	․계단실 중앙 도류벽 거푸집 설치	태성 건설
지장물철거	․폐기물처리, 수목이식 등	136	’09.6 ~ ’11.10	71.7%	0%	71.7% 71.7%	․건설폐기물 반출	주민생계조합
생태하천	․신경천 3.3㎞ ․목리천 2.6㎞	92	’10.12 ~ ’12.11	7.92%	0.5%	8.4% 8.4%	․신경2보 사석 면고르기	구일종합건설
농업용수로 대체시설	․연장 8.6㎞ ․양수장 2개소	123	’09.12 ~ ’11.8	99.8%	0%	99.8% 100%	․준공관련 서류 검토	농어촌 공사
교육청사 신축공사	․연면적 27천㎡ ․지상7층	477	’11.4 ~ ’12.12	1.49%	0.3%	1.79% 1.83%	․토공사 및 기초공사	계룡 건설
경찰청사 신축공사	․연면적 20천㎡ ․지상7층	344	’11.5 ~ ’13.09	1.92%	0.35%	2.27% 3.27%	․토공사 및 기초공사	장위 건설
롯데캐슬 건립공사	․연면적 144천㎡ ․지상15~20층	1,827	’11.1 ~ ’12.12	26.3%	0.5%	26.8% 27.2%	․지하층 골조공사 ․각 동1~6층 골조공사	롯데 건설
연결도로 (609호선)	․홍성측 0.67km ․덕산측 0.35km	126	’09.12 ~ ’12.09	8.5%	0.7%	9.2% 12.5%	․2공구 BOX BL-4 슬래브 Con'c타설	명보 개발

공사명	공사 개요	공사비 (억원)	사업기간	진도(%)			사업추진 내 용	시공사
				전주	금주	누계 계획
진입도로 개설공사 (8.43km)	홍성: 4.43km	1,230	’11.7 ~ ’14.6			-	․협의취득 352건/131억원(72%)	동성 건설
	예산: 4.0km					-	․감정평가 금액 산정 ․시공측량완료
LH 1-1공구 조성공사	․면적 1,468천㎡	459	’11.8 ~ ’14.7	-	-	- -	․사무소 건립 공사중 ․시공측량중	코오롱 건설