내포신도시 개발사업 주간공정 보고

(2011. 10. 6일 현재)

공사명	공사 개요	공사비 (억원)	사업기간	진도(%)			사업추진 내 용	시공사
				전주	금주	누계 계획
도 청 사 건립공사	․연면적 104천㎡ ․지상 7층	2,327	’08.12 ~ ’12.12	55.9%	1.0%	56.9% 60.9%	․각동 내부 조적, 미장, 방수, 전기입선 등	계룡 건설
2-1공구 조성공사	․면적 994천㎡	330	’09. 5 ~ ’13. 5	71.4%	0.6%	72.0% 73.5%	․이주자단지 우수관로 부설(D450)	현대 건설
2-2공구 조성공사	․면적 881천㎡	425	’10. 4 ~ ’13.10	36.0%	1.4%	37.4% 37.4%	․신경천 낙차공 설치	극동 건설
2-3공구 조성공사	․면적 1,908천㎡	321	’10.11 ~ ’13.11	20.3%	0.5%	20.8% 21.1%	․신리1교 교대 거푸집 설치	현대 아산
1-1공구 조성공사	․면적 1,468천㎡	459	’11. 8 ~ ’14. 7	0.8%	0.2%	1.0% 1.0%	․시공측량 중 ․토공착수	코오롱 건설
지하차도 건설공사	․연장 1.275㎞	360	’10. 7 ~ ’12. 7	47.0%	2.9%	49.9% 52.3%	․도청사 진입도로 우회작업(토공)	진흥 기업
하수처리시설 건설공사	․용량 44천톤/일	663	’10.10 ~ ’13. 1	27.6%	1.0%	28.6% 29.5%	․전처리시설 방수 작업	GS 건설
자동집하시설 건설공사	․용량 70톤/일	750	’10.10 ~ ’13. 1	14.8%	0.3%	15.1% 17.8%	․제1집하장 지하 2층 벽체 철근조립	포스코 건설
배 수 지 건설공사	․용량 30,000㎡	96	’10.10 ~ ’12.10	56.1%	1.4%	57.5% 60.5%	․구조물 중앙 동바리 설치	태성 건설
생태하천 조성공사	․신경천 3.3㎞ ․목리천 2.6㎞	92	’10.12 ~ ’12.11	8.6%	0.7%	9.3% 9.3%	․신경1보 돌 붙임 Con'c 타설	구일종합건설
교육청사 신축공사	․연면적 27천㎡ ․지상 7층	477	’11.4 ~ ’12.12	2.0%	0.7%	2.7% 2.7%	․기초공사 및 지하층 구조물 공사	계룡 건설
경찰청사 신축공사	․연면적 20천㎡ ․지상 7층	344	’11. 5 ~ ’13. 9	2.4%	0.9%	3.3% 4.1%	․기초공사 및 지하층 구조물 공사	장위 건설
롯데APT 건립공사	․연면적 144천㎡ ․지상15~20층	1,827	’11. 1 ~ ’12.12	27.1%	1.1%	28.2% 29.0%	․지하층 골조공사 ․각 동1~6층 골조공사	롯데 건설
연결도로 (609호선)	․홍성측 0.67km ․덕산측 0.35km	126	’09.12 ~ ’12. 9	9.3%	0.6%	9.9% 13.8%	․2공구 BOX BL-4 슬래브 Con'c타설	명보 개발
진입도로 (8.43km)	․홍성측 4.43km ․덕산측 4.00km	1,230	’11. 7 ~ ’14. 6	0.5%	0.5%	1.0% 1.0%	․홍성: 토지협의취득 414건/145억원(80%) ․예산: 감정평가액 산정 시공측량	동성 건설