내포신도시 개발사업 주간공정 보고

(2011. 10. 20일 현재)

공사명	공사 개요	공사비 (억원)	사업기간	진도(%)			사업추진 내 용	시공사
				전주	금주	누계 계획
도 청 사 건립공사	․연면적 104천㎡ ․지상 7층	2,327	’08.12 ~ ’12.12	57.6%	0.5%	58.1% 62.5%	․각동 내부 조적, 미장, 방수, 전기입선 등	계룡 건설
2-1공구 조성공사	․면적 994천㎡	330	’09. 5 ~ ’13. 5	72.7%	0.7%	73.4% 75.0%	․이주자단지 우수관로 부설(D450)	현대 건설
2-2공구 조성공사	․면적 881천㎡	425	’10. 4 ~ ’13.10	37.8%	1.8%	39.6% 38.9%	․상수관로 터파기 및 관부설(중로1-5)	극동 건설
2-3공구 조성공사	․면적 1,908천㎡	321	’10.11 ~ ’13.11	21.6%	0.7%	22.3% 22.3%	․신리1교 슬라브 철근 및 거푸집 조립	현대 아산
1-1공구 조성공사	․면적 1,468천㎡	459	’11. 8 ~ ’14. 7	1.2%	0.3%	1.5% 1.5%	․시공측량 실시 ․이택지 토공사	코오롱 건설
지하차도 건설공사	․연장 1.275㎞	360	’10. 7 ~ ’12. 7	51.5%	2.3%	53.8% 56.5%	․31~38BL 터파기 및 상차	진흥 기업
하수처리시설 건설공사	․용량 44천톤/일	663	’10.10 ~ ’13. 1	29.6%	1.1%	30.7% 32.7%	․전처리시설 지하1층 벽체철근 조립	GS 건설
자동집하시설 건설공사	․용량 70톤/일	750	’10.10 ~ ’13. 1	15.6%	0.1%	15.7% 19.6%	․제1집하장 지하 2층 벽체 및 슬라브 철근조립	포스코 건설
배 수 지 건설공사	․용량 30,000㎡	96	’10.10 ~ ’12.10	58.6%	2.0%	60.6% 63.7%	․구조물 중앙 슬라브 철근조립	태성 건설
생태하천 조성공사	․신경천 3.3㎞ ․목리천 2.6㎞	92	’10.12 ~ ’12.11	10.4%	1.0%	11.4% 11.3%	․신경#1낙차공벽체 거푸집조립	구일종합건설
교육청사 신축공사	․연면적 27천㎡ ․지상 7층	477	’11.4 ~ ’12.12	3.1%	0.1%	3.2% 3.2%	․지하층 기초 철근가공	계룡 건설
경찰청사 신축공사	․연면적 20천㎡ ․지상 7층	344	’11. 5 ~ ’13. 9	3.5%	0.8%	4.3% 5.2%	․지하층 기초 철근가공	장위 건설
롯데APT 건립공사	․연면적 144천㎡ ․지상15~20층	1,827	’11. 1 ~ ’12.12	29.4%	0.5%	29.9% 30.9%	․골조공사(지상1층 및 10층골조) 추진	롯데 건설
연결도로 (609호선)	․홍성측 0.67km ․덕산측 0.35km	126	’09.12 ~ ’12. 9	10.4%	0.8%	11.2% 15.2%	․배수로 터파기, 집수정설치 토공사 4,500㎥	명보 개발
진입도로 (8.43km)	․홍성측 4.43km ․덕산측 4.00km	1,230	’11. 7 ~ ’14. 6	1.2%	0.1%	1.3% 1.3%	․홍성: 토지협의취득 / 150억원(83%) ․예산: 토지협의취득 / 18억(12%)	동성 건설