내포신도시 개발사업 주간공정 보고

(2012. 06. 14일 현재)

공사명	공 사 개 요	공사비 (억원)	사 업 기 간	진도(%)			사업추진 내 용	시공사
				전주	금주	누계 계획
도 청 사 건립공사	․연면적 104천㎡ ․지상 7층	2,327	’08.12 ~ ’12.12	85.8%	0.7%	86.5% 87.2%	․내부공간 인테리어 및 조경구조물, 식재공사	계룡 건설
교육청사 신축공사	․연면적 27천㎡ ․지상 7층	477	’11.4 ~ ’12.12	39.2%	2.3%	41.5% 41.7%	․청사동 7층 골조작업 ․외부 석공사 및 방수	계룡 건설
경찰청사 신축공사	․연면적 20천㎡ ․지상 7층	344	’11. 5 ~ ’13. 9	34.8%	0.1%	34.9% 34.8%	․본관동 7층(좌측) 기둥, 옹벽 철근 배근	장위 건설
2-1공구 조성공사	․면적 994천㎡	344	’09. 5 ~ ’13. 5	80.9%	0.9%	81.8% 79.6%	․대로1-2 기층 포장 ․이주자택지 골재 포설	현대 건설
2-2공구 조성공사	․면적 881천㎡	423	’10. 4 ~ ’13.10	65.4%	1.7%	67.1% 63.7%	․상아2교 슬라브 철근 조립	극동 건설
2-3공구 조성공사	․면적 1,908천㎡	321	’10.11 ~ ’13.11	43.7%	1.4%	45.1% 42.6%	․지방도609호선 우회 도로 포장	현대 아산
1-1공구 조성공사	․면적 1,468천㎡	459	’11. 8 ~ ’14. 7	28.3%	0.7%	29.0% 28.8%	․이주자택지 관로부설 및 대로1-1 보조기층 포설	코오롱 건설
3-2공구 조성공사	․면적 1,180천㎡	310	’12. 1 ~ ’15. 1	11.9%	1.0%	12.9% 12.8%	․토공사 및 송수관로 공사	동성 건설
지하차도 건설공사	․연장 1.275㎞	359	’10. 7 ~ ’12. 7	84.9%	2.0%	86.9% 85.0%	․BL26~36 뒷채움 및 노체성토 다짐	진흥 기업
하수처리시설 건설공사	․용량 44천톤/일	664	’10.10 ~ ’13. 4	60.6%	0.1%	60.7% 58.4%	․관리동 내부 마감공사 ․전처리시설 전기공사	G S 건설
자동집하시설 건설공사	․집하장 2개소 ․이송관로40.2㎞	750	’10.10 ~ ’13. 4	26.4%	0.4%	26.8% 26.4%	․제1집하장 지붕층 Con'c 타설	포스코 건설
배 수 지 건설공사	․용량 30,000㎡	105	’10.10 ~ ’12.10	81.4%	1.6%	83.0% 80.8%	․배수관로 되메우기 ․배수지 내부방수	태성 건설
생태하천 조성공사	․신경천 3.3㎞ ․목리천 2.6㎞	92	’10.12 ~ ’12.11	71.1%	2.4%	73.5% 70.0%	․신경천 제방법면 정리(순성토 반입)	구일종합건설
조경공사	․2구역 (3,783천㎡)	329	’12. 1 ~ ’14. 1	3.2%	0.2%	3.4% 3.4%	․근린공원3호 우수 관로 부설	승화 건설
전기공사	․2구역 (3,783천㎡)	107	’12. 1 ~ ’14. 1	7.9%	0.5%	8.4% 8.3%	․가로등 배관작업	삼흥 건설
집단에너지 공급시설	․열부하량 : 392.9 Gcal/h	7,800	’11. 7 ~ ’20.12	8.41%	0.01%	8.42% 8.42%	․행정타운 주변도로 열배관 부설	롯데 건설
연결도로 (609호선)	․홍성측 0.67km ․덕산측 1.55km	447	’09.12 ~ ’12. 12	81.3%	0.4%	81.7% 81.7%	․기층 포장	한화 동우
진입도로 (8.43km)	․홍성측 4.33km ․예산측 4.10km	1,117	’11. 7 ~ ’14. 6	39.3%	0.5%	39.8% 39.8%	․삽교천교 상부공 ․산수과선교 하부공	동성 건설
(가칭)내포 초등학교	․연면적 11천㎡ ․지하1층/지상5층	148	’12. 1 ~ ’13. 2	12.6%	3.4%	16.0% 16.0%	․2층 벽체 철근 및 거푸집 조립	세광 건설
(가칭)내포 중학교	․연면적 10천㎡ ․지하1층/지상5층	130	’12. 1 ~ ’13. 2	15.3%	2.7%	18.0% 18.0%	․2층 벽체 철근 및 거푸집 조립	케이앤 건설
롯데APT 건립공사	․연면적 144천㎡ ․지상15~20층	1,827	’11. 1 ~ ’12.12	68.0%	1.1%	69.1% 69.1%	․골조공사 및 내부 마감공사 추진	롯데 건설
극동APT 건립공사	․연면적 141천㎡ ․지상13~20층	1,912	’11.11 ~ ’13.12	5.5%	0.6%	6.1% 6.1%	․지하 2층 기초공사	극동 건설
효성APT 건립공사	․연면적 137천㎡ ․지상18~26층	1,882	’12.05 ~ ’14.09	0.5%	0.2%	0.7% 0.7%	․토공사 및 가시설 공사	진흥 기업