내포신도시 개발사업 주간공정 보고

(2012. 06. 28일 현재)

공사명	공 사 개 요	공사비 (억원)	사 업 기 간	진도(%)			사업추진 내 용	시공사
				전주	금주	누계 계획
도 청 사 건립공사	․연면적 104천㎡ ․지상 7층	2,327	’08.12 ~ ’12.12	86.9%	2.0%	88.9% 89%	․내부공간 인테리어 및 조경구조물, 식재공사	계룡 건설
교육청사 신축공사	․연면적 27천㎡ ․지상 7층	477	’11.4 ~ ’12.12	42.2%	2.3%	44.5% 45.0%	․외부 석공사 및 내부 마감공사	계룡 건설
경찰청사 신축공사	․연면적 20천㎡ ․지상 7층	344	’11. 5 ~ ’13. 9	35.3%	0.9%	36.2% 36.1%	․본관동 지붕층 Con'c 타설	장위 건설
2-1공구 조성공사	․면적 994천㎡	344	’09. 5 ~ ’13. 5	82.6%	0.7%	83.3% 81.0%	․공공공지3 잔디식재 ․대로101 노상작업	현대 건설
2-2공구 조성공사	․면적 881천㎡	423	’10. 4 ~ ’13.10	67.3%	0.6%	67.9% 64.7%	․상아2교 뒷채움 및 다짐	극동 건설
2-3공구 조성공사	․면적 1,908천㎡	321	’10.11 ~ ’13.11	46.4%	0.9%	47.3% 44.7%	․신경5교 접속슬라브 Con'c 타설	현대 아산
1-1공구 조성공사	․면적 1,468천㎡	459	’11. 8 ~ ’14. 7	31.6%	0.3%	31.9% 30.9%	․대로1-1 경계석설치 및보조기층 포설	코오롱 건설
3-2공구 조성공사	․면적 1,180천㎡	310	’12. 1 ~ ’15. 1	14.0%	0.5%	14.5% 14.0%	․토공사 및 구조물공사	동성 건설
지하차도 건설공사	․연장 1.275㎞	359	’10. 7 ~ ’12. 7	88.1%	0.4%	88.5% 87.7%	․BL34~36 노체다짐 및 면정리	진흥 기업
하수처리시설 건설공사	․용량 44천톤/일	664	’10.10 ~ ’13. 4	61.6%	1.0%	62.6% 60.3%	․진입램프 벽체, 슬래브 Con'c 타설	G S 건설
자동집하시설 건설공사	․집하장 2개소 ․이송관로40.2㎞	750	’10.10 ~ ’13. 4	27.2%	0.7%	27.9% 27.8%	․제1집하장 구조물 되메우기	포스코 건설
배 수 지 건설공사	․용량 30,000㎡	105	’10.10 ~ ’12.10	84.1%	0.7%	84.8% 82.8%	․배수지 내부방수 ․계단실 외부 마감공사	태성 건설
생태하천 조성공사	․신경천 3.3㎞ ․목리천 2.6㎞	92	’10.12 ~ ’12.11	74.5%	2.2%	76.7% 73.7%	․신경천 제방법면 정리(거적덮기 시공)	구일종합건설
조경공사	․2구역 (3,783천㎡)	329	’12. 1 ~ ’14. 1	3.6%	0.1%	3.7% 4.3%	․광장10호 화강석판석 포장 시공	승화 건설
전기공사	․2구역 (3,783천㎡)	107	’12. 1 ~ ’14. 1	9.0%	0.7%	9.7% 9.6%	․가로등 기초매입 및 배관 공사	삼흥 건설
집단에너지 공급시설	․열부하량 : 392.9 Gcal/h	7,800	’11. 7 ~ ’20.12	8.43%	0.01%	8.44% 8.44%	․임시보일러 설치	롯데 건설
연결도로 (609호선)	․홍성측 0.67km ․덕산측 1.55km	447	’09.12 ~ ’12. 12	82.1%	0.4%	82.5% 82.5%	․기층 포장	한화 동우
진입도로 (8.43km)	․홍성측 4.33km ․예산측 4.10km	1,117	’11. 7 ~ ’14. 6	40.3%	0.5%	40.8% 40.8%	․삽교천교 상부공 ․산수과선교 하부공	동성 건설
(가칭)내포 초등학교	․연면적 11천㎡ ․지하1층/지상5층	148	’12. 1 ~ ’13. 2	17.1%	2.0%	19.1% 19.1%	․3층 벽체 철근 및 거푸집 조립	세광 건설
(가칭)내포 중학교	․연면적 10천㎡ ․지하1층/지상5층	130	’12. 1 ~ ’13. 2	18.7%	1.4%	20.1% 20.1%	․3층 벽체 철근 및 거푸집 조립	케이앤 건설
롯데APT 건립공사	․연면적 144천㎡ ․지상15~20층	1,827	’11. 1 ~ ’12.12	70.1%	0.9%	71.0% 71.0%	․골조공사 및 내부 마감공사 추진	롯데 건설
극동APT 건립공사	․연면적 141천㎡ ․지상13~20층	1,912	’11.11 ~ ’13.12	6.7%	0.6%	7.3% 7.3%	․지하 2층 기초공사	극동 건설
효성APT 건립공사	․연면적 137천㎡ ․지상18~26층	1,882	’12.05 ~ ’14.09	0.9%	0.2%	1.1% 1.1%	․토공사 및 가시설 공사	진흥 기업