내포신도시 개발사업 주간공정 보고

(2012. 07. 26일 현재)

공사명	공 사 개 요	공사비 (억원)	사 업 기 간	진도(%)			사업추진 내 용	시공사
				전주	금주	누계 계획
도 청 사 건립공사	․연면적 104천㎡ ․지상 7층	2,327	’08.12 ~ ’12.12	91.7%	0.3%	92% 92.2%	․내부 각실 인테리어 및 외장마감 코킹	계룡 건설
교육청사 신축공사	․연면적 27천㎡ ․지상 7층	477	’11.4 ~ ’12.12	49.1%	0.8%	49.9% 50.3%	․외부 석공사 및 내부 마감공사	계룡 건설
경찰청사 신축공사	․연면적 20천㎡ ․지상 7층	344	’11. 5 ~ ’13. 9	38.6%	0.2%	38.8% 38.7%	․본관동 지붕층 철근 및 거푸집 조립	장위 건설
2-1공구 조성공사	․면적 994천㎡	344	’09. 5 ~ ’13. 5	84.3%	0.6%	84.9% 82.4%	․이주자택지 경계석 시공 및 지하식 소화전 설치	현대 건설
2-2공구 조성공사	․면적 881천㎡	423	’10. 4 ~ ’13.10	69.0%	0.1%	69.1% 65.9%	․상하 1․2교 보도부 콘크리트 타설	극동 건설
2-3공구 조성공사	․면적 1,908천㎡	321	’10.11 ~ ’13.11	50.5%	1.0%	51.5% 48.8%	․신경5교 보도부 시공 ․대로 1-1 오수관로 시공	현대 아산
1-1공구 조성공사	․면적 1,468천㎡	459	’11. 8 ~ ’14. 7	32.7%	2.3%	35.0% 32.1%	․대로1-1 경계석설치 및보조기층 포설	코오롱 건설
3-2공구 조성공사	․면적 1,180천㎡	310	’12. 1 ~ ’15. 1	16.4%	0.9%	17.3% 15.1%	․토공사 및 구조물공사	동성 건설
지하차도 건설공사	․연장 1.275㎞	359	’10. 7 ~ ’12. 7	92.4%	0.1%	92.5% 92.4%	․계단실 되메우기 및 다짐 ․시종점부 조형물 설치	진흥 기업
하수처리시설 건설공사	․용량 44천톤/일	664	’10.10 ~ ’13. 4	66.4%	1.4%	67.8% 65.5%	․재이용시설 급기 덕트 설치	G S 건설
자동집하시설 건설공사	․집하장 2개소 ․이송관로40.2㎞	750	’10.10 ~ ’13. 4	29.7%	1.0%	30.7% 30.6%	․제2집하장 지하2층 벽체철근 가공	포스코 건설
배 수 지 건설공사	․용량 30,000㎡	105	’10.10 ~ ’12.10	86.0%	0.4%	86.4% 85.1%	․배수지 내부방수 ․U형측구 설치	태성 건설
생태하천 조성공사	․신경천 3.3㎞ ․목리천 2.6㎞	92	’10.12 ~ ’12.11	79.4%	2.0%	81.4% 80.6%	․신경천, 목리천 제방 법면 정리	구일종합건설
조경공사	․2구역 (3,783천㎡)	329	’12. 1 ~ ’14. 1	4.8%	0.1%	4.9% 7.3%	․근린공원 7호 우수 관로 관부설	승화 건설
전기공사	․2구역 (3,783천㎡)	107	’12. 1 ~ ’14. 1	11.4%	0.5%	11.9% 11.8%	․가로등 기초매입 및 배관 공사	삼흥 건설
집단에너지 공급시설	․열부하량 : 392.9 Gcal/h	7,800	’11. 7 ~ ’20.12	8.47%	0.01%	8.48% 8.48%	․154KV 맨홀설치공사	롯데 건설
연결도로 (609호선)	․홍성측 0.67km ․덕산측 1.55km	447	’09.12 ~ ’12. 12	83.7%	0.4%	84.1% 84.1%	․기층포설 및 교량 구조물공사 추진	한화 동우
진입도로 (8.43km)	․홍성측 4.33km ․예산측 4.10km	1,117	’11. 7 ~ ’14. 6	42.0%	0.2%	42.2% 42.2%	․토공사, 교량 2개소 구조물 공사	동성 건설
(가칭)내포 초등학교	․연면적 11천㎡ ․지하1층/지상5층	148	’12. 1 ~ ’13. 2	23.7%	1.8%	25.5% 25.5%	․4층 벽체 철근 및 거푸집 조립	세광 건설
(가칭)내포 중학교	․연면적 10천㎡ ․지하1층/지상5층	130	’12. 1 ~ ’13. 2	24.9%	1.9%	26.8% 26.8%	․4층 벽체 철근 및 거푸집 조립	케이앤 건설
롯데APT 건립공사	․연면적 144천㎡ ․지상15~20층	1,827	’11. 1 ~ ’12.12	73.5%	0.8%	74.3% 74.3%	․내부 마감공사 및 외부 조경공사 추진	롯데 건설
극동APT 건립공사	․연면적 141천㎡ ․지상13~20층	1,912	’11.11 ~ ’13.12	10.5%	0.8%	11.3% 11.3%	․지하 2층 기초공사	극동 건설
효성APT 건립공사	․연면적 137천㎡ ․지상18~26층	1,882	’12.05 ~ ’14.09	1.8%	0.3%	2.1% 2.1%	․토공사 및 가시설 공사	진흥 기업