내포신도시 개발사업 주간공정 보고

(2012. 8. 16일 현재)

공사명	공 사 개 요	공사비 (억원)	사 업 기 간	진도(%)			사업추진 내 용	시공사
				전주	금주	누계 계획
도 청 사 건립공사	․연면적 104천㎡ ․지상 7층	2,327	’08.12 ~ ’12.12	92.9%	0.2%	93.1% 93.1%	․내부 인테리어, 석공사 및 외장마감	계룡 건설
교육청사 신축공사	․연면적 27천㎡ ․지상 7층	477	’11.4 ~ ’12.12	54.3%	1.0%	55.3% 55.6%	․외부 석공사 및 내부 마감공사	계룡 건설
경찰청사 신축공사	․연면적 20천㎡ ․지상 7층	344	’11. 5 ~ ’13. 9	39.1%	0.1%	39.2% 39.3%	․본관 옥탑, 주차장 진입로 Con`c타설	장위 건설
2-1공구 조성공사	․면적 991천㎡	344	’09. 5 ~ ’13. 5	86.4%	0.3%	86.7% 83.9%	․이주자택지 경계석 설치	현대 건설
2-2공구 조성공사	․면적 880천㎡	423	’10. 4 ~ ’13.10	67.7%	0.1%	67.8% 66.6%	․대로2-7 경계석 시공	극동 건설
2-3공구 조성공사	․면적 1,910천㎡	321	’10.11 ~ ’13.11	52.8%	0.2%	53.0 52.1%	․대로1-1 노상성토 및 다짐	현대 아산
1-1공구 조성공사	․면적 1,369천㎡	459	’11. 8 ~ ’14. 7	40.5%	1.5%	42.0% 35.4%	․대로1-1 경계석설치 및보조기층 포설	코오롱 건설
3-2공구 조성공사	․면적 1,182천㎡	310	’12. 1 ~ ’15. 1	19.0%	0.6%	19.6% 15.6%	․토공사 및 구조물공사	동성 건설
지하차도 건설공사	․연장 1.275㎞	359	’10. 7 ~ ’12. 8	92.7%	1.2%	93.9% 92.4%	․BL34 집수정 펌프 및 배관설비 설치	진흥 기업
하수처리시설 건설공사	․용량 44천톤/일	664	’10.10 ~ ’13. 4	71.0%	1.4%	72.4% 70.2%	․진입램프 1span 상부벽체 철근 조립	G S 건설
자동집하시설 건설공사	․집하장 2개소 ․이송관로40.2㎞	750	’10.10 ~ ’13. 4	32.0%	0.4%	32.4% 32.1%	․제2집하장 철근 및 이송관로 부설	포스코 건설
배 수 지 건설공사	․용량 30,000㎡	105	’10.10 ~ ’12.10	90.9%	0.5%	91.4% 90.0%	․U형측구 및 진입로 L형측구 설치	태성 건설
생태하천 조성공사	․신경천 3.3㎞ ․목리천 2.6㎞	92	’10.12 ~ ’12.11	83.7%	1.0%	84.7% 84.0%	․신경천, 목리천 법면 정리	구일종합건설
조경공사	․2구역 (3,783천㎡)	329	’12. 1 ~ ’15. 2	5.1%	0.1%	5.2% 7.7%	․근린/어린이공원 집수정 설치	승화 건설
전기공사	․2구역 (3,783천㎡)	107	’12. 1 ~ ’15. 2	12.9%	0.5%	13.4% 13.3%	․가로등 기초매입 및 배관 공사	삼흥 건설
집단에너지 공급시설	․열부하량 : 392.9 Gcal/h	7,800	’11. 7 ~ ’20.12	8.50%	0.01%	8.51% 8.51%	․임시보일러 충수작업	롯데 건설
연결도로 (609호선)	․홍성측 0.67km ․덕산측 1.55km	447	’09.12 ~ ’12.12	84.9%	0.4%	85.3% 85.3%	․배수공 및 교량 구조물공사 추진	한화 동우
진입도로 (8.43km)	․홍성측 4.33km ․예산측 4.10km	1,117	’11. 7 ~ ’14. 6	42.6%	0.2%	42.8% 42.8%	․토공사, 교량 2개소 구조물 공사	동성 건설
(가칭)내포 초등학교	․연면적 11천㎡ ․지하1층/지상5층	148	’12. 1 ~ ’13. 2	30.8%	2.5%	33.3% 33.3%	․5층 슬라브 철근 및 거푸집 조립	세광 건설
(가칭)내포 중학교	․연면적 10천㎡ ․지하1층/지상5층	130	’12. 1 ~ ’13. 2	30.5%	2.9%	33.4% 33.4%	․5층 슬라브 철근 및 거푸집 조립	케이앤 건설
롯데APT 건립공사	․연면적 144천㎡ ․지상15~20층	1,827	’11. 1 ~ ’12.12	78.1%	1.1%	79.2% 79.2%	․내부 마감공사 및 각종 배관공사	롯데 건설
극동APT 건립공사	․연면적 141천㎡ ․지상13~20층	1,912	’11.11 ~ ’13.12	12.3%	2.0%	14.3% 14.3%	․지하층 되메우기 및 지하주차장 공사	극동 건설
효성APT 건립공사	․연면적 137천㎡ ․지상18~26층	1,882	’12.05 ~ ’14.09	2.5%	0.1%	2.6% 2.6%	․토공사 및 가시설 공사	진흥 기업