내포신도시 개발사업 주간공정 보고

(2012. 8. 23일 현재)

공사명	공 사 개 요	공사비 (억원)	사 업 기 간	진도(%)			사업추진 내 용	시공사
				전주	금주	누계 계획
도 청 사 건립공사	․연면적 104천㎡ ․지상 7층	2,327	’08.12 ~ ’12.12	93.1%	0.3%	93.4% 93.4%	․내부 인테리어, 석공사 및 외장마감	계룡 건설
교육청사 신축공사	․연면적 27천㎡ ․지상 7층	477	’11.4 ~ ’12.12	55.3%	2.4%	57.7% 58.1%	․외부 석공사 및 내부 마감공사	계룡 건설
경찰청사 신축공사	․연면적 20천㎡ ․지상 7층	344	’11. 5 ~ ’13. 9	39.2%	0.1%	39.3% 39.4%	․본관 옥탑, 주차장 진입로 Con`c타설	장위 건설
2-1공구 조성공사	․면적 991천㎡	344	’09. 5 ~ ’13. 5	86.7%	0.3%	87.0% 84.3%	․이주자택지 경계석 설치	현대 건설
2-2공구 조성공사	․면적 880천㎡	423	’10. 4 ~ ’13.10	67.8%	0.2%	68.0% 66.8%	․우수받이 및 연결관 설치	극동 건설
2-3공구 조성공사	․면적 1,910천㎡	321	’10.11 ~ ’13.11	53.0%	0.2%	53.2 51.7%	․대로2-7 우수관로 부설 및 되메우기	현대 아산
1-1공구 조성공사	․면적 1,369천㎡	459	’11. 8 ~ ’14. 7	42.0%	0.5%	42.5% 35.5%	․대로1-1 경계석설치 및보조기층 포설	코오롱 건설
3-2공구 조성공사	․면적 1,182천㎡	310	’12. 1 ~ ’15. 1	19.6%	1.0%	20.6% 15.9%	․토공사 및 구조물공사	동성 건설
지하차도 건설공사	․연장 1.275㎞	359	’10. 7 ~ ’12. 8	93.9%	0.1%	94.0% 98.0%	․집수정 및 전기실 출입문 설치	진흥 기업
하수처리시설 건설공사	․용량 44천톤/일	664	’10.10 ~ ’13. 4	72.4%	1.6%	74.0% 71.9%	․관리동 1층 미장 및 생물반응조 트레이 설치	G S 건설
자동집하시설 건설공사	․집하장 2개소 ․이송관로40.2㎞	750	’10.10 ~ ’13. 4	32.4%	1.3%	33.7% 32.7%	․제1집하장 내부마감 및 기자재 반입	포스코 건설
배 수 지 건설공사	․용량 30,000㎡	105	’10.10 ~ ’12.10	91.4%	0.3%	91.7% 90.4%	․U형측구 및 진입로 L형측구 설치	태성 건설
생태하천 조성공사	․신경천 3.3㎞ ․목리천 2.6㎞	92	’10.12 ~ ’13.01	84.7%	0.8%	85.5% 85.2%	․신경천, 목리천 법면 정리	구일종합건설
조경공사	․2구역 (3,783천㎡)	329	’12. 1 ~ ’15. 2	5.2%	0.1%	5.3% 7.9%	․근린/어린이공원 앉음벽 설치	승화 건설
전기공사	․2구역 (3,783천㎡)	107	’12. 1 ~ ’15. 2	13.4%	0.3%	13.7% 13.6%	․신리1교, 상아2교 경관 조명 Box 청소	삼흥 건설
집단에너지 공급시설	․열부하량 : 392.9 Gcal/h	7,800	’11. 7 ~ ’20.12	8.51%	0.01%	8.52% 8.52%	․임시보일러 공급개시	롯데 건설
연결도로 (609호선)	․홍성측 0.67km ․덕산측 1.55km	447	’09.12 ~ ’12. 12	85.3%	0.4%	85.7% 85.7%	․기층포설 및 교량 구조물공사 추진	한화 동우
진입도로 (8.43km)	․홍성측 4.33km ․예산측 4.10km	1,117	’11. 7 ~ ’14. 6	42.8%	0.2%	43.0% 43.0%	․토공사, 교량 및 암거공사	동성 건설
(가칭)내포 초등학교	․연면적 11천㎡ ․지하1층/지상5층	148	’12. 1 ~ ’13. 2	33.3%	0.9%	34.2% 34.2%	․5층 슬라브 철근 및 거푸집 조립	세광 건설
(가칭)내포 중학교	․연면적 10천㎡ ․지하1층/지상5층	130	’12. 1 ~ ’13. 2	33.4%	0.8%	34.2% 34.2%	․5층 슬라브 철근 및 거푸집 조립	케이앤 건설
롯데APT 건립공사	․연면적 144천㎡ ․지상15~20층	1,827	’11. 1 ~ ’12.12	79.2%	0.8%	80.0% 80.0%	․내부 마감공사 및 각종 배관공사	롯데 건설
극동APT 건립공사	․연면적 141천㎡ ․지상13~20층	1,912	’11.11 ~ ’13.12	14.3%	0.8%	15.1% 15.1%	․지하층 되메우기 및 지하주차장 공사	극동 건설
효성APT 건립공사	․연면적 137천㎡ ․지상18~26층	1,882	’12.05 ~ ’14.09	2.6%	0.1%	2.7% 2.7%	․토공사 및 가시설 공사	진흥 기업