내포신도시 개발사업 주간공정 보고

(2012. 9. 13. 현재)

공사명	공 사 개 요	공사비 (억원)	사 업 기 간	진도(%)			사업추진 내 용	시공사
				전주	금주	누계 계획
도 청 사 건립공사	․연면적 104천㎡ ․지상 7층	2,327	’08.12 ~ ’12.12	94.2%	0.5%	94.7% 94.7%	․내부 인테리어, 석공사 및 외장마감	계룡 건설
교육청사 신축공사	․연면적 27천㎡ ․지상 7층	477	’11.4 ~ ’12.12	62.1%	0.5%	62.6% 63.2%	․외부 석공사 및 내부 마감공사	계룡 건설
경찰청사 신축공사	․연면적 20천㎡ ․지상 7층	344	’11. 5 ~ ’13. 9	40.0%	2.0%	42.0% 42.2%	․본관동 케노피, 주차장 토공/골재 포설	장위 건설
2-1공구 조성공사	․면적 991천㎡	344	’09. 5 ~ ’13. 5	87.9%	0.3%	88.2% 85.6%	․이주자택지 경계석 시공	현대 건설
2-2공구 조성공사	․면적 880천㎡	423	’10. 4 ~ ’13.10	68.4%	0.8%	69.2% 68.6%	․상아2교 콘크리트 타설 ․상아천 시설물 설치	극동 건설
2-3공구 조성공사	․면적 1,910천㎡	321	’10.11 ~ ’13.11	54.4%	0.9%	55.3% 54.1%	․대로1-1 경계석 시공 및 노체, 노상 다짐	현대 아산
1-1공구 조성공사	․면적 1,369천㎡	459	’11. 8 ~ ’14. 7	43.4%	1.9%	45.3% 36.5%	․대로1-1 경계석설치 및 도로 포장	코오롱 건설
3-2공구 조성공사	․면적 1,182천㎡	310	’12. 1 ~ ’15. 1	21.0%	0.6%	21.6% 17.2%	․토공사 및 관로공사	동성 건설
지하차도 건설공사	․연장 1.275㎞	359	’10. 7 ~ ’12. 8	94.0%	0%	94.0% 98.0%	․공사중지	진흥 기업
하수처리시설 건설공사	․용량 44천톤/일	664	’10.10 ~ ’13. 4	77.3%	2.8%	80.1% 78.9%	․관리동 마감공사 및 용수배관 설치	G S 건설
자동집하시설 건설공사	․집하장 2개소 ․이송관로40.2㎞	750	’10.10 ~ ’13. 4	34.2%	2.1%	36.3% 35.9%	․제2집하장 철근 및 이송관로 부설	포스코 건설
배 수 지 건설공사	․용량 30,000㎡	105	’10.10 ~ ’12.10	96.1%	0.6%	96.7% 94.9%	․진입로 L형측구 설치 ․배수지 보도 포장	태성 건설
생태하천 조성공사	․신경천 3.3㎞ ․목리천 2.6㎞	92	’10.12 ~ ’13.01	87.9%	1.1%	89.0% 88.8%	․신경천, 목리천 법면 정리	구일종합건설
조경공사	․2구역 (3,783천㎡)	349	’12. 1 ~ ’17. 2	5.8%	0.3%	6.1% 8.7%	․근린공원 4호 앉음벽 설치	승화 건설
전기공사	․2구역 (3,783천㎡)	127	’12. 1 ~ ’15. 2	14.2%	0.4%	14.6% 14.5%	․중로3-22 가로등기초 배관작업 추진	삼흥 건설
집단에너지 공급시설	․열부하량 : 392.9 Gcal/h	7,800	’11. 7 ~ ’20.12	8.54%	0%	8.54% 8.54%	․비지니스파크, 중심상업(LH), 열배관공사	롯데 건설
연결도로 (609호선)	․홍성측 0.67km ․덕산측 1.55km	447	’09.12 ~ ’12. 12	86.2%	0.8%	87.0% 87.0%	․부체도로 토공사 추진	한화 동우
진입도로 (8.43km)	․홍성측 4.33km ․예산측 4.10km	1,117	’11. 7 ~ ’14. 6	43.2%	0.3%	43.5% 43.5%	․주령, 응봉교 철근조립 ․삽교천교 거푸집해체	동성 건설
(가칭)내포 초등학교	․연면적 11천㎡ ․지하1층/지상5층	148	’12. 1 ~ ’13. 2	35.0%	0.9%	35.9% 35.9%	․5층 지붕슬라브 철근 및 거푸집 조립	세광 건설
(가칭)내포 중학교	․연면적 10천㎡ ․지하1층/지상5층	130	’12. 1 ~ ’13. 2	34.9%	0.9%	35.8% 35.8%	․5층 지붕슬라브 철근 및 거푸집 조립	케이앤 건설
롯데APT 건립공사	․연면적 144천㎡ ․지상15~20층	1,827	’11. 1 ~ ’12.12	81.9%	0.7%	82.6% 82.6%	․내부 마감공사 및 각종 배관공사	롯데 건설
극동APT 건립공사	․연면적 141천㎡ ․지상13~20층	1,912	’11.11 ~ ’13.12	15.3%	0.1%	15.4% 15.3%	․지하주차장 구조물 공사 및 배수로 정비	극동 건설
효성APT 건립공사	․연면적 137천㎡ ․지상18~26층	1,882	’12.05 ~ ’14.09	2.9%	0.2%	3.1% 3.1%	․토공사 및 가시설 공사	진흥 기업