내포신도시 개발사업 주간공정 보고

(2012. 10. 04. 현재)

공사명	공 사 개 요	공사비 (억원)	사 업 기 간	진도(%)			사업추진 내 용	시공사
				전주	금주	누계 계획
도 청 사 건립공사	․연면적 104천㎡ ․지상 7층	2,327	’08.12 ~ ’12.12	97.8%	0.7%	98.5% 98.5%	․인테리어 마감작업 및 조경블록 포장	계룡 건설
교육청사 신축공사	․연면적 27천㎡ ․지상 7층	477	’11.4 ~ ’12.12	64.7%	1.2%	65.9% 65.9%	․외부 석공사 및 내부 마감공사	계룡 건설
경찰청사 신축공사	․연면적 20천㎡ ․지상 7층	344	’11. 5 ~ ’13. 9	46.9%	1.4%	48.3% 48.3%	․본관동 케노피, 주차장 토공/골재 포설	장위 건설
2-1공구 조성공사	․면적 991천㎡	344	’09. 5 ~ ’13. 5	88.9%	0.4%	89.3% 86.7%	․이주자택지 경계석 시공	현대 건설
2-2공구 조성공사	․면적 880천㎡	424	’10. 4 ~ ’13.10	70.5%	0.2%	70.7% 70.6%	․경계석 및 L형측구 시공	극동 건설
2-3공구 조성공사	․면적 1,910천㎡	321	’10.11 ~ ’13.11	57.2%	0.2%	57.4% 56.8%	․관사 진입로 자연석 시공	현대 아산
1-1공구 조성공사	․면적 1,468천㎡	459	’11. 8 ~ ’14. 7	46.5%	0.1%	46.6% 38.5%	․대로1-1 경계석설치 및 도로 포장	코오롱 건설
3-2공구 조성공사	․면적 1,182천㎡	310	’12. 1 ~ ’15. 1	23.5%	0.6%	24.1% 19.2%	․토공사 및 관로공사	동성 건설
하수처리시설 건설공사	․용량 44천톤/일	664	’10.10 ~ ’13. 4	86.0%	1.9%	87.9% 87.6%	․관리동 마감공사 및 용수배관 설치	G S 건설
자동집하시설 건설공사	․집하장 2개소 ․이송관로40.2㎞	750	’10.10 ~ ’13.10	37.1%	0%	37.1% 36.6%	․제2집하장 철근 및 이송관로 부설	포스코 건설
배 수 지 건설공사	․용량 30,000㎡	96	’10.10 ~ ’12.10	97.6%	0.1%	97.7% 96.0%	․휀스 설치	태성 건설
지 구 외 생태하천	․신경천 1.72㎞ ․목리천 0.63㎞	16	’10.12 ~ ’13.01	91.5%	0.7%	92.2% 92.0%	․신경천, 목리천 법면 정리	구일종합건설
조경공사	․2구역 (1,062천㎡)	349	’12. 1 ~ ’17. 2	7.1%	0.3%	7.4% 10.2%	․근린공원3호 데크A 시공	승화 건설
전기공사	․2구역 (3,783천㎡)	127	’12. 1 ~ ’15. 2	15.5%	0.3%	15.8% 15.7%	․대로1-1 가로등기초 배관작업 추진	삼흥 건설
집단에너지 공급시설	․열부하량 : 392.9 Gcal/h	7,800	’11. 7 ~ ’20.12	8.57%	0.01%	8.58% 8.58%	․2-3공구(학교구간) 열배관 공사	롯데 건설
연결도로 (609호선)	․홍성측 0.67km ․덕산측 1.55km	447	’09.12 ~ ’12. 12	88.0%	0.2%	88.2% 88.2%	․신리교차로 배수관 부설 ․봉신교 가설벤트 설치	한화 동우
진입도로 (8.43km)	․홍성측 4.33km ․예산측 4.10km	1,117	’11. 7 ~ ’14. 6	44.2%	0.1%	44.3% 44.3%	․주령교,응봉교 거푸집 설치 ․산수과선교 거푸집 해체	동성 건설
(가칭)내포 초등학교	․연면적 11천㎡ ․지하1층/지상5층	148	’12. 1 ~ ’13. 2	37.3%	0.1%	37.4% 37.4%	․내부 조적공사 및 전기설비 공사	세광 건설
(가칭)내포 중학교	․연면적 10천㎡ ․지하1층/지상5층	130	’12. 1 ~ ’13. 2	37.2%	0.1%	37.3% 37.3%	․내부 조적공사 및 전기설비 공사	케이앤 건설
롯데APT 건립공사	․연면적 144천㎡ ․지상15~20층	1,827	’11. 1 ~ ’12.12	85.0%	2.2%	87.2% 85.0%	․내부 마감공사 및 각종 배관공사	롯데 건설
극동APT 건립공사	․연면적 141천㎡ ․지상13~20층	1,912	’11.11 ~ ’13.12	15.6%	0.1%	15.7% 15.7%	․공사중지	극동 건설
효성APT 건립공사	․연면적 137천㎡ ․지상18~26층	1,882	’12.05 ~ ’14.09	3.5%	0.1%	3.6% 3.6%	․토공사 및 가시설 공사	진흥 기업