내포신도시 개발사업 주간공정 보고

(2012. 11. 15. 현재)

공사명	공 사 개 요	공사비 (억원)	사 업 기 간	진도(%)			사업추진 내 용	시공사
				전주	금주	누계 계획
도 청 사 건립공사	․연면적 104천㎡ ․지상 7층	2,327	’08.12 ~ ’12.12	99.6	0.1	99.7 99.7	·각 동 마무리공사 추진	계룡 건설
교육청사 신축공사	․연면적 27천㎡ ․지상 7층	477	’11.4 ~ ’12.12	80.0	1.8	81.8 81.8	·다목적홀 천정 내장작업 ·각실 덕트 설치	계룡 건설
경찰청사 신축공사	․연면적 20천㎡ ․지상 7층	344	’11. 5 ~ ’13. 9	54.6	0.4	55.0 55.0	·본관동 6층 유닛판넬 시공	장위 건설
2-1공구 조성공사	․면적 991천㎡	344	’09. 5 ~ ’13. 5	90.9	0.4	91.3 88.6	·대1-1 아스콘 중간층 포장 ·대2-5 우수관로/맨홀 제작	현대 건설
2-2공구 조성공사	․면적 880천㎡	424	’10. 4 ~ ’13.10	74.1	1.0	75.1 75.1	·중1-3 보조기층 포설 ·상아천 고수호안 자연석 시공	극동 건설
2-3공구 조성공사	․면적 1,910천㎡	321	’10.11 ~ ’13.11	61.1	0.9	62.0 61.8	·대1-1 표층 포장 ·대3-6 우수받이 설치	현대 아산
1-1공구 조성공사	․면적 1,422천㎡	467	’11. 8 ~ ’14. 7	49.5	0.4	49.9 42.9	·대1-1 지하차도 상부 중간층 포설 및 3구역 보도부 골재포설	코오롱 건설
3-2공구 조성공사	․면적 1,182천㎡	310	’12. 1 ~ ’15. 1	28.4	0.6	29.0 22.5	·토공사 및 관로공사	동성 건설
하수처리시설 건설공사	․용량 44천톤/일	664	’10.10 ~ ’13. 4	85.7	0.3	86.0 84.6	·진입램프 기초 철근 조립	G S 건설
자동집하시설 건설공사	․집하장 2개소 ․이송관로40.2㎞	750	’10.10 ~ ’13.10	40.4	1.6	42.0 41.2	·2집하장 지하1층 바닥 보 및 슬라브 거푸집 시공	포스코 건설
지 구 외 생태하천	․신경천 1.72㎞ ․목리천 0.63㎞	16	’10.12 ~ ’13.01	95.9	0	95.9 96.2	·현장안전순찰	구일종합건설
조경공사	․2구역 (1,062천㎡)	349	’12. 2 ~ ’17. 2	12.0	1.6	13.6 14.3	·근린3,4호 점토블럭포장 ·대1-1 중분대 소나무 식재	승화 건설
전기공사	․2구역 (3,783천㎡)	127	’12. 2 ~ ’15. 2	18.1	1.1	19.2 19.1	·중1-14 가로등 배선작업 ·대1-2 가로등기구 설치	삼흥 전력
집단에너지 공급시설	․열부하량 : 392.9 Gcal/h	7,800	’11. 7 ~ ’20.12	8.63	0.01	8.64 8.64	·대로1-2 배관공사	롯데 건설
연결도로 (609호선)	․홍성측 0.67km ․덕산측 1.55km	447	’09.12 ~ ’12. 12	91.3	1.4	92.7 92.7	·봉신교 난간 Con'c타설 ·1공구 보도블럭 시공	한화 동우
진입도로 (8.43km)	․홍성측 4.33km ․예산측 4.10km	1,117	’11. 7 ~ ’14. 6	45.6	0.8	46.4 46.4	·토공사(흙운반, 흙쌓기) ·횡배수관 설치, 되메우기	동성 건설
내포 초등학교	․연면적 11천㎡ ․지하1층/지상5층	148	’12. 1 ~ ’13. 2	51.0	2.9	53.9 53.9	·외부 조적작업 및 내부 마감공사 추진	세광 건설
내포 중학교	․연면적 10천㎡ ․지하1층/지상5층	130	’12. 1 ~ ’13. 2	55.3	2.1	57.4 57.4	·외부 조적작업 및 내부 마감공사 추진	케이앤 건설
롯데APT 건립공사	․연면적 144천㎡ ․지상15~20층	1,827	’11. 1 ~ ’12.12	94.6	1.9	96.5 96.5	·마무리 보완작업 추진	롯데 건설
극동APT 건립공사	․연면적 141천㎡ ․지상13~20층	1,912	’11.11 ~ ’13.12	15.7	-	15.7 -	·공사중지(재착수일 :미정)	극동 건설
효성APT 건립공사	․연면적 137천㎡ ․지상18~26층	1,882	’12.05 ~ ’14.09	5.1	0.3	5.4 5.3	·토공사, 지하층 기초공사	진흥 기업