내포신도시 개발사업 주간공정 보고

(2012. 11. 29. 현재)

공사명	공 사 개 요	공사비 (억원)	사 업 기 간	진도(%)			사업추진 내 용	시공사
				전주	금주	누계 계획
도 청 사 건립공사	․연면적 104천㎡ ․지상 7층	2,327	’08.12 ~ ’12.12	99.8	-	99.8 99.7	·잔여부위 마무리 공사	계룡 건설
교육청사 신축공사	․연면적 27천㎡ ․지상 7층	477	’11.4 ~ ’12.12	83.5	1.7	85.2 85.0	·내부도로 포장공사	계룡 건설
경찰청사 신축공사	․연면적 20천㎡ ․지상 7층	344	’11. 5 ~ ’13. 9	55.8	0.9	56.7 56.7	·본관동 지하층 보온작업	장위 건설
2-1공구 조성공사	․면적 991천㎡	344	’09. 5 ~ ’13. 5	91.7	0.3	92.0 89.3	·대1-2 보도블럭 배열 ·대1-1 표층 아스콘포설	현대 건설
2-2공구 조성공사	․면적 880천㎡	424	’10. 4 ~ ’13.10	75.8	0.7	76.5 76.5	·대2-10 중분대 경계석 설치	극동 건설
2-3공구 조성공사	․면적 1,910천㎡	321	’10.11 ~ ’13.11	62.8	0.9	63.7 63.5	·관사부지 진입로 우수 받이 설치	현대 아산
1-1공구 조성공사	․면적 1,422천㎡	467	’11. 8 ~ ’14. 7	51.6	0.9	52.5 44.0	·대1-1 표층/보도 포장 ·이주단지 경계석 설치	코오롱 건설
3-2공구 조성공사	․면적 1,182천㎡	310	’12. 1 ~ ’15. 1	29.6	0.5	30.1 23.6	·토공사 및 관로공사	동성 건설
하수처리시설 건설공사	․용량 44천톤/일	664	’10.10 ~ ’13. 4	86.3	0.3	86.6 85.4	·슬러지 반출시설 벽체 철근 및 거푸집 설치	G S 건설
자동집하시설 건설공사	․집하장 2개소 ․이송관로40.2㎞	750	’10.10 ~ ’13.10	42.9	0.9	43.8 43.3	·대로3-4,2-11 이송관로 터파기 작업	포스코 건설
지 구 외 생태하천	․신경천 1.72㎞ ․목리천 0.63㎞	16	’10.12 ~ ’13.01	95.9	-	95.9 -	·공사중지	구일종합건설
조경공사	․2구역 (1,062천㎡)	349	’12. 2 ~ ’17. 2	16.1	1.8	17.9 18.5	·연결녹지8,9호 비옥토 운반 및 토공정리	승화 건설
전기공사	․2구역 (3,783천㎡)	127	’12. 2 ~ ’15. 2	20.0	0.6	20.6 20.5	·가로등주 및 등기구 설치 작업	삼흥 전력
집단에너지 공급시설	․열부하량 : 392.9 Gcal/h	7,800	’11. 7 ~ ’20.12	8.65	0.01	8.66 8.66	·공동구구간 열배관 공사	롯데 건설
연결도로 (609호선)	․홍성측 0.67km ․덕산측 1.55km	447	’09.12 ~ ’12. 12	94.1	1.2	95.3 95.3	·1공구 가로등 설치	한화 동우
진입도로 (8.43km)	․홍성측 4.33km ․예산측 4.10km	1,117	’11. 7 ~ ’14. 6	46.8	0.6	47.4 47.4	·응봉교 거푸집 설치	동성 건설
내포 초등학교	․연면적 11천㎡ ․지하1층/지상5층	148	’12. 1 ~ ’13. 2	56.1	9.7	65.8 65.8	·외부 복합판넬 작업	세광 건설
내포 중학교	․연면적 10천㎡ ․지하1층/지상5층	130	’12. 1 ~ ’13. 2	60.1	4.8	64.9 64.9	·바닥 인조석 깔기 작업	케이앤 건설
롯데APT 건립공사	․연면적 144천㎡ ․지상15~20층	1,827	’11. 1 ~ ’12.12	98.1	1.5	99.6 99.6	·마무리 보완작업 추진	롯데 건설
극동APT 건립공사	․연면적 141천㎡ ․지상13~20층	1,912	’11.11 ~ ’13.12	15.7	-	15.7 -	·공사중지	극동 건설
효성APT 건립공사	․연면적 137천㎡ ․지상18~26층	1,882	’12.05 ~ ’14.09	6.0	0.4	6.4 6.4	·토공사, 지하층 기초공사	진흥 기업