내포신도시 개발사업 주간공정 보고

(2012. 12. 06. 현재)

공사명	공 사 개 요	공사비 (억원)	사 업 기 간	진도(%)			사업추진 내 용	시공사
				전주	금주	누계 계획
도 청 사 건립공사	․연면적 104천㎡ ․지상 7층	2,327	’08.12 ~ ’12.12	99.8	0.1	99.9 99.9	·잔여부위 마무리 공사	계룡 건설
교육청사 신축공사	․연면적 27천㎡ ․지상 7층	477	’11.4 ~ ’12.12	85.2	4.3	89.5 89.5	·외부 토공 정리 및 교목식재	계룡 건설
경찰청사 신축공사	․연면적 20천㎡ ․지상 7층	344	’11. 5 ~ ’13. 9	56.7	0.6	57.3 57.3	·조적쌓기 작업	장위 건설
2-1공구 조성공사	․면적 991천㎡	344	’09. 5 ~ ’13. 5	92.0	0.6	92.6 89.9	·이주자 택지 보도블럭 및 경계석 배열	현대 건설
2-2공구 조성공사	․면적 880천㎡	424	’10. 4 ~ ’13.10	76.5	0.7	77.2 77.2	·대로1-1 대지경계블럭 경계석 설치	극동 건설
2-3공구 조성공사	․면적 1,910천㎡	321	’10.11 ~ ’13.11	63.7	0.7	64.4 64.1	·관사부지 경계석 시공	현대 아산
1-1공구 조성공사	․면적 1,422천㎡	467	’11. 8 ~ ’14. 7	52.5	0.6	53.1 44.7	·대1-1 보도경계석 설치 ·이주단지 경계석 설치	코오롱 건설
3-2공구 조성공사	․면적 1,182천㎡	310	’12. 1 ~ ’15. 1	30.1	0.5	30.6 24.0	·토공사 및 관로공사	동성 건설
하수처리시설 건설공사	․용량 44천톤/일	664	’10.10 ~ ’13. 4	86.6	0.5	87.1 85.9	·옥상 피뢰침 및 접지 및 CCTV 설치	G S 건설
자동집하시설 건설공사	․집하장 2개소 ․이송관로40.2㎞	750	’10.10 ~ ’13.10	43.8	1.1	44.9 44.5	·이송관로 터파기 작업	포스코 건설
지 구 외 생태하천	․신경천 1.72㎞ ․목리천 0.63㎞	16	’10.12 ~ ’13.01	95.9	-	95.9 -	·공사중지	구일종합건설
조경공사	․2구역 (1,062천㎡)	349	’12. 2 ~ ’17. 2	17.9	1.3	19.2 20.0	·근린5-1호 우수관 설치	승화 건설
전기공사	․2구역 (3,783천㎡)	127	’12. 2 ~ ’15. 2	20.6	0.5	21.1 21.0	·가로등주 및 등기구 설치 작업	삼흥 전력
집단에너지 공급시설	․열부하량 : 392.9 Gcal/h	7,800	’11. 7 ~ ’20.12	8.66	0.01	8.67 8.67	·열배관 매설 공사	롯데 건설
연결도로 (609호선)	․홍성측 0.67km ․덕산측 1.55km	447	’09.12 ~ ’12. 12	95.3	1.1	96.4 96.3	·1공구 옹벽 거푸집 조림	한화 동우
진입도로 (8.43km)	․홍성측 4.33km ․예산측 4.10km	1,117	’11. 7 ~ ’14. 6	47.4	0.5	47.9 47.8	·산수과선교 철근조립	동성 건설
내포 초등학교	․연면적 11천㎡ ․지하1층/지상5층	148	’12. 1 ~ ’13. 2	65.8	4.3	70.1 70.0	·외부판넬 붙임 작업	세광 건설
내포 중학교	․연면적 10천㎡ ․지하1층/지상5층	130	’12. 1 ~ ’13. 2	64.9	7.1	72.0 72.0	·바닥 대리석붙임 작업	케이앤 건설
롯데APT 건립공사	․연면적 144천㎡ ․지상15~20층	1,827	’11. 1 ~ ’12.12	99.6	0.3	99.9 99.9	·마무리 보완작업 추진	롯데 건설
극동APT 건립공사	․연면적 141천㎡ ․지상13~20층	1,912	’11.11 ~ ’13.12	15.7	-	15.7 -	·공사중지	극동 건설
효성APT 건립공사	․연면적 137천㎡ ․지상18~26층	1,882	’12.05 ~ ’14.09	6.4	0.2	6.6 6.5	·토공사, 지하층 기초공사	진흥 기업